АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   __17.05.2018__     №    _793_

О первоочередных мерах, утверждении планов 
организационно-технических и неотложных 
мероприятий по подготовке жилищного фонда,
объектов жилищно-коммунального хозяйства,
электро- и теплоэнергетики, социальной сферы
Гагаринского района Смоленской области 
к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро-  и теплоэнергетики, социальной сферы Гагаринского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов,  руководствуясь Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103,  распоряжением Администрации Смоленской области от 22.02.20178 № 168-р/адм «О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов», в соответствии с Уставом  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать штаб по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергетики, социальной сферы муниципального образования  «Гагаринский  район» Смоленской области  к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (далее - Районный штаб) и утвердить его состав (Приложение № 1).
2. Утвердить  общий план первоочередных организационно-технических мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергетики, социальной сферы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области к  работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (Приложение №2).
3.Утвердить  общий план неотложных мероприятий, финансируемых   из бюджетов Гагаринского городского поселения и  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - бюджета муниципального района) (Приложение № 3). 
4. Утвердить график остановки котельных и ЦТП Вяземского филиала        ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» с прекращением подачи горячего   водоснабжения в летний период  2018 года (Приложение № 4).     
5. Районному штабу (А.А.Жигалов):
5.1. Утвердить график проведения заседаний Районного штаба.
5.2. Проводить заседания один раз в две недели, по понедельникам. 
5.3. Организовать контроль по восстановлению резервных топливных хозяйств объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Гагаринский район).
6. Комитету     по   образованию  (О.Г. Позняк),   отделу   по   культуре    (О.В. Брехова),  отделу   по   физической   культуре, спорту и делам молодёжи (В.С. Панков) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Администрация района) обеспечить:
6.1. Участие своих представителей в заседаниях Районного штаба, на которых будет заслушиваться информация о ходе подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2018- 2019 годов.
6.2. Контроль за подготовкой объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.
6.3. Контроль над ежемесячными расчётами подведомственными организациями  за коммунальные услуги: по отоплению, холодному и горячему водоснабжению,   водоотведению, электроснабжению, газоснабжению;  сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. 
6.4. Контроль за бесперебойной работой систем теплоснабжения подведомственных организаций. 
6.5.  Контроль за созданием необходимого запаса топлива, его своевременной вывозкой и сохранностью в подведомственных и курируемых организациях. 
6.6. В срок до 01.07.2018 назначить приказами комиссии по оценке готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.
6.7. В срок до 01.09.2018 провести электротехнические измерения и испытания основного энергетического оборудования объектов с массовым пребыванием людей.
6.8.  В срок до 01.10.2018 обеспечить восстановление резервных источников электроснабжения для электрооборудования котельных I и II категории, отапливающих муниципальные учреждения. 
7. Руководителям теплоснабжающих предприятий - регуляторов газопотребления:
7.1. В срок до 01.10.2018 обеспечить создание 10-дневного запаса по резервным видам топлива. 
7.2.  Заключить договоры с потребителями различных форм собственности на поставку им тепловой энергии, с ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» - на поставку природного газа.
7.3.  В срок до 01.10.2018 осуществить необходимый капитальный и текущий ремонт энергетического оборудования, перекладку и ремонт тепловых сетей согласно планам мероприятий по подготовке энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, ремонт и восстановление резервного топливного хозяйства, обеспечение резервным топливом, предусмотрев мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.    
7.4. Обеспечить ежемесячные расчеты с предприятиями-поставщиками за потребленный природный газ, полученные энергетические ресурсы с учетом кассового разрыва, возникающего при платежах населения за тепловую энергию.
          8. Финансовому управлению Администрации района (Т.В. Кудрина) обеспечить контроль над проведением своевременных расчетов  организациями, финансируемыми из бюджета муниципального района, с поставщиками за потребляемые топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.
9. Управлению по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района (далее – Управление СиЖКХ) (О. И. Мартыненкова):  
9.1. Обеспечить организацию заседаний Районного штаба.
9.2. Организовать сбор, проверку достоверности и обобщение сведений о подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского и сельских поселений к работе в зимних условиях. 
9.3. Для Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству: 
9.3.1. Предоставлять статистическую отчетность о ходе подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов и его прохождении по формам:
	- № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», (далее – форма № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7, в соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 02.02.2018 № 102-р/адм, ежемесячно с 01.06.2018 по 01.11.2018;
	- № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе  жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 №206 - по состоянию на 01.12.2018;
	- № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 №206 - ежемесячно с 01.11.2018 по 01.04.2019;
9.3.2. В срок до 01.08.2018  завершить разработку лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2019 год для потребителей, финансируемых из местных бюджетов, и представить на окончательное согласование.
           9.4. Обеспечить контроль над вводом в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства, строительство и реконструкция которых осуществляется за счёт средств бюджетов различных уровней.
          10. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений  Гагаринского района Смоленской области: 
10.1. Создать штабы по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро-  и теплоэнергетики, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.
10.2. Завершить в срок до 15.09.2018 ремонт систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, конструктивных элементов зданий, утепление жилых домов, производственных и общественных зданий. Оформить в срок до 01.11.2018 паспорта готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2018/19 года в соответствии с федеральным законодательством и предоставить его в Управление СиЖКХ Администрации района.. 
10.3. Обеспечить выделение денежных средств из местных бюджетов на проведение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, на приобретение необходимых материально-технических ресурсов и создание запаса топлива.
10.4. Обеспечить контроль над проведением текущего и капитального ремонта (реконструкции) зданий и объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию указанных зданий и объектов.
10.5. Организовать контроль над восстановлением резервных топливных хозяйств объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований независимо от форм собственности.
10.6. Выявить бесхозяйные тепловые сети и до начала отопительного сезона 2018-2019 годов, но не более чем в течение 30 дней с даты их выявления, определить  теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями и которая до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети будет осуществлять их содержание и обслуживание.
10.7. Разработать и утвердить календарный план-график постановки на государственной кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. 
10.8. Обеспечить создание 45-дневного запаса по основным и 10-дневного запаса по резервным видам топлива к началу отопительного сезона 2018/19 годов.
10.9. В срок до последнего числа месяца отчетного периода   обеспечить предоставление в Управление СиЖКХ Администрации района формы № 1-ЖКХ (зима).
10.10. Заключить договоры с обслуживающими организациями на зимнее содержание улично-дорожной сети и сооружений на них в населенных пунктах.
      11. В срок до 15.09.2018 предприятиям и организациям всех форм собственности, их обособленным подразделениям, имеющим на своем балансе жилые дома и объекты коммунальной инфраструктуры, теплоэнергетического хозяйства, расположенным на территории Гагаринского  городского поселения и Гагаринского района:
- обеспечить выполнение ремонтных работ на системах электро-, тепло,- водо, – газоснабжения и водоотведения с применением энергосберегающих технологий, уделить особое внимание готовности тепловых сетей и котельных;
- подготовить жилые, общественные и производственные здания к эксплуатации в осенне-зимний период, обеспечить создание в них теплового контура.
     12. Руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории Гагаринского городского поселения и Гагаринского района, занятых выполнением предзимних работ, начиная с 1 июня 2018 года ежемесячно, до второго числа, следующего за отчетным месяцем представлять в Управление СиЖКХ Администрации района оперативный отчет о подготовке к работе в зимних условиях № 1- ЖКХ (зима) по форме, утвержденной Постановлением Федеральной службы  государственной статистики (Росстата) от 27.02.2006 №7.
13. В срок до 15.09.2018   управляющим и обслуживающим жилищным  организациям обеспечить готовность жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов и принять все меры по сокращению задолженности  населения за жилищно-коммунальные услуги.
14. В срок до 01.10.2018:
14.1. Всем организациям, находящимся на территории Гагаринского городского поселения и Гагаринского  района, участвующим в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от организационно-правовой формы и вида собственности, на основании актов проверки готовности к работе в осенне-зимний период, получить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов по ранее согласованным формам и предоставить их в Управление СиЖКХ Администрации района.
14.2. Организациям, эксплуатирующим автомобильные дороги и сооружения на них, обеспечить выполнение ремонтно-восстановительных работ, создание нормативного запаса песко-соляной смеси  и подготовку техники для содержания объектов в зимних условиях.
15. Гагаринскому лесничеству-филиалу ОГКУ «Смоленское управление лесничествами» (Н.А.Воробьев) выделить делянки для заготовки дров для обеспечения потребности населения и муниципальных учреждений в соответствии с заявками.
16. Предложить всем предприятиям и организациям, независимо от организационно-правовой формы и вида собственности, и населению Гагаринского района максимально погасить к началу отопительного сезона  имеющуюся задолженность: 
- за коммунальные услуги: по отоплению, холодному и горячему водоснабжению,   водоотведению, электроснабжению, газоснабжению; 
-   за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.
17. Еженедельно, начиная с 01.06.2018, руководителям управляющих организаций и предприятий  жилищно-коммунального хозяйства района представлять информацию  в Управление СиЖКХ Администрации района о проводимых предзимних работах.
18. Отделу ГО, ЧС и ЕДДС Администрации  района  (А.А. Захаров):
18.1. На основании типового регламента организации и применения временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории Гагаринского района Смоленской области разработать и утвердить типовой регламент организации временного электроснабжения потребителей района.
18.2. В срок до 25.06.2018  отработать схему  взаимодействия  с эксплуатационными, ремонтными, строительно-монтажными, транспортными, наладочными и другими организациями по предупреждению и ликвидации  аварийных ситуаций на объектах тепло-, электроэнергетики и коммунального хозяйства  Гагаринского района Смоленской области.
19. Данное постановление подлежит официальному опубликованию  в газете «Гжатский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
20.  Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев        	       	  

Приложение № 1
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район»
Смоленской области
от  __17.05.2018__  № _793_

СОСТАВ 

штаба по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергетики, социальной сферы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (далее - Районный штаб)

- Жигалов 
Алексей Анатольевич

	- первый заместитель Главы  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – муниципальное образование), начальник Районного штаба;	
- Мартыненкова 
Оксана Ильинична	- начальник Управления СиЖКХ  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, заместитель начальника Районного штаба; 	
- Гришина 
Марина Сергеевна	-главный специалист отдела ЖКХ Управления СиЖКХ, муниципальный жилищный инспектор, секретарь Районного штаба;	
- Мазур 
Сергей Станиславович 	- старший менеджер отдела ЖКХ Управления СиЖКХ Администрации района, секретарь Районного штаба;	
- Акимов 
Владимир Васильевич	- директор ООО «Стройизоляция»
 (по согласованию);	
- Акимов 
Сергей Владимирович   	-  директор ООО «Гагаринское ЖЭУ»
   (по согласованию);	
- Британова 
Наталья Николаевна 	- помощник Гагаринского межрайонного прокурора  юрист 1 класса (по согласованию);	
- Деев 
Геннадий Михайлович
	- Глава муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);	
- Дергачев  
Виктор Андреевич	- генеральный директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию);	
- Загородний  
Вадим Владимирович	 - Директор ООО «Маяк»  (по согласованию);
	
- Захаров 
Александр Алексеевич	 - начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации района;	
- Иванов 
Алексей Николаевич 	- начальник Гагаринского РЭС (по согласованию);	
- Иванов 
Виктор Иванович	- директор МУП «Горводоканал»  (по согласованию);	
- Крутова  
Юлия Викторовна	- начальник отдела ЖКХ Управления Администрации района; 	
- Кудрина 
Татьяна Валентиновна	 - начальник финансового Управления Администрации района; 	
- Кухарев  
Андрей Васильевич	- начальник Гагаринского РТС ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго (по согласованию);	
- Мирошник 
Александр Владимирович	- директор ООО «Факел» (по согласованию);	
- Молдованова 
Эльвира Михайловна	 - директор ООО «Наш Дом» (по согласованию;	
- Морозова 
Людмила Васильевна	 - заместитель Главы муниципального образования;	
- Пузиков  
Андрей Юрьевич	 - заместитель Главы муниципального образования;	
- Рогова 
Надежда Федоровна	 -  ведущий специалист отдела ЖКХ Управления СиЖКХ  Администрации района;	
- Семенов 
Владимир Михайлович	 - младший специалист инспекторского отдела ГУ «Государственная жилищная инспекция  Смоленской области» (по согласованию);	
- Толкачева 
Неля Алексеевна	- начальник МУП «Управление ЖКХ и С» 
(по согласованию);	
- Хайленко 
Дмитрий Владимирович	- руководитель Гагаринского участка филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» (по согласованию);	
- Чернов 
Виктор Иванович	- директор ООО «Кармановское ЖЭУ» (по согласованию)	

Отпечатано  в  1  экземпляре  в дело.
Исполнитель:
_____________        Ю.В.Крутова
3-50-70
«____» мая 2018 г.

	Разослать с приложениями -  3 экз. :прокуратура,  Управление  С и ЖКХ ,
 финансовое управление;
разместить с приложениями: на сайте Администрации, в информационном ресурсе Администрации;
без приложений -  38 экз.:  
отдел ГО, ЧС и ЕДДС, Комитет по образованию, отдел по культуре, отдел по ФКСиДМ, СОГБУ «Гагаринская ЦРБ», ВФ ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго», ООО «Факел»,  МУП «ПЖРТ», МУП «ТКЦ», МУП «Управление ЖКХ иС», МУП «Горводоканал», МУП «Коммунальщик», Гагаринский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор», ООО «Стройизоляция», ООО «Наш дом», ООО «Гагаринское ЖЭУ», ООО «Управляющая компания», ООО «Кармановское ЖЭУ», ООО «Маяк», Гагаринский РЭС, МБУ «ФОК «Восток», Гагаринское лесничество, Кармановское лесничество, 
15-главам сельских поселений.	

Визы:
А.А.Жигалов         ___________________________         ______________________                       

Т.В. Кудрина       ____________________________          ____________________

С.М. Епишина     ___________________________         ______________________  
                                                                     
О. И. Мартыненкова  __________________________          ______________________  

М.А.Успенская  __________________________           ______________________  

	                                                                                                                             Приложение № 2	                                   Приложение № 2
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от  __17.05.2018__  № _793_
Общий план
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергетики, социальной сферы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области к работе в осенне - зимний период 2018-2019 годов
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
№
п\п	Наименование мероприятий 	Планируемый объем работ	Срок исполнения	Исполнитель 	
I. Сети водоснабжения и водоотведения	
МУП «Горводоканал»	
Участок канализации	
1.	Экспертиза технического состояния КНС №4	-	август-сентябрь	МУП «Горводоканал»	
2.	Ремонт и восстановление смотровых канализационных колодцев	25 шт.	апрель - сентябрь		
3.	Промывка самотечной канализационной сети	35 км	май - август		
Очистные сооружения канализации		
4.	Обваловка песковых площадок, восстановление искусственного дренажа	3 шт	май -август		
5.	Ревизия гидроэлеваторов, песколовок	2 шт	март - июнь		
6.	Ремонт выпускного коллектора ж/б Д 600 мм. от ОСК до р. Гжать	500 м.	июнь - август		
7.	Бетонирование поверхности илоперегнивателей 	340 кв.м	июнь - август		
8.	Замена оконных блоков в лабораторном корпусе	12 шт.	май - август		
Участок водопровода		
9.	Реконструкция участка  магистрального водовода Верхне-Гжатского водозабора	450 м	июль-сентябрь		
10.	Реконструкция водопроводной сети по ул. Герцена	1414 м	май июнь		
11.	Реконструкция участка магистрального водовода Столбовского водозабора по ул. Танкистов и ул. Мичурина	1300 м 	июнь-ноябрь		
12.	Реконструкция водопроводной сети по ул. Новая к ж/д №1,2.  МСО	80 м	февраль		
13.	Реконструкция водопроводной сети в районе ВНС по ул. Строителей	70 м	март		
14.	Реконструкция водопроводной сети по ул. Калужская	70 м.	март		
15.	Подключение к реконструированному водопроводу ж/д по ул. Добровольского, ул. Космонавта Волкова	-	Апрель - июнь		
16.	Реконструкция участка водопроводной сети Верхне – Гжатского водовода по ул. Советская до РЖД	З00 м	август		
17.	Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Строителей напротив СТО	150 м	май-июнь		
18.	Реконструкция водопроводной сети от ул. Ленина до ж/д №75,77	150 м	июль-август		
19.	Устройство перемычки по ул. Маяковского Столбовского водовода с городским	-	сентябрь		
20.	Устройство перемычки по ул. Молодежная от ж/д №10 до ж/д №2	100 м	апрель - май		
21.	Устройство перемычки по ул. Герцена со Столбовским водоводом		октябрь		
23	Реконструкция участка водопроводной сети к ж/д №7 по пер. Студенческий	80 м	сентябрь - октябрь		
24.	Ремонт водопроводных колодцев с заменой запорной арматуры	15 ед.	май - сентябрь		
25.	Промывка водопроводных сетей 	40 км	май - сентябрь		
26.	Замена, ревизия пожарных гидрантов	6 ед.	май - август		
27.	Замена, ревизия водоразборных колонок	10 ед.	май - август		
Центральный водозабор	
28.	Очистка и дезинфекция РЧВ (резервуар чистой воды) 	2 шт	июль - август		
29.	Замена запорной арматуры 	12 ед.	апрель - октябрь		
30.	Замена теплотрассы	360 м	июль - август		
31.	Установка промывнова насоса	1 шт	март - апрель		
Столбовский водозабор	
32.	Разработка документации на газификацию котельной	-	апрель - май		
33.	Подготовка котельной к отопительному сезону	-	май - сентябрь		
Верхне-Гжатский водозабор	
34.	Обвязка 3-х скважин	-	июль -сентябрь		
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	
35.	Строительство газопровода  по улице Красноармейская для перевод на индивидуальное отопление домов по ул. Красноармейская, 80,82 	1 шт	2-3 квартал		
II. Жилищный фонд	
ООО «Стройизоляция»	
36.	Установка рассечек на вводах в тепловых пунктах домов	71 шт.	май	ООО «Стройизоляция»	
37.	Промывка и опрессовка систем отопления	71шт.	июнь-август		
38.	Ревизия запорной  арматуры	680 шт.	май-август		
39.	Ремонт внутренних трубопроводов 	320 п. м	май-август		
40.	Ревизия оборудования тепловых пунктов, поверка и установка КИП	71 шт.	май-июль		
41.	Снятие рассечек на вводах систем отопления ж/домов	71 шт.	сентябрь		
42.	Наладка и регулировка систем отопления и ГВС	71 шт	сентябрь		
43.	Текущий ремонт жилого фонда в т. ч:
Ремонт дверных полотен и заполнений	6 шт.	июнь-сентябрь		
44.	Остекление мест общего пользования	15 м2	июль-сентябрь		
45.	Заделка кирпичом подвальных продухов	6 шт.	сентябрь-октябрь		
46.	Ремонт изоляции наружных межпанельных швов	1800 м..п.	май-октябрь		
47.	Ремонт мягких кровель	2900 м2	июнь - сентябрь		
48.	Ремонт шиферных кровель	70 м2	июнь - сентябрь		
    49.	Ремонт козырьков балконов и  входов в подъезды	3 шт.	май-август		
50.	Установка пружин на дверях	40 шт.	август-сентябрь		
 ООО « Гагаринское ЖЭУ»	
51.	Установка рассечек на вводах в тепловых пунктах домов	21шт.	май	ООО «Гагаринское ЖЭУ»	
52.	Ревизия запорной  арматуры	84 шт.	май -август		
53.	Ремонт внутренних трубопроводов 	15 п.м	май-август		
54.	Промывка и опрессовка систем отопления	21шт.	июнь-август		
55.	Ревизия оборудования тепловых пунктов, поверка и установка КИП	21 пункт	май-июль		
56.	Ремонт печей	2 шт.	июнь - август		
57.	Наладка и регулировка систем отопления и ГВС	21 шт.	сентябрь		
58.	Ремонт дверных полотен и заполнений	2 шт.	июнь-сентябрь		
59.	Снятие рассечек на вводах в домах системы отопления	21 шт.	сентябрь		
60.	Остекление мест общего пользования	8 м2	июль - сентябрь 		
61.	Заделка продухов в подвалах	2 шт.	сентябрь-октябрь		
62.	Ремонт мягких кровель	1300м2.	июнь-сентябрь		
63.	Ремонт шиферных кровель	90 п.м.	июнь-сентябрь	
	
64.	Установка пружин на дверях	20 шт	август - сентябрь		
65.	Ремонт козырьков балконов и входов в подъезды	2 шт	май - август		
ООО «Управляющая компания»	
66.	-кровли мягкие	420 м2	апрель - сентябрь	ООО «Управляющая компания»	
67.	-кровли шиферные	10 м2	Май сентябрь		
68.	-прочистка вентканалов	140 м2	По заявлениям		
69.	-замена трубопроводов отопления	40 п.м	аварийно-
восстановительные
работы		
70.	-замена труб горячего водоснабжения	80 п.м.			
71.	-замена труб холодного водоснабжения	170 п.м.			
72.	-замена труб канализации	80 пм			
73.	-замена запорной арматуры	220 шт.	май - октябрь		
74.	-теплоизоляция инженерных сетей в тамбурах и подвалах	3 м3	май - октябрь 		
75.	-ремонт, изготовление и установка окон и дверных заполнений	41 шт.	май - октябрь		
76.	-ремонт цоколя и отмосток	300 м2	май - октябрь		
77.	-ремонт аварийных балконов (по заявлениям)	6 шт.	май - октябрь		
78.	Благоустройство дворовых территорий 	11 шт.	май - сентябрь		
79.	Кронирование и удаление пересохших деревьев	12 шт	весна - осень		
80.	Ремонт внутридомовых электрощитов	40 шт.	апрель - октябрь		
81.	Прочистка лежаков канализации по подвалам	500 м3	По заявкам		
82.	Промывка и опрессовка систем отопления	74 дом.	май - сентябрь		
    83.	Остекление мест общего пользования	28 м2	май-сентябрь		
84.	Промывка квартирных приборов отопления	8 шт.	май - октябрь		
 ООО «Наш Дом»	
85.	Установка рассечек на вводах отопления в тепловых пунктах	36 шт.	май	ООО «Наш Дом»	
86.	Промывка и опрессовка систем отопления, ГВС и ХВС	18 шт.	согласно графику		
87.	Ревизия запорной арматуры тепловых пунктов и стояков  	72 шт.	май-август		
88.	Ремонт и  замена трубопроводов отопления, ГВС и ХВС, окраска, ремонт теплоизоляции	60 п.м.	май- август		
89.	 Ревизия оборудования тепловых пунктов, проверка и установка КИП 	18 пунктов	июль-август		
90.	Снятие рассечек на вводах систем отопления жилых домов	36 шт.	сентябрь - октябрь		
91.	Наладка и регулировка  систем отопления и ГВС 	26 систем	сентябрь - октябрь		
92.	Ремонт входных и тамбурных дверей, установка доводчиков	5 шт	май - сентябрь		
93.	Ремонт и остекление окон в подъездах 	8м2	июль - сентябрь		
94.	Заделка подвальных продухов	6 шт.	сентябрь		
95.	Обслуживание и ремонт энергоснабжения жилого фонда	по заявкам и по плану	постоянно		
96.	Прочистка вент  шахт, оштукатуривание вент шахт , установка зонтов	5 шт	май-август		
97.	Восстановление отмостки вокруг дома	40 м 2	май - октябрь		
98.	Ремонт межпанельных швов 	42 п. м.	май - октябрь		
99.	Заделка и оштукатуривание трещин на фасаде	15 п.м.	май - октябрь		
100.	Ремонт козырьков и входов в подъезд	4 шт.	Май - октябрь		
МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства»	
Городской жилищный фонд 	МУП «УЖКХиС»	
101.	Ревизия тепловых узлов  на ж/домах  с заменой (при необходимости )запорной арматуры , доукомплектование их контрольно-измерительными приборами.		май-август		
102.	Гидравлические испытания тепловых систем  жилых домов, находящихся в обслуживании  МУП «Управление ЖКХ и С»		июнь-август		
103.	Замена задвижек Ду50 мм в тепловом узле  ж.д. ул.Мелиоративная д.4,	2 шт	июнь-август		
104.	Замена задвижек  Ду 50мм на вводе  гвс  ул.Красноармейская д.52.	4 шт.	июнь-август		
105.	Утепление торцевых стен  по пер. Мелиоративный  д. №№ 4,6		май-сентябрь		
106.	Замена  электропроводки  и щитков  в подвале  ул.Заводская д. 20 с. Серго- Ивановское  с.п		сентябрь		
107.	Замена электропроводки в подвале
Замена  лежака  хвс  в подвале на полипропиленовые трубы. в 1-м  подъезде  ул. Мира д. 1мкр.. Лесной		Июль		
108.	Ремонт  кровли  над  кв.  № 4 ул. Юн. Космонавтов д. 9а мкр. Лесной		май		
Районный жилищный фонд		
109.	Ремонт  двери  металлич. входной  Установка  почтовых  ящиков Ремонт  штукатурки   цоколя  возле  под № 1 ул. Советская д. 6 д. Родоманово		июнь – сентябрь	инж. Мищенков Н.Е.	
110.	Ремонт    штукатурки  стен  тамбура  под. № 1 ул. Советская д. 7 д. Родоманово		июнь – сентябрь		
111.	Установка колпаков  над вентшахтами  ул. Мира д. 3 д. Родоманово.		июнь – сентябрь		
112.	Установка дверей металлич. на петли ул. Парковая д. 2 с. Пречистое		май		
113.	Замена деревянных полов в подъездах на плитку ул. Центральная д. 5 с. Пречистое.		июль		
114.	Замена  входных дверей в подъезды 
Ремонт  тамбура  в  подъездах.
Прочистка  дымовых  труб д. Мамоново ул. Центральная д. 1		август	инж. 
Деменюк И.В.	
115.	Замена  электрощитков  в подъездах ул. Заводская д. 8 с. Серго- Ивановское с.п.		Июнь	гл. инж.
Мамонтов А.А.	
116.	Ремонт тамбуров в подъездах (замена полов, ремонт и окраска стен и дверей)
Прочистка  дымовых  труб д. Мамоново ул. Центральная д. 2		август	инж. 
Деменюк И.В.	
117.	Окраска  вход. метал. лверей (фанера)
Установка  тамбурных  дверей ул. Заводская д. 11 с. Серго – Ивановское с.п		август		
118.	Устройство  козырьков  над  входом в под. Установка  входных  металлических  дверей ул. Заводская д. 15 с. Серго-Ивановское с.п.		май		
119.	Замена  электропроводки в подъездах
Замена  электрощитка  и вынос из подвала 
Замена подвальной  двери под. № 3 ул. Заводская д. 19 с.Серго- Ивановское с.п		сентябрь	гл. инж.
Мамонтов А.А.	
120.	Замена  электропроводки  и щитков  в подвале  ул.Заводская д. 20 с. Серго- Ивановское  с.п		сентябрь		
ООО «Кармановское ЖЭУ»	
121.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры в подвалах жилых домов		июнь-август	ООО «Кармановское ЖЭУ»	
122.	Частичная замена шифера, коньков м-н Западный д.5; 2;3	30 шт	июнь-июль		
123.	Замена центрального водопровода и канализационной системы м-н Западный д.1	27 п.м.	май - июнь		
124	Косметический ремонт  м-н Западный, д. 2	4 шт.	май-июнь		
125.	Ремонт балконных козырьков м-н Западный, д.1	8 шт.	май - июль		
126.	Установка стекол на лестничных площадках м-н Западный , д. № 1,2,3,4,5	7  шт.	июнь - сентябрь		
127.	Замена электропроводки в подвальном помещении, замена датчиков движения и светильников на лестничных площадках м-н Западный д. №1,3,5	53 шт	май-сентябрь		
128.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры в подвалах жилых домов м-н Западный	по мере необходимости	июль-сентябрь		
129.	Замена входных дверей м-н Западный д. №5	3 шт.	июль - октябрь		
130.	Частичный ремонт труб ГВС в подвале м-н Западный д.№5	8 п.м.	июль - август		
III. ТЕПЛОЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	
ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (Районная котельная)	
131.	Замена и ремонт арматуры ТС	414 шт	май-август	Гагаринские РТС	
   132.	Текущий ремонт и обслуживание оборудования котельной	11 шт.	апрель - сентябрь		
133.	Ремонт и обслуживание оборудования ЦТП	3228 м 	апрель - ноябрь		
134.	Ремонт тепловых сетей 	373 шт	апрель		
135.	Текущий ремонт тепловых сетей	10 шт.	апрель- октябрь		
136.	Ремонт и замена насосных агрегатов	       11 шт.	июнь-август		
137.	Ремонт оборудования котлов	2 шт. 	июнь		
138.	Ремонт производственных зданий и сооружений 	3 шт. 	август		
139.	Благоустройство территории после земляных работ 	300 м2	август		
140.	Ремонт оборудования ЦТП	316 м2	ноябрь		
141.	Благоустройство территории после выполнения земляных работ 	300 м2	август		
 Котельная БМК-1 (ул. Бахтина)	
142.	Ремонт и техническое обслуживание ЦТП	11 шт.	апрель - июнь	Гагаринские РТС	
143.	Текущий ремонт оборудования ЦТП	30 м2	сентябрь		
144.	Ремонт и техническое обслуживание оборудования котельной 	36 шт.	апрель-сентябрь		
145.	Ремонт и замена арматуры ТС	146 шт.	май-июнь		
146.	Ремонт ТС              	1 шт.	май- июль		
147.	Благоустройство территории после земляных работ   	50 м2
	август
		
148.	Ремонт ТС с заменой участков трубопровода	152 м	май-июнь		
      Котельная БМК-2 (ул. Заводская)	
149.	Ремонт и техническое обслуживание ЦТП               	5 шт.	апрель - сентябрь	Гагаринские РТС	
150.	Текущий ремонт оборудования ЦТП	56 м	июль		
151.	Ремонт и техническое обслуживание оборудования котельной 	34 шт.	апрель-сентябрь		
152.	Ремонт арматуры ТС  	10 шт.	май		
153.	Текущий ремонт ТС	1 шт.	май		
154.	Благоустройство территории после выполнения земляных работ 	30 м2	сентябрь		
           Котельная БМК  -3  (м/н «Лесной»)	
155.	Ремонт и техническое обслуживание оборудования котельной	31 шт.	апрель - сентябрь	Гагаринские РТС	
156.	Ремонт и замена арматуры ТС	26 шт.	май-июль		
157.	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС	157 м.	август-окттябрь		
158.	Текущий ремонт ТС	1 шт	май		
159.	Ремонт  насосных агрегатов	1 шт	июнь		
160.	Замена и установка клапанов	1 шт	июнь		
161.	Ремонт зданий и сооружений	20 м2	август		
162.	Покраска/побелка трубопроводов котельной	1 шт	сентябрь		
          Котельная БМК  по ул. Пушная	
163.	Ремонт и техническое обслуживание оборудования котельной	12 шт	июнь - сентябрь	Гагаринские РТС	
164.	Ремонт насосных агрегатов	5 шт.	июль		
165.	Ремонт арматуры ТС	20 шт	май - июль		
166.	Текущий ремонт ТС	1 шт.	май		
167.	Покраска/побелка оборудования трубопроводов	1 шт.	сентябрь		
 Котельная с. Карманово	
168.	Ремонт и техническое обслуживание оборудования котельной	72 шт.	апрель - сентябрь		
169.	Ремонт и замена арматура ТС	161 шт	май-июль		
170.	Ремонт ТС с заменой участков трубопровода	364 м	июнь -июль		
171.	Ремонт и техническое обслуживание оборудования ЦТП	2 шт	июль - август		
172.	Ремонт котлов	2 шт	май		
173.	Текущий ремонт ТС	2 шт	май-июнь		
174.	Ремонт тепловых камер ТС	4 шт	июнь		
175.	Ремонт насосных агрегатов	10 шт	июль		
176.	Ремонт оборудования ХВО	1 шт. 	июль		
177.	Покраска/побелка трубопроводов ТС, ЦТП, котельной 	2 шт	август - сентябрь		
178.	Ремонт тепловой изоляции 	10 м	сентябрь 		
179.	Благоустройство территории после выполнения земляных работ	50 м2	сентябрь		
                                                         Сети от котельной ООО «Факел»                                         		
180.	Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов	546 м	июнь - сентябрь		
181.	Ремонт теплоизоляции ТС	30 м	сентябрь		
182.	Ремонт и замена арматуры ТС 	115 шт	июль		
183.	Текущий ремонт ТС	2 шт	Май - июнь		
184.	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов и ГВС	23 м	сентябрь		
185.	Ремонт кровли котельных/ЦТП/Гарижей	266 м2	май		
                                                                                                           Котельная ООО «Факел»	
Водогрейная котельная	
186.	Ремонт котла ПТВМ-30 №1 (ремонт горелочных устройств, ревизия запорной арматуры)	6 единиц
10 задвижек	май	ООО «Факел»	
187.	Ремонт котла ПТВМ-30 № 2 (ремонт горелочных устройств, ревизия запорной арматуры)	6 единиц
10 задвижек	май		
188.	Текущий ремонт сетевых насосов (Д-630/90 №2,Д-630/90 №3)  	2 ед.	август,апрель		
189.	Текущий ремонт  ХВО 	22 з/о
500 кг	май		
190.	Промывка емкости деаэратора ДСА-15/50	1 шт.	май		
191.	Текущий ремонт подпиточных насосов К-20/30 №1,К-45/50 №2, К-45/50 №3	3 единицы	май, октябрь, декабрь		
192.	Ремонт насосов рециркуляции НКУ-250/50№1, НКУ 90/50 №2	2 шт.	март, июль		
193.	Ревизия электроводонагревателей насосного оборудования	13 шт.	апрель-сентябрь		
194.	Текущий ремонт насосов сырой воды КМ-50/50 №1, КМ-80/125 №2	2шт	июль, июнь		
195.	Текущий ремонт насоса ГВС К – 45/50 №1	1 шт	май		
196.	Ревизия запорной арматуры	34 з/о	май		
197.	Промывка щелевого деаэратора соляной кислотой	1 шт./30 кг	май		
198.	Промывка резервных баков сырой воды	2 шт.	май		
199.	Опрессовка и гидропневматическая промывка внутренних трубопроводов теплосети, (ревизия запорной арматуры, очистка грязевиков)	270 п.м.	июль		
200.	Покраска оборудования и трубопроводов	26 з/о	май - октябрь		
201.	Проверка и настройка приборов КИПиА	12 шт.	апрель-май		
202.	Проверка манометров КИПиА	110 шт.	апрель - май		
203.	Ревизия электромоторов для сетевых, подпиточных  и рециркуляционных насосов	7 шт.	апрель-май		
204.	Ревизия шкафов управления для котлов ПТВМ №1	2 шт.	апрель - май		
205.	Ревизия автоматических выключателей, контакторов, пускателей в электрощитовой	40 шт	июнь-июль		
206.	Ревизия освещения в котельной	100 светил	июль - август		
Паровая котельная		
207.	Ремонт запорной арматуры насосного оборудования	20 шт.	апрель-сентябрь		
208.	Текущий ремонт котла ДЕ 16/14 ГМ и вспомогательного оборудования	1 шт.	март - май		
209.	Текущий ремонт парового котла ДКВР 6,5/13 №3 и вспомогательного оборудования	1 шт.	февраль		
210.	Текущий ремонт питательных насосов ЦНСГ 38/220 №1, ЦНСГ 13/175 №2, ЦНСГ 13/245 №3	3 шт.	февраль-ноябрь		
211.	Текущий ремонт насосов сырой воды К 45/50№1, К-45/50 №2	2 шт.	май-июнь		
212.	Текущий ремонт подогревателя ГВС	1 шт.	май		
213.	Промывка емкости деаэратора ДСА-25/50	1 шт.	май		
214.	Ремонт запорной арматуры ХВО	34 ед.	июнь		
215.	Покраска запорной арматуры оборудования и трубопроводов	99 м2	май-июль		
216.	Проверка и настройка приборов КИПиА	8 шт.	июнь		
217.	Проверка манометров и приборов КИПиА	60 шт.	апрель-май		
218.	Ревизия электродвигателей питательных насосов, вентиляторов, дымососов	10 шт.	апрель-август		
219.	Ревизия шкафов управления котлов ДЕ и ДКВР	2 шт.	апрель - май		
220.	Ревизия автоматических выключателей, контакторов, пускателей	30 шт	апрель - август		
221.	Ревизия освещения в паровой котельной 	50 светил	апрель - август		
222.
	Текущий ремонт парового насоса ПДВ-25/20 №1 ПДВ-25/20 №2	2 шт	май, август		
ГРУ	
223.	Проверка приборов учета	1 шт.	май		
224.	Текущий ремонт оборудования ГРУ, внутренних газопроводов	42 ед.	май		
225.	Покраска оборудования ГРУ и внутренних газопроводов	40 м2	апрель-сентябрь		
Солевое хозяйство	
226.	Ремонт солевых насосов Х-18/20 №1,2,3,4,5	5 шт.	январь-дека		
227.	Чистка бункера мокрого хранения соли	1 шт.	май		
228.	Чистка бункера сухого хранения соли	1 шт.	май		
229.	Ревизия запорной арматуры насосного оборудования	18 ед.	март – ноябрь 		
230.	Промывка баков раствора соль V-16 м3	2 шт.	май		
231.	Покраска оборудования и трубопроводов солевого хозяйства	28 м2	май-август		
Тепловые сети завода	
232.	Ревизия запорной арматуры  в ТП	12 ед.	май-июль		
233.	Промывка и опрессовка тепловых сетей		август		
 ООО «Маяк» 	
	котельная МКД ул. Комсомольская, д. 9				
234.	Промывка котлов «THERM-TRIO 90T»	2 шт.	июнь	ООО «Маяк»	
235.	Поверка контрольно-измерительных приборов	16 шт.	сентябрь		
236.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	12 шт.	июнь		
237.	Текущий ремонт трубопроводов системы отопления, промывка и опрессовка	1 шт.	сентябрь		
238.	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 	3 шт	сентябрь		
котельная ФОК «Восток» г. Гагарин	
239.	Промывка котлов КЧМ-5	4 шт.	июль	ООО «Маяк»	
240.	Промывка бойлера горячего водоснабжения	1 шт.	июль		
241	Поверка контрольно-измерительных приборов	38 шт.	сентябрь		
242.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	40 шт.	июль		
243.	Замена сетевого насоса ЦНЛ 32/110-15/2	1 шт.	август		
244.	Замена циркуляционного насоса горячего водоснабжения ЦНЛ 15/80-0,25/2	1 шт.	июль		
245.	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 	        6 шт.	июль		
котельная школы в д. Родоманово	
246.	Промывка котлов КЧМ-7	4 шт.	июнь	ООО «Маяк»	
	Капитальный ремонт  котла КЧМ-5	1 шт.	июнь		
247.	Поверка контрольно-измерительных приборов	17 шт.	сентябрь		
248.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	12 шт.	июнь		
249.	Ревизия и текущий ремонт системы автоматики котельной	1 шт	июль		
250.	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 	5 шт.	сентябрь		
котельная школы в д. Пречистое	
251.	Промывка котлов КЧМ-5	4 шт.	июнь	ООО «Маяк»	
	Капитальный ремонт  котлов КЧМ-5 №1,3	2 шт.	июль		
252.	Поверка контрольно-измерительных приборов	22 шт.	сентябрь		
253.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	15 шт.	август		
254.	Ревизия и текущий ремонт автоматической котельной ( замена датчиков давления газа – 2 шт)	1 шт	август		
255.	Установка насосной станции для подпитки системы отопления	1 шт	август		
256.	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов	5 шт	август		
котельная в д. Поличня, ул. Новая	
257.	Промывка котлов КТГ-0,16	2 шт.	май	ООО «Маяк»	
258.	Промывка и очистка пластинчатых теплообменников сетевой воды	2 шт.	май		
259.	Поверка контрольно-измерительных приборов	36 шт.	сентябрь		
260.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	32 шт.	июнь		
261.	Ревизия и текущий ремонт системы автоматики котельной (замена запальных электродов – 2 шт.)	       1 шт.	июль		
262.	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 	      5 шт	август		
263.	Техническое обслуживание системы автоматики и режимно – наладочные работы	1 шт	Сентябрь - октябрь		
МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства»	
Блочно модульная котельная МСОШ д. Акатово	
264.	Поверка контрольно-измерительных приборов	34 шт.	май-июнь		
265.	Режимные карты (режимно-наладочные испытания)	2 котла	июль		
266.	Протоколы эл. измерений		июль		
267.	Проверка резервных источников питания		май		
268.	Обучение  персонала(операторы, слесаря)		сентябрь		
269.	Замена резиновых ковриков на полы		май		
270.	Косметический ремонт ( покраска трубопроводов , дверей, стен)		май-июнь		
Блочно модульная котельная МСОШ д. Никольское	
271.	Поверка контрольно-измерительных приборов	23 шт.	май-июнь		
272.	Режимные карты (режимно-наладочные испытания)	3 котла	июль		
273.	Протоколы эл. измерений		июль		
274.	Замена вентилей (на воду)  Ду 40 мм	3 шт.	май		
275.	Замена теплообменников  	3 шт	май		
276.	Замена светильников  	1 шт	май		
277.	Косметический ремонт ( покраска трубопроводов , дверей, стен)		май-июнь		
278.	Обучение  персонала(операторы, слесаря)		сентябрь		
279.	Замена котла THERM TRIO -90   	1 котел	июнь		
Блочно модульная котельная МСОШ д. Токарёво	
280.	Поверка контрольно-измерительных приборов	38 шт.	май-июнь	гл. инж.
Мамонтов А.А.	
281.	Режимные карты (режимно-наладочные испытания)	4 котла	июль		
282.	Замена резиновых ковриков на полы		май		
283.	Протоколы эл. измерений		июль		
284.	Косметический ремонт ( покраска трубопроводов , дверей, стен)		май-июнь		
285.	Проверка резервных источников питания		май		
286.	Обучение  персонала(операторы, слесаря)		сентябрь		
Теплогенераторная   СДК д. Клушино	
287.	Поверка контрольно-измерительных приборов	21 шт	май-июнь	гл. инж.
Мамонтов А.А.	
288.	Режимные карты (режимно-наладочные испытания)	2 котла	июль		
289.	Протоколы эл. измерений		июль		
290.	Косметический ремонт ( покраска трубопроводов , дверей, стен)		май-июнь		
Теплогенераторная АБК  г. Гагарин, проезд Первомайский д.1а	
291.	Поверка контрольно-измерительных приборов	28 шт.	май-июнь		
292.	Режимные карты (режимно-наладочные испытания)	4 котла	июль		
293.	Протоколы эл. измерений		июль		
294.	Косметический ремонт ( покраска трубопроводов , дверей, стен)		май-июнь		
IV. Гагаринский РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	
295.	Капитальный ремонт ВЛ 6-10 кВ	3 шт./35,32км	март-май	Начальник РЭС, главный инженер РЭС	
296.	Расчистка просеки на ВЛ-10кВ	10,16 га.	февраль-март		
297.	Замена разъединителей РЛНД-10 кВ	1 шт.	май		
298.	Замена опор (стоек) на ВЛ-10 кВ с траверсой, хомутом, изоляторами	2 шт.	май		
299.	Вынос разъединителя	1 шт.	май		
300.	Р-ТП со ствола линии	1 шт.	май		
301.	Кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ	14 шт./14,667 км	апрель-сентябрь		
302.	Замена провода на ВЛ-0,4 кВ на большее сечение	0,8 (+0,25 СИП 2*16)	апрель-сентябрь		
303.	Замена опор (стоек) на ВЛ-0,4 кВ с траверсой, хомутом, изоляторами	174 н/в +4в/в	апрель-сентябрь		
304.	Замена изоляторов 0,4 кВ	584 	апрель - сентябрь		
305.	Кап ремонт ТП-10/0,4 кВ, шт./МВА	21/1,775	февраль-декабрь		
306.	Капремонт силовых трансформаторов на ТП- 10/0,4 кВ	9 шт.	июнь - декабрь		
307.	Замена автоматических выключателей в РУ-0,4кВ на ТП-10/0кВ	16 шт.	май-сентябрь		
308.	Замена н/в рубильников в РУ-0,4кВ на ТП-10/0,4 кВ 	7 шт.	май-сентябрь		
V. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	
МУП «Транспортно-коммерческий центр»	
309.	Установка заглушек на трубопроводы теплопункта согласно акту по разграничению балансовой принадлежности теплосетей		до 15.05.18	МУП «Транспортно-коммерческий центр»	
310.	Ремонт внутренних теплосетей в тепловом пункте (ремонт вентилей).		до 15.06.18		
311.	Промывка и испытание на прочность внутренних теплосетей	330 м	по графику организации подрядчика		
312.	Утепление окон в помещениях.		до 10.10.18		
313.	Ревизия состояния  мягкой кровли по необходимости. 		до 10.10.18		
314.	Очистка кровли от листьев и мусора 		20.08.18-15.11.18		
315.	Подготовка и закупка уборочного инвентаря к зимнему периоду		до 15.10.17		
                                                                                          МУП «ПЖРТ»	
316.	Гидравлическое испытание системы теплоснабжения городской бани	511 м.	май -июль	МУП «ПЖРТ»	
VI. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	
317.	Подготовка спецтехники	30 ед.	май-октябрь	МУП «Коммунальщик», Гагаринский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор»	
318.	Ямочный ремонт  улично-дорожной сети	101750 кв.м.	май-октябрь		
319.	Заготовка песко-соляной смеси	12350 тонн	май-октябрь		
320.	Прочистка колодцев ливневой канализации дорожной сети улиц г. Гагарин	33 ед.	2-3 квартал		
VII. ОБЪЕКТЫ  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЫ	
Комитет по образованию	
321.	Техническое  освидетельствование отопительных котлов, наладка котлов и оборудования, поверка приборов КИПиА котельных МБОУ «Ашковская основная школа», «Серго-Ивановская основная школа» «Колокольнинская основная школа»		май- август
	Комитет по образованию, руководители
образовательных
организаций	
322.	Замена приборов учета холодной воды – МБДОУ «Детский сад «Крепыш»;-МБДОУ «Детский сад «Жемчужинка»; - МБДОУ «Детский сад «Колокольчик»; - МБДОУ «Клушинская основная школа»; - МБДОУ «Родомановская средняя школа»; - МБДОУ «Пречистенская средняя школа»; МБУ ДО ЦДТ		май- август		
323.	Замена приборов учета электрической энергии  - МБОУ СШ №4; -МБОУ «Средняя школа №3»    		июнь- август		
324.	Замена и проверка приборов учета тепловой энергии – МБДОУ «Детский сад «Снежинка»; - МБДОУ «Детский сад им. Ю.А. Гагарина»; МБОУ СШ №4		май-август		
325.	Гидравлические испытания  внутренних систем отопления МСОШ  д. Акатово , МСОШ д.Никольское,МСОШ  д.Токарёво, СДК  д.Акатово	3700пм	май-сентябрь	По соглашению с директором МСОШ и отделом культуры	
мероприятия, выполняемые МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства»	
326.	Проведение очередных  режимно-наладочных работ по  БМТ МСОШ д. Акатово	2шт.	июнь-август		
327.	Проведение очередных поверок  средств измерений  и КиПА на БМТ МСОШ д. Никольское, КБТА  МСОШ д. Акатово, КБТА МСОШ д. Токарёво	68 ед.	май-август		
328.	Ревизия системы автоматики газовых горелок БМК д. Акатово	 1 котел
1 клапан	май		
329.	Ремонт (восстановление утепления, замена зонтов) на дымоотводящих трубах БМТ МСОШ д. Никольское	3 трубы	июнь		
330.	Очистка и химическая промывка теплообменников котлов  БМТ МСОШ д. Никольское (3 котла  THERM) и  КБТА МСОШ д. Токарёво (4 котла THERM) 	7 котлов	июль		
331.	Очистка и химическая промывка пластинчатых  водоподогревателей  КБТА  МСОШ д. Акатово и МСОШ д. Токарёво	2 шт.	Август -сентябрь		
Отдел по культуре	
332.	Поверка приборов учета тепла  МБУК МКДЦ  «Комсомолец» Кармановский КДЦ Гагаринская МЦБС Гагаринская ДМШ Гагаринская ДХШ		июнь-август	Руководители  учреждений	
333.	Замена прибора учета  холодной воды Кармановский КДЦ
		июль-август		
334.	Установка АПС МБУДО «Гагаринская ДМШ им.И.Д. Кобзона»		июль-август		
335.	Ремонт подвала  МБОУДО «Гагаринская ДМШ им.И.Д. Кобзона»		июль-август		
336.	Ремонт кровли Запрудниковского СДК		июль-август 		
337.	Ремонт кровли МБУК «Гагаринская МЦБС»		июль-август
		
338.	Ремонт кровли Никольского СДК		июнь-август		
339.	Ремонт кровли Родомановского СДК		июль-август		
340.	Восстановление водопровода к кранам гидрантам МБОУДО «Гагаринская ДМШ им.И.Д. Кобзона»		июль-август		
341.	Замена дверей в Акатовском СДК		июль-август		
342.	Замена 2-х настенных котлов ТГ СДК д. Родоманово	2 шт	Май-сентябрь		
Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи	
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию»	
343.	Ревизия циркуляционных  насосов, запорной  арматуры		август 	Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи	
344.	Ревизия электродного блока системы   хлорирования		август 		
345.	Опрессовка тепловых сетей		июнь 		
346.	Замена фильтрующего материала в емкости на спортивную  ванну		август		
347.	Ревизия бойлеров (тепловой узел)		июль 		
348.	Ремонт в спортивной и детской ваннах,  раздевалках,  душевых: замена плиток, замена ламп освещения, чистка, обработка, покраска  		август 		
349.	Ремонт в спортивном зале: замена кабеля, ламп, побелка.		сентябрь		
350.	Замена окон в кабинете ЛФК, в раздевалках  детской ванны		октябрь		
351.	Ремонт вытяжной вентиляции на крыше, парапетов, шахт воздуховодов, будки выхода  на крышу		август 
		
352.	Ремонт крыльца центрального входа		август 		
353.	Замена металлической трубы на пластиковую на вводе холодной воды		июль		
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1»	
354.	Промывка и испытание на прочность и плотность систем отопления и горячего водоснабжения		июнь	Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи	
355.	Ревизия и ремонт вентилей, задвижек на системах ГВС, ХВС, канализации		июль		
356.	Осмотр и проверка электропроводки		август		
357.	Осмотр и проверка водопроводных сетей		август		
358.	Осмотр и проверка утепления помещений		август		
359.	Замена разбитых стекол окон		июнь		
360.	Локальный ремонт кровель в местах вероятных протечек		июнь		
361.	Произвести частичный ремонт цоколя		июль		
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Восток»	
362.	Ревизия и ремонт вентилей, задвижек на системах ГВС, ХВС, канализации		июль 	Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи	
363.	Ревизия запорной арматуры систем теплоснабжения		июль 		
364.	Очистка ливневой канализации		май		
365.	Проверка на водоотдачу наружных и внутренних пожарных гидрантов		август		
366.	Утепление колодцев ливневой канализации		август		
367.	Локальный ремонт кровли ФОК		июнь		
368.	Теплоизоляция обратных стояков горячего водоснабжения в подсобных помещениях, не используемых в зимний период		сентябрь		
369.	Теплоизоляция окон, дверей		сентябрь		

Приложение № 3
к постановлению
  Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от  __17.05.2018__  № _793_
Общий план
неотложных мероприятий, финансируемых из бюджетов  
Гагаринского городского поселения и муниципального образования 
«Гагаринский район»  Смоленской области в 2018 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Стоимость,
(тыс. руб.)	
Гагаринское городское поселение Гагаринского района	
1.	Ремонт изоляции участка магистрального трубопровода тепловых сетей от Районной котельной до присоединения 5 к жилому дому №2 по адресу: г. Гагарин, проезд  МСО 	1 квартал	71,94546	
2.	Ремонт тепловой изоляции участков трубопроводов тепловых сетей от присоединения 6 к жилому дому №2 Воинский проезд; от присоединения 9 до присоединения 10; от присоединения 4 до присоединения 5 в г. Гагарине Смоленской области	1 квартал	93,8344	
3.	Ремонт участка трубопровода тепловых сетей ЦТП №11 котельной ООО «Факел» от ТК-17 до ТК-18до дома №4 по ул. Советская в г. Гагарин 	1 квартал	334,0448	
4.	Ремонт  участка трубопровода т/с от ЦТП 11 до ТК2 ( школа №1 ЦТП 11 от котельной ООО «Факел» в г. Гагарине)	3 квартал	1200,0	
5.	Ремонт участка трубопровода т/с от ТК 2 до здания Бассейна (ЦТП 11 от котельной ООО «Факел»  в г. Гагарине)	3 квартал	400,0	
6.	Приобретение двухконтурных котлов для перевода на индивидуальное отопление ул. Красноармейская д. 80,82 – 5 шт.	2 квартал	172,0	
7.	Приобретение материалов для замены водопровода длиной 1400 м.  от ул. Герцена д. 100 до ул. Космонавта Волкова	3 квартал	2000,0	
Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области 

Объекты образования	
1.	Заготовка и организация хранения топлива 
- Уголь – 165т
-Дрова- 25 м3	2 квартал	755,3	
2.	Проведение работ по испытанию на прочность и плотность, промывке трубопроводов систем отопления	2 квартал	400,5	
3.	Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом , проверка пожарных кранов и лестниц	2 квартал 	
342,9	
4.	Проведение замеров сопротивления изоляции	2 квартал	354,9	
5.	Замена приборов учета  тепловой энергии тепловой энергии  МБДОУ «Детский сад «Звездочка»	2 квартал	224,0	
6.	Замена прибора учета тепловой энергии  МБДОУ «Детский сад «Жемчужинка»	2 квартал	223,0	
7.	Замена прибора учета тепловой энергии  МБДОУ «Детский сад «Рябинка»	2 квартал	55,0	
8.	Ремонт тепломера МБОУ « Средняя школа №2»	2 квартал 	21,0	
9.	Реконструкция системы отопления МБОУ «Ашковская основная школа»	3 квартал	1103,0	
10.	Реконструкция системы  отопления МБОУ «Клушинская основная школа»	3 квартал	1048,00	
11.	Ремонт системы внутреннего водоснабжения  и пола коридора 1этажа МБДОУ «Детский сад «Солнышко»	3 квартал	250,0	
12.	Капитальный ремонт кровли МБОУ «Кармановская средняя школа»	3 квартал	6058,0	
13.	Ремонт спортивного и танцевального залов, коридора  и санитарного узла МБУДО ЦДТ	3 квартал	1364,24	

Объекты культуры	
1	Опрессовка системы отопления: МБУК МКДЦ  «Комсомолец» Кармановский КДЦ Гагаринская МЦБС Гагаринская ДМШ Гагаринская ДХШ 	июнь-август	49,3	
2	Приобретение твердого топлива для сельских учреждений культуры МБУК МКДЦ  «Комсомолец» дрова Гагаринская МЦБС дрова	апрель	217,8	
3	Контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций МБУК МКДЦ  «Комсомолец» Кармановский КДЦ Гагаринская МЦБС	июнь - декабрь	2,8	
4	Замеры сопротивления электропроводки
МБУК МКДЦ  «Комсомолец» и филиал. Гагаринская МЦБС Гагаринская ДМШ Гагаринская ДХШ	июнь -август	78,0	
5.	Огнезащитная обработка МБУК МКДЦ «Комсомолец» Кармановский КДЦ Гагаринская ДМШ	июль - август	78,5	

Приложение № 4
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от  __17.05.2018__  № _793_

ГРАФИ К
остановки котельных и ЦТП Вяземского филиала 
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" с прекращением
подачи горячего водоснабжения в летний период 2018 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата остановки по отоплению	Дата остановки по ГВС	Время ремонта отопления/ГВС	
1	2	3	4	5	
Гагаринское городское поселение	
1.	Районная котельная,(вкл. ЦТП1-ЦТП10) 
 Воинский проезд 1А 	28.04.2018	13.06.2018 - 03.07.2018	21 дней	
2.	ЦТП1-ЦТП6				
3.	БМК ул. Бахтина (БМК-1)	28.04.2018	09.07.2018- 22.07.2018	14 дней	
4.	БМК ул. Заводская (БМК-2)	28.04.2018	21.05.2018 - 03.06.2018	14 дней	
5.	ЦТП от ООО "Факел"	28.04.2018	21.05.2018-03.06.2018	14 дней	
6.	Котельная в микрорайоне  «Лесной» (БМК-3)	28.04.2018	-	153 дня	
7.	БМК ул. Пушная, 2а	28.04.2018	16.07.2018-29.07.2018	14 дней	
Кармановское сельское поселение	
8.	Котельная по ул. Заводская, д.4	28.04.2018	21.05.2018 - 03.06.2018	14 дней