АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __ 29.12.2018         № _2113_

Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
территории муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области»
на 2018-2021 годы

В целях энергосбережения и повышения энергетической  эффективности, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.10. 2011  № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»,  Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014   № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», в соответствии с  Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018-2021 годы (далее – Программа).
2. Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 21.08.2017 № 1210 (в ред. постановления от 26.12.2017 № 2156) «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2017-2019 годы» признать утратившим силу.
3. Контроль за ходом реализации Программы возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А.А. Жигалова.
4. Программу разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
5. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с  01.12.2018.

                                  
Глава муниципального образования   
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев

 

	УТВЕРЖДЕНА
постановлением 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от__29.12.2018___ №_2113_  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2018 – 2021 ГГ.

Паспорт 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»
на 2018- 2021 гг.

Администратор муниципальной программы	Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.	
Основание для разработки 
программы
	Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года           №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от
 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 
Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».
Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 24.10.2011 № 591 "О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях" 
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием  государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».	
Исполнители основных мероприятий муниципальной программы	Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
органы местного самоуправления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию);
организации, реализующие мероприятия муниципальной программы (по согласованию)	
Полное наименование разработчика
программы 	Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	
Цели муниципальной программы
	Повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.	
Задачи муниципальной  программы 
	- реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- повышение эффективности системы теплоснабжения;
- повышение эффективности системы электроснабжения;
- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;
- внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов   в муниципальных учреждениях;
- снижение потерь в сетях электро-, тепло- и водоснабжения;
- обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики.	
Целевые показатели реализации муниципальной программы	1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
- доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
- доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования.
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе:
- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений    (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
- удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений     (в расчете на 1 человека);
- удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений    (в расчете на 1 человека);
- удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений           (в расчете на 1 человека);
- отношение экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы;
- количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:
- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
- удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
- удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления         (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
- удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах.
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных;
- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;
- доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;
- удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр);
- удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр);
- удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).	
Сроки реализации муниципальной программы	2018 - 2021 годы	
Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 41723,825тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета - 0 тыс. рублей;
- средства бюджета района –0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета- 2470,145 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 39253,68тыс. рублей.
В том числе по годам:
2018 год –10331,525 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета - 0 тыс. рублей;
- средства бюджета района – 0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета- 943,545 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 9387,98тыс. рублей;
2019 год –10444,56тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета - 0 тыс. рублей;
- средства бюджета района - 0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета- 725,3 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 9719,26тыс. рублей
2020 год – 11030,42 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета - 0 тыс. рублей;
- средства бюджета района – 0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета- 487,2тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 10543,22тыс. рублей
2021 год – 9917,32тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета - 0 тыс. рублей;
- средства бюджета района –0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета- 314,1 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 9603,22 тыс. рублей	
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Суммарное сокращение расхода всех видов энергетических ресурсов в сопоставимых условиях составит
составит 806,107 – 1410,707 т у т ,  
воды - 26,4 – 52,7 тыс. куб. м

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

Гагаринский район с районным центром Гагарин расположен в северо-восточной части Смоленской области. На севере он граничит с Тверской областью, на западе – с тремя районами Смоленской области – Сычёвским, Вяземским, Тёмкинским, на востоке – с Московской областью. Площадь района - 2904 км².
Гагаринский район имеет выгодное географическое положение. По территории района проходят: железнодорожная магистраль Москва – Смоленск – Брест и Федеральная автомобильная дорога М1 «Москва-Беларусь» (Минское шоссе), которая является частью европейского маршрута E30 и азиатского маршрута AH6. Далее дорога переходит в автомагистраль в направлении Минск, Брест, Варшава. 
На территории района находится крайняя восточная точка Смоленской области (4 км к востоку от деревни Запрудня). Большую часть района занимают Гжатско-Рузская и Гжатско-Протвинская возвышенность. На западе расположена Гжатско-Вазузская (Сычёвская) низина.
Главная водная артерия района – река Гжать, которая впадает в реку Вазузу. Левый приток Гжати – река Яуза. Крупнейшее в средней полосе России Вазузско – Яузское водохранилище, является огромным резервуаром пресных вод, идущих на водоснабжение города Москвы.
Лесной фонд – один из важнейших компонентов природы района. «Природный парк «Гагаринский» площадью 45 тыс. га открывает прекрасные возможности для туризма, охоты, рыбалки, оптимизируются эксплуатация и застройка парковой зоны. 
В состав муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области входят 16 поселений: 1 Гагаринское городское поселение и 15 сельских поселений (Акатовское сельское поселение, Ашковское сельское поселение, Баскаковское сельское поселение, Гагаринское сельское поселение, Ельнинское сельское поселение, Кармановское сельское поселение, Мальцевское сельское поселение, Никольское сельское поселение, Покровское сельское поселение, Потаповское сельское поселение, Пречистенское сельское поселение, Родомановское сельское поселение, Самуйловское сельское поселение, Серго-Ивановское сельское поселение, Токарёвское сельское поселение).
Численность  постоянного населения Гагаринского района   на 1 января 2018 года составила 44649 человек.

Таблица № 2
№
п/п	Показатели	Ед. измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	
1	Численность населения крупнейших населенных пунктов:	тыс. чел.				
	Гагаринское городское поселение	тыс. чел.	29,476	29,285	29,041	
	Ашковское сельское поселение	тыс. чел.	1,65	1,615	1,603	
	Акатовское сельское поселение	тыс. чел.	1,238	1,252	1,246	
	Кармановское сельское поселение	тыс. чел.	2,467	2,439	2,443	
	Никольское сельское поселение	тыс. чел.	2,331	2,335	2,32	
	Токаревское сельское поселение	тыс. чел.	0,983	0,965	0,940	
	Пречистенское сельское поселение	тыс. чел.	1,027	1,011	1,021	
	Серго-Ивановское сельское поселение 	тыс. чел.	1,150	1,155	1,143	
	Родомановское сельское поселение	тыс. чел.	1,183	1,167	1,143	

Промышленность района включает следующие виды  экономической деятельности:  
- обработка древесины и производство изделий из дерева;
- производство готовых металлических изделий;
- производство пищевых продуктов;
-производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
- текстильное и швейное производство;
- строительство.	
Таблица № 3
Перечень наиболее крупных предприятий,
 определяющих развитие соответствующих отраслей

Производство пищевых продуктов 	
ООО «Гагарин-Останкино»	Производство продуктов из мяса, мясных субпродуктов	
ООО «КРОЛЪ и К »	Производство и переработка мяса кролика	
ООО «Гагаринский хлебозавод»	Производство хлебобулочных, сдобных, кондитерских, диетических и других изделий	
ЗАО «Гагаринконсервмолоко»	Производство сухой сыворотки, сывороточно-жирового концентрата, сухого цельного молока (СЦМ), сухого обезжиренного молока (СОМ), сухих сливок, сливочного масла и молочного жира.	
Производство одежды	
ООО «РозТех»	Производство элитного женского белья, купальников, домашней и пляжной одежды.	
Обработка древесины и производство изделий из дерева	
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»	Производство древесно-стружечных, ламинированных древесно-стружечных плит, МДФ  и ХДФ (жесткие и очень жесткие плиты для напольного покрытия), напольных покрытий и ХДФ (ламинат)	
Производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования	
ООО «Мобил К»	Производство мотоагротехники, навесного оборудования, садовой и коммунальной минитехники	
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	
ООО «Гагаринский машиностроительный завод»	Производство оборудования для нефтяной и газовой промышленности, оборудования для объектов энергетики, вахтовых жилых комплексов (ВЖК) для обустройства новых нефтегазовых месторождений 	
Производство электрического оборудования	
ОО О «ИЦ Электролуч»	 Разработка и производство специального взрывозащищенного светотехнического, светосигнального, коммутационного, монтажного электрооборудования. 	
ОАО «Гагаринский светотехнический завод»	Производство взрывозащитных, пылевлагонепроницаемых светильников применяемых на нефтеперерабатывающих, нефтегазовых и химических предприятиях страны,  аэродромных светосигнальных комплексов и другого светотехнического оборудования. 	
ООО Фирма «Индустрия»	Производство взрывозащищенного пылевлагонепроницаемого светотехнического электрооборудования II категории для всех классов взрывоопасных зон и всех температурных групп взрывоопасных смесей. Фирма разрабатывает светильники, прожекторы, светофоры.	
ЗАО «Электролуч»	производство светотехнической продукции для различных отраслей народного хозяйства. 	

Тепловую энергию в системах теплоснабжения Гагаринского района вырабатывают 46 действующих котельных (4-федеральной формы собственности, 8 - областной формы собственности; 19 - муниципальной формы собственности и 15 - частной), которые полностью обеспечивают потребность абонентов района в тепле. В качестве основного вида топлива используются газ, мазут, уголь и электрическая энергия. Мощность котельных составляет                 322,3 Гкал/час, общий отпуск тепловой энергии в сеть, составил за 2017 год 525,11 тыс. Гкал. Для обеспечения нужд котельных в 2017 году потребовалось 90751,7,0 тонн условного топлива. 
Тепловые сети имеют протяженность 65,90 км (в двухтрубном исполнении). Более 30% котлов и другого котельного оборудования устарели, имеют низкий КПД, отслужили нормативный срок службы и требуют замены или модернизации.
Протяженность водопроводных сетей составляет 267,2 км, из них ветхих 29,8 км. На территории Гагаринского района находится 78 водозаборов.
Протяженность канализационных сетей составляет 91,5 км. На территории Гагаринского района находятся 12 КНС и 3 очистных сооружения канализации.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального образования, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 
На 1 января 2018 года площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений составляет 110618,99 м2.
Структура потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на территории района выглядит следующим образом:
Таблица № 4
Виды энергоресурсов	Потребление по годам	
	2015г
факт	2016г
факт	2017г
факт	
Электроэнергия,   тыс.кВт*ч	2866,45	2914,71	2874,66	
Тепловая энергия, Гкал	14449,72	16180,05	15373,01	
Холодное водоснабжение, куб.м	60542,17	46381,92	31963,96	
Горячее водоснабжение,    куб.м	9394,68	9138,46	8693,87	
Природный газ,    тыс. куб.м	116,46	82,82	87,61	

В экономике и в инфраструктуре района существуют ряд проблем, к которым в том числе относятся и потери энергетических ресурсов в деятельности топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства района как на стадии производства, так и при транспортировке и потреблении электроэнергии, тепловой энергии и воды.
Создание условий для энергосбережения и повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого развития экономики муниципального образования «Гагаринский район».

2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.
По итогам реализации муниципальной программы прогнозируется достижение следующих показателей социально-экономического развития муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
1) обеспечение потребностей населения и экономики Гагаринского района в энергетических ресурсах в условиях прогнозируемого роста Валового муниципального продукта:
- удовлетворение прироста потребления энергетических ресурсов за счет снижения энергоемкости Валового муниципального продукта;
- использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры;
2) развитие топливно-энергетического комплекса Гагаринского района, повышение эффективности его функционирования:
- сокращение потерь электрической и тепловой энергии в сетях;
- сокращение потерь воды в сетях водоснабжения;
- обеспечение устойчивой работы топливно-энергетического комплекса;
3) реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере потребления населением и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов, в том числе:
- снижение потребления энергетических ресурсов в муниципальной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий, заключенных энергосервисных договоров.
Реализация муниципальной программы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.
При реализации программных мероприятий не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ.
Общая эффективность муниципальной программы оценена как интегральная оценка эффективности всех ее мероприятий, рассматриваемых в качестве инвестиционных проектов. Расчет экономической эффективности осуществляется через определение чистого дисконтированного дохода:

ЧДД - чистый дисконтированный доход от мероприятий муниципальной программы;
T - срок реализации муниципальной программы (в годах);
 - эффект от реализации i-го мероприятия муниципальной программы в году t;
 - приростные капитальные расходы на реализацию i-го мероприятия муниципальной программы в году t с учетом прогноза цен на соответствующие годы;
N - число мероприятий муниципальной программы;
j - прогнозные темпы инфляции на срок реализации муниципальной программы, выраженные в долях единицы;
r - коэффициент дисконтирования.
При определении общественной эффективности муниципальной программы учитываются все затраты и эффекты, включая экономическую оценку стоимости снижения выбросов парниковых газов. Коэффициент дисконтирования принимается равным 10%.
При определении коммерческой эффективности муниципальной программы из состава эффектов исключаются экономическая оценка стоимости снижения выбросов парниковых газов и рост налоговых доходов за счет реализации мероприятий муниципальной программы. Коэффициент дисконтирования принимается равным 15%.
При определении бюджетной эффективности муниципальной программы в состав затрат включаются все расходы бюджета, а в составе эффектов отражаются снижение бюджетных расходов и рост налоговых доходов за счет реализации мероприятий муниципальной программы. Коэффициент дисконтирования принимается равным 10%.
Расчеты всех экономических показателей производятся в ценах 2009 года и в прогнозных ценах каждого года расчетного периода (2018 - 2021 годы) с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации для затрат капитального характера.
Суммарное сокращение расхода всех видов энергетических ресурсов в сопоставимых условиях составит 806,107 – 1410,707 т у.т., воды – 26,4 – 52,7 тыс. куб. м.
Муниципальная программа рассчитана на 2018 - 2021 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Достижение поставленных целей обеспечивается решением основной задачи - энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Исходя из поставленной задачи муниципальная программа включает в себя следующие основные мероприятия:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования»

Общее годовое электропотребление в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Гагаринского района в 2017 году составило 2874,66тыс.кВт*ч, общее годовое теплопотребление -15373,01Гкал, общее годовое потребление холодной воды - 31963,96 куб. м., общее годовое потребление горячей воды – 8693,87 куб. м., общее годовое потребление природного газа - 87,61куб. м. Потребление тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями составило 2,93% от суммарного потребления тепловой энергии на территории района.
В этой связи одним из приоритетных направлений в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Гагаринского района является осуществление мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.
Потенциал энергосбережения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях оценивается так: электрической энергии - 6 - 9% (21,2 -31,8 т у.т.), тепловой энергии - 15 - 25% (329,8-549,5 т у.т.), воды - 15 - 20% (8,3-11,1 тыс. куб. м).
Основными направлениями данного мероприятия являются:
- внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения;
- регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий;
- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением;
- утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель;
- замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления организаций с участием муниципального образования на новые энергоэффективные газовые котлы с КПД не ниже 95%.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

В 2017 г. в жилищном фонде было потреблено электроэнергии -      55091,114 тыс. кВт*ч, тепла –93201,6Гкал, воды -1317,744тыс. куб. м.
Несмотря на продолжающийся рост тарифов, уровень оплаты платежей получателями жилищно-коммунальных услуг не может обеспечить полное покрытие населением затрат организаций - поставщиков жилищно-коммунальных услуг, что приводит к несвоевременной замене оборудования, изношенных сетей и, как следствие, к увеличению потерь и большему расходу энергоносителей в организациях коммунального комплекса Гагаринского района.
Потенциал энергосбережения в жилищном фонде к 2021 г. оценивается: электрической энергии - 2 - 4% (135,5 – 271,0 т у.т.), тепловой энергии - 2 - 4% (266,6- 533,1т у.т.), воды - 2 - 4% (26,4-52,7тыс. куб. м).
Основными направлениями данного мероприятия являются:
- проведение энергетического обследования объектов жилищного фонда, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;
- разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда;
- установка энергосберегающих светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека, в местах общего пользования жилых домов;
- замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в жилом фонде в местах общего пользования
- установка на объектах жилого фонда балансировочных клапанов с последующей регулировкой систем отопления;
Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:
- внедрение систем пофасадного регулирования температурного режима жилых зданий;
- модернизация изношенного инженерного оборудования энергоснабжения зданий с внедрением современных внутридомовых инженерных систем;
- промывка домовых инженерных систем от отложений, в том числе с использованием современных реагентов и поверхностно-активных веществ;

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»

Жилищно-коммунальный комплекс Гагаринского района включает в себя:
- 65,9 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении;
- 267,2 км сетей водоснабжения;
- 91,5 км сетей водоотведения.
Теплом обеспечивают 27 действующих котельных.
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется уровнем износа, превышающим 60%, в том числе:
- ветхих сетей водоснабжения – 21,1 км;
- износ сетей водоотведения – 35,4 км;
- износ тепловых сетей – 3,03км.
Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсосберегающих технологий.
Основными направлениями данного мероприятия являются:
- разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- строительство тепловых сетей с использованием современных технологий и видов изоляций, в том числе с использованием сверхтонкого эластичного полимерного покрытия;
- модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;
- модернизация контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА) в котельных;
- внедрение автоматических систем коммерческого учета энергоресурсов (далее - АСКУЭ).
Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:
-  корректировка схем энергоснабжения, 
- модернизация ветхих теплотрасс с использованием современных технологий и видов изоляций, в том числе с использованием сверхтонкого эластичного полимерного покрытия;
- замена труб в системах водоснабжения и водоотведения с истекшим сроком эксплуатации с использованием современных технологий;
- разработка систем диспетчеризации с автоматическим управлением на центральном диспетчерском пульте, а также системы АСКУЭ на насосных станциях и приводов переменного тока.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте»

Общими направлениями данного мероприятия для различных видов транспорта являются:
- оптимизация транспортных потоков;
- снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды;
- обучение эффективному вождению.
Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации автомобильного транспорта в районе являются:
- снижение удельных норм расхода топлива автомобильным транспортом за счет повышения КПД двигателей, трансмиссий, снижения собственной массы и аэродинамического сопротивления, увеличения доли радиальных шин;
- оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения;
- модернизация парка наземного общественного транспорта с целью сокращения потребления энергетических ресурсов, а также сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

На уличное освещение приходится 0,8 % потребления электрической энергии от общего объема потребления в регионе. Так, в 2017 году потребление электроэнергии на нужды уличного освещения составило 2 715,0 тыс.кВт*ч.
Основными направлениями данного мероприятия являются:
- замена существующих светильников и ламп на энергосберегающие;
- замена воздушных линий 0,4 кВ, состоящих из голого провода, на самонесущие изолированные провода;
- внедрение автоматизированных систем контроля и управления потреблением энергии в сетях уличного освещения.
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 41723,825тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 0 тыс. рублей;
- средства бюджета района- 0 тыс. рублей;
- средства местных бюджетов - 2 470,145 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 39253,68тыс. рублей.
Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством..

5. Механизмы привлечения внебюджетных средств
 на реализацию муниципальной программы энергосбережения
1.	Энергосервис и энегосервисный договор (контракт)

Энергосервис в широком смысле включает в себя комплекс мероприятий по обеспечению энергопользования.
В узком смысле энергосервиспредставляет из себя комплекс мероприятий, направленных на сбережение энергии и повышение энергетической эффективности здания, строения, сооружения, многоквартирного дома.
Понятие энергосервисного договора дано в ст. 19 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Предметом энергосервисного договора является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.
Схематично структура энергетического сервиса выглядит примерно так:

% от полученной экономии

Инвестиции в энергосберегающие мероприятия

Заказчик

Исполнитель

Сторонами энергосервисного договора (контракта) в качестве Заказчика является лицо, являющееся плательщиком за энергетические ресурсы, в качестве Исполнителя - лицо, реализующее и финансирующее за счет собственных средств энергосервисные мероприятия (Инвестор).
Энергосервисные контракты  направлены на создание условий для энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов. При этом финансирование энергосервисных мероприятий возлагается на Инвестора, которому впоследствии Заказчик компенсирует произведенные затраты за счет сумм экономии, полученных в результате снижения потребления энергетических ресурсов.
 Правильное определение срока действия и стоимости энергосервисного контракта нуждается в экономических расчетах. Принимая решение о финансировании энергосберегающих мероприятий посредством энергосервисного контракта, Заказчик должен произвести расчеты и сопоставить финансовые потоки своих расходов при различных способах финансирования энергосберегающих мероприятий. Расчеты, по которым Заказчик определял срок действия и стоимость энергосервисного контракта, целесообразно опубликовывать в составе тендерной документации. Это позволит инвесторам в свою очередь произвести встречные экономические расчеты, понять логику рассуждений Заказчика и принять взвешенное решение об участии либо не участии в размещенном заказе. 
Применение энергосервисных контрактов позволяет внедрять энергосберегающие мероприятия без использования прямого бюджетного финансирования. Однако следует помнить, что это выгодно в условиях бюджетного дефицита, поскольку прямое бюджетное финансирование позволяет те же мероприятия выполнить с меньшими затратами.
Следует иметь ввиду, что для сложных технических решений, когда эффект от энергосберегающих мероприятий не очевиден, энергосервисный контракт выгоден для государственного (муниципального) заказчика как инструмент переноса на инвестора рисков по внедрению неэффективных мероприятий.
   В рамках реализации Программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2017-2019гг» в 2017 году заключены энергосервисные контракты с ООО «ЭнергоПрофит» на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии по зданию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и в 11 учреждениях образования и культуры. Исполнитель в результате исполнения контракта обязуется обеспечить экономию энергетического ресурса (потребления тепла) в размере 15% к фактическому потреблению  в 2016 году. Согласно контрактам средства, затраченные на установку систем автоматического погодного регулирования,  будут возвращены исполнителю в течение последующих 8 лет в размере 83,7% от полученной экономии тепловой энергии в денежном эквиваленте.  
 
2. Концессионные соглашения.
При использовании концессионных соглашений одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать зафиксированное в этом соглашении недвижимое имущество (объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит (будет принадлежать) другой стороне (концеденту), а также осуществлять эксплуатацию объекта соглашения. Концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, определенный соглашением, права владения и пользования объектом недвижимости в целях коммерческой деятельности.
Концессионное соглашение выражает договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных ГК РФ. Объект концессионного соглашения, подлежащий реконструкции на момент заключения соглашения, должен находиться в собственности Концедента и быть свободным от прав третьих лиц. Изменение целевого назначения реконструируемого объекта концессионного соглашения не допускается. Продукция и доходы, полученные концессионером в результате осуществления деятельности, определенной соглашением, принадлежат Концессионеру на праве собственности.
Концессионер несет риск случайной гибели или повреждения объекта Концессионного соглашения. Концессионным соглашением на него может быть возложена обязанность застраховать объект недвижимости за свой счет.
Концессионное соглашение может предусматривать предоставление Концедентом во владение и в пользование Концессионера имущества, принадлежащего Концеденту на праве собственности, образующего единое целое с объектом Концессионного соглашения. Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении соглашения, принадлежит ему на праве собственности. Концессионер несет расходы по исполнению обязательств по Концессионному соглашению, осуществляет учет объекта соглашения на отдельном балансе и начисляет по нему амортизацию. Концессионеры вводят в эксплуатацию созданные или реконструированные объекты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
 В качестве сторон концессионного соглашения выступают:
•	1) Концедент - Российская Федерация в лице Правительства РФ или уполномоченные им органы федеральной исполнительной власти, либо органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления;
•	2) Концессионер - индивидуальный предприниматель, отечественное или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.
Концессионным соглашением предусматривают плату, вносимую Концессионером Концеденту в период эксплуатации объекта Концессионного соглашения. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения устанавливаются в данном соглашении.
Концессионную плату можно осуществлять в форме:
•	определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно в бюджетный фонд соответствующего уровня;
•	установленной доли продукции или доходов, полученных концессионером в результате осуществления деятельности по Концессионному соглашению;
•	передачи Концеденту в собственность имущества, находящегося в собственности Концессионера;
•	смешанного (комбинированного) способа внесения концессионной платы.
Концессионное соглашение должно содержать следующие существенные условия:
•	1) обязательства Концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта Концессионного соглашения, соблюдение сроков его создания и (или) реконструкции;
•	2) обязательства Концессионера по проведению деятельности, предусмотренной соглашением;
•	3) срок действия Концессионного соглашения;
•	4) состав и описание объекта соглашения;
•	5) порядок предоставления Концессионеру земельного участка для осуществления деятельности, определенной соглашением;
•	6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта соглашения и др.
Конкурс на право заключения концессионного соглашения может быть:
•	открытым - заявки на участие в данном конкурсе могут представлять любые лица;
•	закрытым - заявки на участие в конкурсе могут представлять лица, которым направлены приглашения принять участие в таком конкурсе исходя из решения о заключении Концессионного соглашения.
Решение о заключении Концессионного соглашения принимает Концедент.

6. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

В сфере реализации муниципальной программы действуют следующие основные нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014   №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;
- Закон Смоленской области от 30.05.2013 №47-з «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Смоленской области».

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории муниципального
образования «Гагаринский район»
                                                                                                                                                                          Смоленской области на 2017- 2019 гг.
                                                                                                                                                        в редакции постановления от  26.12.2017 №2156  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018- 2021 ГГ.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	Базовое значение показателей
 (к очередному финансовому году)	Планируемое значение показателей 
(на очередной финансовый год и плановый период)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	   9	
1	доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	98,0	99,3	99,3	99,3	99,3	

99,3	
2	доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	60,0	70,0	70,5	71,0	71,5	

72,0	
3	доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	58	66,7	67,0	67,3	67,6	

68,0
 	
4	доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	Н.д.	

Н.д	

Н.д.	

Н.д.	

Н.д.	

Н.д.	
5	доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	

97,0	
6	доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	%	0	0	0	0	0	

    0	
7	удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/м2	26,1	25,13	25,13	25,13	25,13	
25,13	
8	удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2	0,175	0,143	0,141	0,139	0,137	
0,134	
9	удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м3/чел.	27,8	23,04	23,0	23,0	23,0	
23,0	
10	удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м3/чел.	Н.д.	Н.д.	Н.д.	Н.д.	Н.д.	
Н.д.	
11	удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м3/чел.	1755,0	1735,8,0	1735,8	1735,8	1735,8	
1735,8	
13	количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	шт.	0	12	0	0	0	
     0	
14	удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/м2	49,8	49,8	49,5	49,3	49,1	
     49,0	
15	удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2	0,218	0,201	0,2	0,195	0,192	
0,19
	
16	удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел.	43,1	38,4	38,3	38,2	38,1	
38,0
	
17	удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у.т/м2	0,098	0,08	0,078	0,077	0,076	
0,076
	
18	удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	т.у.т./
Гкал	-	-	-	-	-		
19	удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т.у.т./Гкал	0,155	0,151	0,151	0,15	0,148	
  0,146
	
20	удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт*ч/м3	не определено	-	-	-	-	
    -	
21	доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	21,0	12,7	12,6	12,5	12,3	
 12,1
	
22	доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	19,8	17,1	17,0	16,8	16,7	
  16,6
	
23	удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	кВт*ч/м3	1,79	1,78	1,78	1,77	1,76	
  1,75	
24	удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВт*ч/м3	0,56	0,55	0,55	0,54	0,53	
   0,53
	
25	удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт*ч/м2	6,06	5,9	5,85	5,8	5,75	

5,72

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
на территории муниципального
 образования «Гагаринский район»
Смоленской области 
на 2018 – 2021гг.

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 2021 ГГ.

N п/п	Наименование	Исполнитель мероприятия	Источник финансового обеспечения	Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)	Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период	
				всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования 			
1.1.	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт*ч/м2	x	x	x	x	x	x	x	25,13	25,13	25,13	

25,13	
1.2.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2	x	x	x	x	x	x	 x	0,141 	0,139 	

0,137	

0,134	
1.3.	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
м3/чел	x	x	x	x	x	x	x	23,0	23,0 	

23,0	

23,0	
1.4.	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека),
м3/чел	x	x	x	x	x	x	x	Н.д	Н.д	Н.д	Н.д	
1.5.	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), 
м3/чел	x	x	x	x	x	x	x	1735,8	1735,8	1735,8	1735,8	
1.6.	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
, шт	x	x	x	x	x	x	x	0 	0 	0 	0 	
1.7.	Модернизация систем освещения в муниципальных учреждениях и в администрациях сельских поселений, в том числе:	Администрации сельских поселений (по согласованию)	всего	29,0	29,0	0	0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	0	0	0	0	0					
			бюджет района	0 	0 	0	 0	 0					
			местный бюджет	29,0	29,0	0	0	0					
			иные источники	 0	 0	 0	 0	 0					
 	в здании Администрации Ельнинского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области	 	всего	2,0	 2,0	0	 0	 0	x	x	x	x	
			областной бюджет	0	0	0	0	0					
			бюджет района	0	0	0	0	0					
			местный бюджет	2,0	2,0	0	 0	 0					
			иные источники	0	0	0	0	0					
	в здании Администрации Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области		всего	27,0	27,0	0	0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	0	0	0	0	0					
			бюджет района	0	0	0	0	0					
			местный бюджет	27,0	27,0	0	0	0					
			иные источники	0	0	0	0	0					
1.8.	Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в муниципальных учреждениях, в том числе: 	Администрация МО "Гагаринский район", муниципальные учреждения, Администрации сельских поселений (по согласованию)	всего	300	0	150,0	150,0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	0	0	0	 0	0					
			местный бюджет	0	0	0	 0	0					
			иные источники	 300,0	 0	 150,0	 150,0	0					
 	в муниципальном бюджетном  учреждении дошкольном образовательном «ДЮСШ №1»	 	всего	300,0	 0	150,0	150,0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района		 0		 0	0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			иные источники	 300,0	 0	 150,0	 150,0	0					
 	Ремонт и утепление кровли, в том числе: 	Администрации сельских поселений (по согласованию)	всего	 132,0	 0	 132,0	 0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	0 	0					
			иные источники	 0	 0	 0	 0	0					
 	в здании Администрации Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области	 	всего	 132,0	 0	 132,0	 0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	0 	0					
			иные источники	 0	 0	 0	 0	0					
Итого по основному мероприятию 1		всего	461,0	29,0	132,0	150,0	150,0	x	x	x	x	
		областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
		бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
		местный бюджет	161,0	29,0	132,0	0	0					
		иные источники	300,0	0	0	150,0	150,0					
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде			
1.21.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Гкал/кв. м в год)	x	x	x	x	x	x		 0,2	0,195 	0,192 	0,19	
1.22.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м/чел. в год)	x	x	x	x	x	x		38,3 	38,2 	38,1 	38,0 	
1.23.	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м/чел. в год)	x	x	x	x	x	x		 14,0	13,8 	13,6 	13,6 	
1.24.	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (кВт.ч/кв. м в год)	x	x	x	x	x	x		49,5	49,3	49,1	49,0	
1.25.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб. м/чел. в год)	x	x	x	x	x	x		Н.д.	Н.д.	Н.д.	Н.д.	
1.26.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) (куб. м/чел. в год)	x	x	x	x	x	x		Н.д.	Н.д.	Н.д. 	Н.д.	
1.27.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов вмногоквар- тирных домах (т у.т./кв. м в год)	x	x	x	x	x	x		0,078 	0,077 	0,076 	0,076 	
1.29.	Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.30.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах освещения жилищного фонда	ООО "Управляющая компания", УК ООО "Наш дом", ООО "Кармановское ЖЭУ". ООО «Стройизоляция»	всего	874,66	93,460	260,4	260,4	260,4	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0						
			бюджет района	 0	 0	 0	 0						
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0						
			иные источники	874,66	93,460	260,4	260,4	260,4					
1.31.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при строительстве, реконструкции, модернизации и эксплуатации жилищного фонда	УК ООО "Наш дом"	всего	11397,98	1819,52	3192,82	3192,82	3192,82	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0						
			бюджет района	 0	 0	 0	 0						
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0						
			иные источники	11397,98	1819,52	3192,82	3192,82	3192,82					
Итого по основному мероприятию 2	 	всего	12272,64	1912,98	3453,22	3453,22	3453,22	x	x	x	x	
		областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
		бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
		местный бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
		иные источники	12272,64	1912,98	3453,22	3453,22	3453,22					
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	
11.31	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми котельными (тут/Гкал)	x	x	x	x	x	x	x	0,151	0,15	0,148 	
0,146	
1.36.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%)	x	x	x	x	x	x	x	 12,6	12,5 	12,3 	
12,1	
1.37.	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (%)	x	x	x	x	x	x	x	17,0 	16,8 	16,7 	
16,6	
1.38.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м), кВт*ч/м3	x	x	x	x	x	x	x	 1,78	1,77 	1,76 	

1,75	
1.39.	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м), кВт*ч/м3	x	x	x	x	x	x	x	0,55	0,54	0,53	0,53	
1.46.	Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды, в том числе:	Организации коммунального хозяйства (по согласованию)	всего	3900,0	0	0	2900,0	1000,0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			иные источники	3900,0	0	0	2900,0	1000,0					
 	Строительство газопровода для перевода котельной Столбовского водозабора на газовое топливо	МУП "Горводоканал""	всего	2500,0	0	0	 2500,0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			иные источники	2500,0	0	0	 2500,0	0					
	Установка газового котла для  отопления зданий Столбовскогоо водозабора	МУП "Горводоканал""	всего	1000,0	0	0	0	1000,0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			иные источники	1000,0	0	0	0	1000,0					
	Выполнение проекта перевода котельной Столбовского водозабора с дизельного топлива на газ	МУП "Горводоканал""	всего	400,0	0	0	400,0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	0	0	0	0	0					
			бюджет района	0	0	0	0	0					
			местный бюджет	0	0	0	0	0					
			иные источники	400,0	0	0	400,0	0					
	Реконструкция насосной станции второго подъема Столбовского водозабора	МУП "Горводоканал""	всего	2000,0	1000,0	1000,0	0	0					
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	 0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	 0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0	 0					
			иные источники	2000,0	1000,0	1000,0	0	0					
	Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой припередаче (транспортировке) воды в том числе:	МУП "Горводоканал""	всего	5000,0	1000,0	1000,0	1000,0	2000,0					
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	 0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	 0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0	 0					
			иные источники	5000,0	1000,0	1000,0	1000,0	2000,0					
	Установка энергосберегающих насосов на станции 2 подъема Центрального и Верхнее - Гжатского  водозабора	МУП "Горводоканал""	всего	3000,0	0	0	1000,0	2000,0					
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	 0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	 0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0	 0					
			иные источники	3000,0	0	0	1000,0	2000,0					
	Реконструкция насосной станции 2 подъема Столбовского водозабора с внедрением энергоэффективного оборудования (замена насосов на энергоэффективные со встроенным частотным регулированием)	МУП "Горводоканал""	всего	2000,0	1000,0	1000,0	0	0					
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	 0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	 0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0	 0					
			иные источники	2000,0	1000,0	1000,0	0	0					
1.49.	Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче, в том числе:	Организации коммунального хозяйства (по согласованию)	всего	12000,0	3000,0	3000,0	 3000,0	3000,0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	 0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	 0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0	 0					
			иные источники	12000,0	3000,0	3000,0	 3000,0	3000,0					
 	замена ветхих сетей водоснабжения на полиэтиленовые трубы	МУП "Горводоканал"	всего	12000,0	3000,0	3000,0	 3000,0	3000,0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	 0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	 0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0	 0					
			иные источники	12000,0	3000,0	3000,0	 3000,0	3000,0					
1.50.	Модернизация систем освещения организациями коммунального комплекса, в том числе:	Организации коммунального хозяйства (по согласованию)	всего	160,04	115,0	25,04	20,0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			иные источники	160,04	115,0	25,04	20,0	0					
 	замена ламп ДРЛ на светодиодные	МУП "Горводоканал"	всего	100,0	100,0	0	0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			иные источники	100,0	100,0	0	0	0					
 	замена ламп ДРЛ на светодиодные	МУП "Коммунальщик"	всего	55,0	15,0	20,0	20,0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			иные источники	55,0	15,0	20,0	20,0	0					
	замена люминесцентных ламп на светодиодные	МУП «ПЖРТ»	всего	5,04	0	5,04	0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			иные источники	5,04	0	5,04	0	0					
1.51.	Установка приборов учета в системах коммунальной инфраструктуры, в том числе:	Организации коммунального хозяйства (по согласованию)	всего	2388,0	1284,0	1104,0	 0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			иные источники	2388,0	1284,0	1104,0	0	0					
 	замена узлов учета поднимаемой воды	МУП "Горводоканал"	всего	1104,0	1104,0	0	0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			иные источники	1104,0	1104,0	0	0	0					
1.52.	Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при водоотведении, в том числе:	Организации коммунального хозяйства (по согласованию)	всего	4442,0	2221,0	2221,0	0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	0	0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	0	0					
			иные источники	3721,0	1500,0	2221,0	0	0					
 	реконструкция КНС1 с заменой насосов на энергоэффективные погружные насосы со встроенным частотным регулированием	МУП "Горводоканал"	всего	1442,0	721,0	721,0	0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			иные источники	1442,0	721,0	721,0	0	0					
 	замена аэронтеков на очистных сооружениях	МУП "Горводоканал"	всего	3000,0	1500,0	1500,0	0		x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0						
			бюджет района	 0	 0	 0	 0						
			местный бюджет	 0	 0	 0	 0						
			иные источники	3000,0	1500,0	1500,0	 0						
Итого по основному мероприятию 3	 	всего	26606,04	7440,0	6246,04	6920,0	6000,0	x	x	x	x	
		областной бюджет	 0	 0	 0	 0	 0					
		бюджет района	 0	 0	 0	 0	 0					
		местный бюджет	 0	 0	 0	 0	 0					
		иные источники	26606,04	7440,0	6246,04	6920,0	6000,0					
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте			
1.62.	Поддержание автомобильного парка в технически исправном состоянии	МУП «Коммунальщик»	всего	75,0	35,0	20,0	20,0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	0	0	0	0	0					
			бюджет района	0	0	0	0	0					
			местный бюджет	0	0	0	0	0					
			иные источники	75,0	35,0	20,0	20,0	0					
Итого по основному мероприятию 4	Администрации сельских поселений, МУП «Коммунальщик»
 	всего	75,0	35,0	20,0	20,0	0	x	x	x	x	
		областной бюджет	0	0	0	0	0					
		бюджет района	0	0	0	0	0					
		местный бюджет	0	0	0	0	0					
		иные источники	75,0	35,0	20,0	20,0	0					
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения	
1.70	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (кВт.ч/кв. м в год)	x	x	x	x	x	x	x	5,85	 5,8	5,75	5,72	
	Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения  на светодиодные в Ельнинском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области	Администрация Ельнинского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области	всего	168,0	42,0	42,0	42,0 	42,0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	168,0	42,0	42,0	42,0 	42,0					
			иные источники	 0	 0	 0	 0	0					
1.72.	Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения  на светодиодные в Кармановском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области	Администрация Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области	всего	19,2	4,8	4,8 	 4,8	4,8	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	19,2	 4,8	 4,8	4,8	4,8					
			иные источники	 0	 0	 0	 0	0					
1.73.	Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения  на светодиодные в Токаревском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области	Администрация Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области	всего	48,4	28,6	19,8	 0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	48,4	28,6	19,8	 0	0					
			иные источники	 0	 0	 0	 0	0					
1.74.	Замена светильников и ламп в светильниках  уличного освещения на светодиодные в Акатовском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области	Акатовского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области	всего	21,6	4,6	4,0	 5,0	8,0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	21,6	4,6	4,0	 5,0	8,0					
			иные источники	 0	 0	 0	 0	0					
1.75.	Установка приборов учета электрической энергии для уличного освещения в Акатовском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области	Администрация Акатовского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области	всего	250,9	100,9	90,0	60,0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	250,9	100,9	90,0	60,0	0					
			иные источники	 0	 0	 0	 0	0					
1.76.	Замена светильников и ламп в светильниках  уличного освещения на светодиодные в Ашковском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области	Администрация Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области	всего	228,145	196,54	0 	 15,8	15,8	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0						
			местный бюджет	228,145	196,54	0 	 15,8	15,8					
			иные источники	 0	 0	 0	 0	0					
1.77.	Установка приборов учета электрической энергии для уличного освещения в Ашковском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области	Администрация Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области	всего	224,3	0	120,0	75,8	28,5	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	224,3	0	120,0	75,8	28,5					
			иные источники	 0	 0	 0	 0	0					
1.78.	Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения  на светодиодные в Покровском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области	Администрация Покровского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области	всего	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0					
			иные источники	 0	 0	 0	 0	0					
1.79.	Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения  на светодиодные в Самуйловском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области	Администрация Самуйловского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области	всего	527,1	302,1	75,0	75,0	75,0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	527,1	302,1	75,0	75,0	75,0					
			иные источники	 0	 0	 0	 0	0					
1.81.	Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения  на светодиодны в Гагаринском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области	Администрация Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области	всего	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0					
			иные источники	 0	 0	 0	 0	0					
1.82.	Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения  на светодиодные в Мальцевском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области	Администрация Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области	всего	77,0	45,0	17,2	4,8	10,0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	0	0					
			местный бюджет	77,0	45,0	17,2	4,8	10,0					
			иные источники	 0	 0	 0	0	0					
1.84.	Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения  на светодиодные в Баскаковском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области	Администрация Баскаковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области	всего	64,1	44,102	20,0	0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	64,1	44,102	20,0	0	0					
			иные источники	 0	 0	 0	 0	0					
1.86.	Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения  на светодиодные в Пречистенском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области	Администрация Пречистенского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области	всего	85,0	20,0	20,0	 20,0	25,0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	85,0	20,0	20,0	 20,0	25,0					
			иные источники	 0	 0	 0	 0	0					
1.87.	Замена светильников и ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные в Потаповском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области	Администрация Потаповского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области	всего	140,0	60,0	60,0	10,0	10,0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	140,0	60,0	60,0	10,0	10,0					
			иные источники	 0	 0	 0	 0	0					
1.90.	Замена светильников уличного освещения и ламп в светильниках уличного освещения  на светодиодные в Серго-Ивановском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области	Администрация Баскаковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области	всего	190,5	38,0	63,5	89,0	0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0						
			бюджет района	 0	 0	 0	 0						
			местный бюджет	190,5	38,0	63,5	89,0	0					
			иные источники	 0	 0	 0	 0	0					
1.91.	Замена светильников и ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные в Родомановском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области.	Администрация Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области	всего	70	10,0	15,0	20,0	25,0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	70	10,0	15,0	20,0	25,0					
			иные источники	 0	 0	 0	 0	0					
	Замена светильников и ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные в Николском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области.	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области	всего	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	x	x	x	x	
			областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
			бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
			местный бюджет	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0					
			иные источники	 0	 0	 0	 0	0					
Итого по основному мероприятию 7	 	всего	2309,145	914,545	593,3	487,2	314,1	x	x	x	x	
		областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
		бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
		местный бюджет	2319,145	914,545	593,3	487,2	314,1					
		иные источники	 0	 0	 0	 0	0					
		местный бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
		иные источники	 0	 0	 0	 0	0					

Всего по Программе	всего	41723,825	10331,525	10444,56	11030,42	9917,32	x	x	x	x	
	областной бюджет	 0	 0	 0	 0	0					
	бюджет района	 0	 0	 0	 0	0					
	местный бюджет	2470,145	943,545	    725,3	487,2	314,1					
	иные источники	39253,68	9387,98	9719,26	10543,22	9603,22					

  Отп. в 1 экз. - в дело

Исп.      ____________ Н.Ф. Рогова
тел. 3-49-47

«_____»  декабря 2018 г.	Разослать:
в прокуратуру, финансовое управление,  Управление С и ЖКХ,  отдел экономики, сайт Администрации района; бухгалтерия Администрации района,
контрольно-счетный орган	

Визы:

 А.А. Жигалов               __________________    «______»    декабря 2018 г
 
 Т. В. Кудрина               __________________    «______»    декабря 2018 г
  
А. Ю. Пузиков              __________________     «______»    декабря 2018
 
 Л.В. Иващенко             __________________     «______»    декабря 2018 г.

Л.В. Морозова                _________________     «______»     декабря 2018 г

С. М. Епишина               _________________     «______»     декабря 2018 г

И. Мартыненкова    __________________      «______»    декабря 2018 г

Ю. В. Крутова              __________________      «______»     декабря 2018 г
 
Е. А. Нечаева               __________________       «______»      декабря 2018 г 

М. А. Успенская           __________________     «______»     декабря 2018 г