АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   __17.05.2017__     №    _691_

О первоочередных мерах, утверждении планов 
организационно-технических и неотложных 
мероприятий по подготовке объектов 
социальной сферы, жилищно-коммунального 
хозяйства электро- и теплоэнергетики 
Гагаринского района Смоленской области 
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов социальной сферы,   жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда Гагаринского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года, руководствуясь Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103,  распоряжением Администрации Смоленской области от 06.03.2017 № 262-р/адм «О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов», в соответствии с Уставом  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать объединенный штаб по подготовке жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и по  координации подготовки объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда, электро- и теплоэнергетики Гагаринского района Смоленской области, независимо от форм собственности, к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов (далее - Районный штаб) и утвердить его состав (Приложение № 1).
2. Утвердить  общий план первоочередных организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Гагаринского городского поселения и  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Приложение №2).
3.Утвердить  общий план неотложных мероприятий, требующих финансовой поддержки бюджета муниципального образования Гагаринского городского поселения и муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - бюджета муниципального района) (Приложение № 3). 
4. Утвердить график остановки котельных и ЦТП Вяземского филиала        ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» с прекращением подачи горячего   водоснабжения в летний период  2017 года (Приложение № 4).     
5. Районному штабу (А.А.Жигалов):
5.1. Утвердить график проведения заседаний Районного штаба.
5.2. Проводить заседания один раз в две недели, по понедельникам. 
5.3. Организовать контроль по восстановлению резервных топливных хозяйств объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее -  Гагаринский район) независимо от форм собственности.
6. Комитету     по   образованию  (О.Г. Позняк),   отделу   по   культуре    (О.В. Брехова),  отделу   по   физической   культуре, спорту и делам молодёжи (В.С. Панков) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Администрация района) обеспечить:
6.1. Участие своих представителей в заседаниях Районного штаба, на которых будет заслушиваться информация о ходе подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2017- 2018 годов.
6.2. Контроль по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
6.3. Контроль над ежемесячными расчётами подведомственными организациями  за коммунальные услуги: по отоплению, холодному и горячему водоснабжению,   водоотведению, электроснабжению, газоснабжению;  сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. 
6.4. Контроль по бесперебойной работе систем теплоснабжения подведомственных организаций. 
6.5. Контроль по созданию необходимого запаса топлива, его своевременную вывозку и сохранность в подведомственных и курируемых организациях. 
6.6. В срок до 01.07.2017 назначить приказами комиссии по оценке готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
6.7. В срок до 01.09.2017 провести электротехнические измерения и испытания основного энергетического оборудования объектов с массовым пребыванием людей.
6.8. В срок до 01.10.2017 обеспечить восстановление резервных источников электроснабжения для электрооборудования котельных I и II категории, отапливающих муниципальные учреждения. 
7. Руководителям теплоснабжающих предприятий - регуляторов газопотребления:
7.1. В срок до 01.10.2017 обеспечить создание 10-дневного запаса по резервным видам топлива. 
7.2. Заключить договоры с потребителями различных форм собственности на поставку им тепловой энергии, с ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» - на поставку природного газа.
7.3. В срок до 01.10.2017 осуществить необходимый капитальный и текущий ремонт энергетического оборудования, перекладку и ремонт тепловых сетей согласно планам мероприятий по подготовке энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, ремонт и восстановление резервного топливного хозяйства, обеспечение резервным топливом, предусмотрев мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.    
7.4. Обеспечить ежемесячные расчеты с предприятиями-поставщиками за потребленный природный газ, полученные энергетические ресурсы с учетом кассового разрыва, возникающего при платежах населения за тепловую энергию.
          8. Финансовому управлению Администрации района (Т.В. Кудрина) обеспечить контроль над проведением своевременных расчетов  организациями, финансируемыми из бюджета муниципального района, с поставщиками за потребляемые топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.
9. Управлению по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района (далее – Управление СиЖКХ) (О.И.Мартыненкова):  
9.1. Обеспечить организацию заседаний Районного штаба.
9.2. Организовать сбор, проверку достоверности и обобщение сведений о подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского и сельских поселений к работе в зимних условиях. 
9.3. Для Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству: 
9.3.1. Предоставлять статистическую отчетность о ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов и его прохождении по формам:
	-№ 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», (далее – форма № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7, в соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 07.03.2017 № 264-р/адм, ежемесячно с 01.06.2017 по 01.11.2017;
	-№ 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе  жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 №206 - по состоянию на 01.12.2017;
	-№ 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 №206 - ежемесячно с 01.11.2017 по 01.04.2018.
9.3.2. В срок до 01.08.2017  завершить разработку лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2018 год для потребителей, финансируемых из местных бюджетов, и представить на окончательное согласование.
           9.4. Обеспечить контроль над вводом в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства, строительство и реконструкция которых осуществляется за счёт средств бюджетов различных уровней.
          10. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений  Гагаринского района Смоленской области: 
10.1. Создать штабы по подготовке жилищного фонда всех форм собственности и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
10.2. В срок до 15.09.2017 подготовить муниципальный жилищный фонд, объекты жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно разработанным планам мероприятий.
10.3. Обеспечить выделение денежных средств из местных бюджетов на проведение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, на приобретение необходимых материально-технических ресурсов и создание запаса топлива.
10.4. Обеспечить контроль над проведением текущего и капитального ремонта (реконструкции) зданий и объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию указанных зданий и объектов.
10.5. Организовать контроль над восстановлением резервных топливных хозяйств объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований независимо от форм собственности.
10.6. Выявить бесхозяйные тепловые сети и до начала отопительного сезона 2017-2018 годов, но не более чем в течение 30 дней с даты их выявления, определить  теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями и которая до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети будет осуществлять их содержание и обслуживание.
10.7. Разработать и утвердить календарный план-график постановки на государственной кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. 
10.8. Обеспечить создание 100-дневного запаса по основным и 10-дневного запаса по резервным видам топлива к началу отопительного сезона.
10.9. В срок до 15.09.2017 организовать завершение ремонта систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, конструктивных элементов зданий, утепления жилых домов.
10.10. В срок до 01.10.2017 оформить паспорт готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов в соответствии с федеральным законодательством и предоставить его в Управление СиЖКХ Администрации района.
10.11. В срок до последнего числа месяца отчетного периода   обеспечить предоставление в Управление СиЖКХ Администрации района формы № 1-ЖКХ (зима).
10.12. Заключить договоры с обслуживающими организациями на зимнее содержание улично-дорожной сети и сооружений на них в населенных пунктах.
      11. В срок до 15.09.2017 предприятиям и организациям всех форм собственности, их обособленным подразделениям, имеющим на своем балансе жилые дома и объекты коммунальной инфраструктуры, теплоэнергетического хозяйства, расположенным на территории Гагаринского  городского поселения и Гагаринского района:
- обеспечить выполнение ремонтных работ на системах электро-, тепло,- водо, – газоснабжения и водоотведения с применением энергосберегающих технологий, уделить особое внимание готовности тепловых сетей и котельных;
- подготовить жилые, общественные и производственные здания к эксплуатации в осенне-зимний период, обеспечить создание в них теплового контура.
     12. Руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории Гагаринского городского поселения и Гагаринского района, занятых выполнением предзимних работ, начиная с 1 июня 2017 года ежемесячно, до второго числа, следующего за отчетным месяцем представлять в Управление СиЖКХ Администрации района оперативный отчет о подготовке к работе в зимних условиях № 1- ЖКХ (зима) по форме, утвержденной Постановлением Федеральной службы  государственной статистики (Росстата) от 27.02.2006 №7.
13. В срок до 15.09.2017   управляющим и обслуживающим жилищным  организациям обеспечить готовность жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов и принять все меры по сокращению задолженности  населения за жилищно-коммунальные услуги.
14. В срок до 01.10.2017 года:
14.1. Всем организациям, находящимся на территории Гагаринского городского поселения и Гагаринского  района, участвующим в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от организационно-правовой формы и вида собственности, на основании актов проверки готовности к работе в осенне-зимний период, получить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов по ранее согласованным формам и предоставить их в Управление СиЖКХ Администрации района.
14.2. Организациям, эксплуатирующим автомобильные дороги и сооружения на них, обеспечить выполнение ремонтно-восстановительных работ, создание нормативного запаса песко-соляной смеси  и подготовку техники для содержания объектов в зимних условиях.
15. Гагаринскому лесничеству (Н.А.Воробьев), Кармановскому лесничеству (А.И. Костючков) - филиала ОГКУ «Смоленское управление лесничествами» выделить делянки для заготовки дров для обеспечения потребности населения и муниципальных учреждений в соответствии с заявками.

16. Предложить всем предприятиям и организациям, независимо от организационно-правовой формы и вида собственности, и населению Гагаринского района максимально погасить к началу отопительного сезона  имеющуюся задолженность: 
- за коммунальные услуги: по отоплению, холодному и горячему водоснабжению,   водоотведению, электроснабжению, газоснабжению; 
-   за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.
17. Еженедельно, начиная с 01.06.2017, руководителям управляющих организаций и эксплуатационных служб жилищно-коммунального хозяйства района представлять информацию  в Управление СиЖКХ Администрации района о проводимых предзимних работах.
18. Отделу ГО, ЧС и ЕДДС Администрации  района  (А.А. Захаров):
18.1. На основании типового регламента организации и применения временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории Гагаринского района Смоленской области разработать и утвердить типовой регламент организации временного электроснабжения потребителей района.
18.2. В срок до 25.06.2017  отработать схему  взаимодействия  с эксплуатационными, ремонтными, строительно-монтажными, транспортными, наладочными и другими организациями по предупреждению и ликвидации  аварийных ситуаций на объектах тепло-, электроэнергетики и коммунального хозяйства  Гагаринского района Смоленской области.
19. Опубликовать данное постановление с приложениями на официальном сайте Администрации района. 
20. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев        	       	  

Приложение № 1
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район»
Смоленской области
от  __17.05.2017__  № _691_

СОСТАВ 
объединенного штаба по подготовке жилищного фонда и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и по  координации подготовки объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда, электро- и теплоэнергетики Гагаринского района, независимо от форм собственности, к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов 
(далее - Районный штаб)

- Жигалов 
Алексей Анатольевич

	- первый заместитель Главы  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – муниципальное образование), начальник Районного штаба;	
- Мартыненкова 
Оксана Ильинична	- начальник Управления СиЖКХ  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, заместитель начальника Районного штаба; 	
- Морозова 
Людмила Васильевна 	- заместитель Главы муниципального образования;	
- Пузиков 
Андрей Юрьевич	-заместитель Главы муниципального образования;	
- Пульнова 
Оксана Ивановна	- начальник отдела ЖКХ Управления Администрации района;	
- Захаров 
Александр Алексеевич
- Кудрина 
Татьяна Валентиновна  	- начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации района;
- начальник финансового Управления Администрации района; 	
- Крутова 
Юлия Викторовна	- главный специалист отдела ЖКХ Управления СиЖКХ, муниципальный жилищный инспектор;	
- Рогова 
Надежда Федоровна	- ведущий специалист отдела ЖКХ Управления СиЖКХ  Администрации района, секретарь Районного штаба; 	
- Мазур 
Сергей Станиславович 
	- старший менеджер отдела ЖКХ Управления СиЖКХ Администрации района, секретарь Районного штаба;	
- Деев 
Геннадий Михайлович	- председатель  Совета депутатов Гагаринского городского поселения (по согласованию);	
- Семенов 
Владимир Михайлович

- Чернов 
Виктор Иванович
- Загородний 
Вадим Владимирович
- Мирошник 
Александр Владимирович 	- ведущий специалист инспекторского отдела ГУ «Государственная жилищная инспекция  Смоленской области» (по согласованию); 
- директор ООО «Кармановское ЖЭУ» (по согласованию);
- директор ООО «Маяк»  (по согласованию);

- директор ООО «Факел» (по согласованию);	
- Кухарев  
Андрей Васильевич

- Иванов 
Алексей Николаевич 
- Хайленко 
Дмитрий Владимирович	- начальник Тепловых Сетей  по Гагаринскому району  ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (по согласованию);
- начальник Гагаринского РЭС (по согласованию);

- руководитель Гагаринского филиала «Энергосбыт»;	
- Дергачев  
Виктор Андреевич	-генеральный директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию);	
- Толкачева 
Неля Алексеевна	- начальник МУП «Управление ЖКХ и С» (по согласованию);	
- Акимов 
Владимир Васильевич	- директор ООО «Стройизоляция» (по согласованию);	
- Иванов 
Виктор Иванович	- директор МУП «Горводоканал» (по согласованию);	
- Молдованова                                 -   директор ООО «Наш Дом» (по согласованию);
Эльвира Михайловна                      
- Акимов                                            -    директор ООО «Гагаринское ЖЭУ»
Сергей Владимирович                        (по согласованию);
- Британова                                        -    помощник Гагаринского межрайонного
Наталья Николаевна                            прокурора  юрист 1 класса (по согласованию).

	                                   Приложение № 2
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от  _17.05.2017__  № _691_
Общий план
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2017/2018гг.
жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства Гагаринского городского поселения и муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
№
п\п	Наименование мероприятий 	Планируемый объем работ	Срок исполнения	Исполнитель 	
I. Сети водоснабжения и водоотведения	
МУП «Горводоканал»	
1.	Ремонт канализационных смотровых колодцев	20 шт.	март-сентябрь	МУП «Горводоканал»	
2.	Промывка  самотечных канализационных сетей	35км	май-август		
3.	Установка расходомера сточных вод	1шт	Март-июнь		
4.	Чистка и ремонт вторичных отстойников:	3 линии	Март-июнь		
5.	ремонт выпускного коллектора от ОСК до р. Гжать	500 м	июнь-август		
	Реконструкция водопроводной сети:				
6.	Магистральный водовод Верхне - Гжатского водозабора	750 м	Июль-сентябрь		
7.	Реконструкция водопроводной сети пер. Пионерский	250 м	Май июнь		
8.	Водовод ул. Танкистов до р. Гжать	1500 п.м. 	Июнь-ноябрь		
9.	Промывка водопроводных сетей	40 км	Май-сентябрь		
10.	Ремонт водопроводных колодцев	15 ед.	Май сентябрь		
11.	Перевод объекта на газовое отопление (установка газовых котлов) на Центральном  водозаборе	2 шт	август-ноябрь		
11.	Обвязка 2-х скважин, разработка документации на газификацию котельной столбовский водозабор	2 шт	Май-сентябрь		
11.	Обвязка 3-х скважин Верхне-Гжатский водозабор	З шт	Июль сентябрь		
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	
12.	Реконструкция водопровода по ул. Гагарина от ул. 50-лет ВЛКСМ до центральной площади города Гагарин Смоленской области	1,165км	2 этап 2-3 квартал	Управление СиЖКХ	
13	Выполнение работ на ремонт участка трубопровода тепловых сетей от ТК-3 до ТК-6 по ул. Ленина (ЦТП 12) от котельной ООО «Факел» в городе Гагарине Смоленской области	44м.	2-3 квартал		
14	Перевод на индивидуальное отопление домов по ул. Красноармейская, 80,82,87 (приобретение котлов)
	7 шт	2-3 квартал		
II. Городская баня (МУП «ПЖРТ»)	
15.	Гидравлическое испытание системы теплоснабжения	511 м.	май -июль	МУП «ПЖРТ»	
III. Содержание и текущий ремонт жилищного фонда	
ООО «Стройизоляция»	
16.	Установка рассечек на вводах в тепловых пунктах домов	71 шт.	май	ООО «Стройизоляция»	
17.	Промывка и опрессовка систем отопления	71шт.	июнь-август		
18.	Ревизия запорной  арматуры	680 шт.	май-август		
19.	Ремонт внутренних трубопроводов 	172 п. м	май-август		
20.	Ревизия оборудования тепловых пунктов, поверка и установка КИП	71 шт.	май-июль		
21.	Снятие рассечек на вводах систем отопления ж/домов	71 шт.	сентябрь		
22.	Наладка и регулировка систем отопления и ГВС	21 систем	сентябрь		
23.	Текущий ремонт жилого фонда в т. ч:
Ремонт дверных полотен и заполнений	32 шт.	июнь-сентябрь		
    24.	Остекление мест общего пользования	39 м2	июль-сентябрь		
25.	Заделка кирпичом подвальных продухов	35 шт.	сентябрь-октябрь		
26.	Ремонт изоляции наружных межпанельных швов	1230.п.	май-октябрь		
27.	Ремонт мягких кровель	3520 м2	июнь - сентябрь		
28.	Ремонт шиферных кровель	175 м2	июнь - сентябрь		
    29.	Ремонт козырьков балконов и  входов в подъезды	17 шт.	май-август		
30.	Обслуживание и ремонт систем электроснабжения жилищного фонда	71 система	май-октябрь		
 ООО « Гагаринское ЖЭУ»	
31.	Установка рассечек на вводах в тепловых пунктах домов	21шт.	май	ООО «Гагаринское ЖЭУ»	
32.	Ревизия запорной  арматуры	72 шт.	июнь-август		
33.	Ремонт внутренних трубопроводов 	72 п.м	май-август		
34.	Промывка и опрессовка систем отопления	21шт.	июнь-август		
35.	Ревизия оборудования тепловых пунктов, поверка и установка КИП	21 пункт	май-июль		
36.	Ремонт печей	5 шт.	май - сентябрь		
37.	Наладка и регулировка систем отопления и ГВС	21 шт.	сентябрь		
38.	Ремонт входных и тамбурных дверей,/установка пружин на дверях	8/18шт.	июль-сентябрь		
39.	Снятие рассечек на вводах в домах системы отопления	21 шт.	сентябрь		
40.	Остекление окон в подъездах	20 м2	сентябрь-октябрь		
41.	Заделка продухов в подвалах	15 шт.	сентябрь-октябрь		
42.	Ремонт мягких кровель	930м2.	июнь-октябрь		
44.	Ремонт шиферных кровель	50м2.	июнь-октябрь	
	
ООО «Управляющая компания»	
                Текущий ремонт:	
42.	-кровли мягкие	250 м2	апрель - сентябрь	ООО «Управляющая компания»	
43.	-кровли шиферные	20м2	Май сентябрь		
44.	-прочистка вентканалов	160 м2	По заявлениям		
45.	-замена трубопроводов отопления	220 п.м	аварийно-
восстановительные
работы		
46.	-замена труб горячего водоснабжения	140 п.м.			
47.	-замена труб холодного водоснабжения	150 п.м.			
48.	-замена труб канализации	74 пм			
49.	-замена запорной арматуры	204 шт.	май - октябрь		
50.	-теплоизоляция инженерных сетей в тамбурах и подвалах	11м3	май - октябрь 		
51.	-ремонт, изготовление и установка окон и дверных заполнений	24 шт.	май - октябрь		
52.	-ремонт цоколя и отмосток	220 м2	май - октябрь		
53.	-ремонт аварийных балконов (по заявлениям)	4 шт.	май - октябрь		
54.	Замена входных деревянных дверей подъездов на металлические и утепление дверей	2 шт.	май - октябрь		
55.	Изготовление и установка вторых оконных рам	12 шт.	май - октябрь		
56.	Благоустройство дворовых территорий 	18шт.	май - сентябрь		
57.	Ремонт внутридомовых электрощитов	75 шт.	весна-осень		
58.	Прочистка лежаков канализации по подвалам	500 м3	По заявкам		
59.	Промывка и опрессовка систем отопления	74 дом.	май - сентябрь		
    60.	Остекление мест общего пользования	78 м2	май-октябрь		
61.	Промывка квартирных приборов отопления	6 шт.	май - сентябрь		
 ООО «Наш Дом»	
62.	Наладка и регулировка систем отопления и ГВС	18 шт.	май	ООО «Наш Дом»	
63.	Ревизия запорной арматуры тепловых пунктов и стояков	72 шт.	май -  август		
64.	Ремонт и замена внутренних трубопроводов отопления, ГВС, ХВС, ремонт теплоизоляции	43,5  п.м., в т.ч.
32 п.м. ГВС, 11,5 п.м. ХВС.	май-август		
65.	Промывка и опрессовка систем отопления жилых домов	22 шт	Согласно графику		
66.	Ревизия оборудования тепловых пунктов, проверка и установка оборудования КИП	18 шт.	май-август		
67.	Замена лежака ХВС	40м.	май-сентябрь 		
68.	Утепление фасада	30м.	май-июнь		
69	Ремонт и утепление входной двери 	1 шт			
70	Ремонт межпанельных швов	92м2	май-октябрь		
71	Замена запорной арматуры	4 шт.	май-октябрь		
ООО «Кармановское ЖЭУ»	
72.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры в подвалах жилых домов	6 шт	Июнь-август	ООО «Кармановское ЖЭУ»	
73.	Частичная замена шифера, коньков м-н Западный д.5; 2;3	30 шт	июнь-август		
74.	Замена центрального водопровода и канализационной системы м-н Западный д.2	27 п.м.	май		
75.	Заделка и герметизация швов м-н Западный д.2	437 м п	Август-сентябрь		
76.	Промывка и опрессовка внутренней системы отопления с. Карманово		июль-сентябрь		
77.	Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвалах жилых домов	5 шт.	Май июль		
78.	Ремонт балконных козырьков м-н Западный д.1,2,3,5	16 шт	Май-июль		
79.	Остекление мест общего пользования	15шт.	июль-сентябрь		
IV. ТЕПЛОЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	
ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (Районная котельная)	
80.	Текущий ремонт котельного, газового, насосного  оборудования, запорной арматуры котельной	1 котельная	апрель- сентябрь		
 81	Текущий ремонт тепловых сетей	3 шт.	апрель		
82.	Ремонт манометров технических	7	апрель		
83.	Замена окон котельного зала	6 шт	май		
84.	Ремонт ТС с заменой участков трубопровода ЦТП-3; от ТК- до ТК-4 	400 м	май	Гагаринские РТС	
85.	Ремонт  ТС с заменой участков трубопровода ЦТП-4; от ТК-1 до ТК-15	       284 м	июнь		
86.	Замена арматуры на ЦТП	17 шт	июнь		
87.	Замена арматуры ТС	24 шт	июнь		
88.	Ремонт оборудования на котельной	190 шт	июнь		
89.	Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов   от ТК-2 до ж.д. ул. Матросова д.19 	220 м	Июнь-август		
90.	Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов ЦТП-2 от ТК-1 до ТК-2 	80 м	июнь		
91.	Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов ЦТП-1до ТК-1	50 м	июнь		
92.	Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов ЦТП-1; т/с от ТК-11до ЦТП-1	160 м	июнь		
93.	Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов т/с ЦТП-9 от ТК-11 по   ул. Строителей	200 м	июнь		
94.	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС магистрали от ЦТП-2	260 м	октябрь		
95.	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС магистрали от ЦТП-9 до ТК-2	200 м	октябрь		
96.	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС от магистрали Пр.-6 до ж.д. Воинский проезд	120 м	сентябрь		
97.	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС  т/с  от П-3 до  Ш-10	100 м	октябрь		
98.	Гидравлическое испытание внутриквартальных тепловых сетей	1	май		
99.	Восстановление нарушенного благоустройства  после ремонта тепловых сетей	3 шт	август-октябрь		
Сети от котельной ООО «Факел»	
100.	Текущий ремонт тепловых сетей (ремонт запорной арматуры, отводы, замена участков до 1м, заваривание)	2 шт	май	Гагаринские РТС	
101.	Ремонт насосных агрегатов на ЦТП	2 шт	июль		
102.	Ремонт  кровли котельных ЦТП	453,6м	июль		
103.	Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов 	740 м	июль		
104.	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ЦТП 11.12.17.18	96  м	июнь		
105.	Ремонт оборудования ЦТП	5 шт	июнь		
106.	Покраска оборудования, трубопроводов ТС и ГВС	75 шт	июнь		
                                                                                                           Котельная ООО «Факел»	
107.	Ремонт котла ПТВМ-30 №1 (ремонт горелочных устройств, ревизия запорной арматуры)	6 единиц
10 задвижек	май	ООО «Факел»	
108.	Ремонт котла ПТВМ-30 № 2 (ремонт горелочных устройств, ревизия запорной арматуры)	6 единиц
10 задвижек	май		
109.	Ревизия запорной арматуры  	34 единиц	май		
110.	Ремонт трубопроводов ХВО (ревизия запорной арматуры). Досыпка смолы Ку-2-8	22 з/о
500 кг	май		
111.	Промывка емкости деаэраторов ДСА-15/50	1 шт.	июнь		
112.	Ремонт подпиточных насосовК-50/32 № 1; К-45/50 № 2; К- 45/50 № 3	3 единицы	июнь-сентябрь		
113.	Ремонт  насоса рециркуляции НКУ-250/50№1; НКУ-250/50№2	2 шт.	июнь		
114.	Ремонт парового котла ДКВР 6,5/13 №3	1 шт.	февраль		
115.	Ремонт насосов сырой воды К-45/50 № 1; К-45/50 № 2;	2шт	июль-август		
116.	Ремонт солевых насосов Х-18/20 № 1-5 	5 шт.	январь-июль		
117.	Промывка и опрессовка тепловых сетей	81 шт	август		
118.	Ремонт парового насоса ПДВ- 25/20 № 1; ПДВ- 25/20 № 2	2 шт.	июнь-июль		
119.	Ревизия запорной   арматуры в ТП	12 шт.	май - июль		
120.	Опрессовка и гидропневматическая промывка внутренних трубопроводов теплосети, (ревизия запорной арматуры, очистка грязевиков)	270 п.м.	август		
121.	Промывка и опрессовка систем отопления и ГВС	75 шт..	сентябрь		
Котельная БМК-1 (ул. Бахтина)	
122.	Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов  т/с от ТК-9 до ж.д. ул.Строителей	220 м	июнь	Гагаринские РТС	
123.	Замена арматуры ТС	51 шт	июнь		
124.	Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов  т/с от ТК-23а до ж.д. по ул. Гагарина 	48 м	июль		
125.	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС  от  ЦТП-13 т/с  до ТК-10	20 м	август		
126.	Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т/с до 1м, заваривание повреждений)              	1 шт.	сентябрь		
127.	Ремонт теплотехнического оборудования, КИПиА на котельной   	25 шт.
	июль- август
		
Котельная БМК-2 (ул. Заводская)	
128.	Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т/с до 1м, заваривание повреждений)              	1 шт.	май	Гагаринские РТС	
129.	Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов от ТК-2 до П.-21 ул. Заводская	40 м	июль		
130.	Ремонт оборудования,  КИПиА на котельной 	27 шт.	сентябрь		
131.	Замена насосных агрегатов на ЦТП 	1 шт.	август		
Котельная БМК  -3  (м/н «Лесной»)	
132.	Текущий ремонт тепловых сетей, (установка отводов, замена уч. т.с.1м.	1шт.	июнь	Гагаринские РТС	
133.	Ремонт оборудования, КИПиА, запорной арматуры на котельной,	15 шт.	август - сентябрь		
Котельная БМК  по ул. Пушная	
134.	Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т/с до 1м, заваривание повреждений)              	1 шт.	май	Гагаринские РТС	
135.	Ремонт оборудования, КИПиА, запорной арматуры на котельной	4шт	май		
136.	Покраска оборудования, трубопроводов котельной	20 м.	сентябрь		
137.	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС от Пр до ПР 10	30м.	сентябрь		
138.	Ремонт арматуры ТС	22 шт.	сентябрь		
 ООО «Маяк» (котельная МКД ул. Комсомольская, д. 9).	
139.	Промывка котлов «THERM-TRIO 90T»	2 шт.	май-июль	ООО «Маяк»	
140.	Поверка контрольно-измерительных приборов	16 шт.	май-сентябрь		
141.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	12 шт.	май-сентябрь		
142.	Установка модуля мобильной связи	1 шт.	май-июль	ООО «Маяк»	
143.	Замена теплообменников котлов	3 шт.	май-июль	ООО «Маяк»	
144.	Текущий ремонт трубопроводов системы отопления, промывка и опрессовка	4м.	май-сентябрь		
145.	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 	2 шт	сентябрь		
ООО «Маяк» (котельная ФОК «Восток» г. Гагарин)	
146.	Промывка котлов КЧМ-5	4 шт.	май-июль	ООО «Маяк»	
147.	Промывка бойлера горячего водоснабжения	2 шт.	май-июль		
148.	Поверка контрольно-измерительных приборов	38 шт.	май-сентябрь		
149.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	40 шт.	май-сентябрь		
150.	Ревизия и текущий ремонт системы автоматики котельной (замена блоков автоматики котлов – 3 шт.)	       3 шт.	июнь-сентябрь		
151.	Замена сетевого насоса ЦНЛ 32/110-15/2	1 шт.	июнь-сентябрь		
152.	Замена циркуляционного насоса горячего водоснабжения ЦНЛ 15/80-0,25/2	1 шт.	июнь-сентябрь		
153.	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 	        6 шт.	сентябрь		
ООО «Маяк» (котельная школы в д. Родоманово)	
154.	Промывка котлов КЧМ-7	4 шт.	май-июль	ООО «Маяк»	
155.	Поверка контрольно-измерительных приборов	17 шт.	май-сентябрь		
156.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	12 шт.	май-сентябрь		
157	Ревизия и текущий ремонт системы автоматики котельной	1 шт	май-сентябрь		
158.	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 	5 шт.	сентябрь		
ООО «Маяк» (котельная школы в д. Пречистое)	
159.	Промывка котлов КЧМ-5	4 шт.	май-июль	ООО «Маяк»	
160.	Поверка контрольно-измерительных приборов	22 шт.	май-сентябрь		
161.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	15 шт.	май-сентябрь		
162.	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов	5 шт	сентябрь		
ООО «Маяк» (котельная СДК в д. Клушино)	
163.	Промывка котлов «THERM-TRIO 90T»	2 шт.	май-июль	ООО «Маяк»	
164.	Поверка контрольно-измерительных приборов	26 шт.	май-сентябрь		
165.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	24 шт.	май-сентябрь		
166.	Ревизия и текущий ремонт системы автоматики котельной (замена электроконтактных манометров – 6 шт.)	6 шт	май-сентябрь		
167.	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 	3 шт	сентябрь		
168.	Замена сетевого насоса 	1 шт	сентябрь		
ООО «Маяк» (котельная в д. Поличня, ул. Новая)	
169.	Промывка котлов КТГ-0,16	2 шт.	май-июль	ООО «Маяк»	
170.	Промывка и очистка пластинчатых теплообменников сетевой воды	2 шт.	май-июль		
171.	Поверка контрольно-измерительных приборов	36 шт.	май-сентябрь		
172.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	32 шт.	май-сентябрь		
173.	Ревизия и текущий ремонт системы автоматики котельной (замена запальных электродов – 2 шт.)	       2 шт.	июнь-сентябрь		
174.	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 	      5 шт	сентябрь		
ООО «Жилищник» (котельная АБК г. Гагарин, проезд Первомайский, д. 1)	
175.	Промывка котлов «THERM-TRIO 90T»	4 шт.	май-июль	ООО «Жилищник»	
176.	Поверка контрольно-измерительных приборов	25 шт.	май-сентябрь		
177.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	16 шт.	май-сентябрь		
178.	Ревизия и текущий ремонт системы автоматики котельной (замена электроконтактных манометров – 2 шт., датчика давления обратной сетевой воды – 1 шт.)	       3 шт.	май-сентябрь		
179.	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 	    6 шт.	сентябрь		
СХПК колхоз-племзавод «Радищево» (газовая котельная)	
180.	Ремонт тепловой изоляции теплотрассы	156 м	Май-сентябрь	СХПК колхоз-племзавод «Радищево»	
181	Ремонт мостиков в местах прохода через теплосеть	3 шт	Май-сентябрь		
182	Промывка и опрессовка тепловых сетей	360 м	Май-сентябрь		
183.	Повторная аттестация персонала, обслуживающего газовую котельную	1 раз в год	Май-сентябрь		
184	Осмотр и ремонт котлов КСВаУ -0,63 ГН и газового оборудования сушильных агрегатов на зернотоке.	5шт	Май-сентябрь		
185.	Осмотр газовых сетей и мест отключающей арматуры	5 шт	Май-сентябрь		
186.	Комплектация инструментами, оборудованием, материалами, аптечками, средствами личной защиты, необходимыми для выполнения ремонтных и аварийных работ	2 шт	Май-сентябрь		
187.	Комплектация щита противопожарной безопасности	2 шт.	Май-сентябрь		
V. Гагаринский РЭС филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Смоленскэнерго»	
189	Капитальный ремонт ВЛ 6-10 кВ	9 шт/168 км	Февраль-сентябрь 	Начальник РЭС, главный инженер РЭС	
190.	Выполнение программы по расчистке просек 6-10 кВ по утвержденным графикам 	14,4га	Февраль-сентябрь		
191.	Выполнение программы по расширению просек 6-10 кВ по утвержденным графикам 	5,82га	октябрь		
192	Замена провода на ВЛ-10 кВ марки АС-50	1,26 км.	сентябрь		
193.	Замера опор, стоек на ВЛ-10 кВ	89шт	Апрель-сентябрь		
194.	Кап ремонт ВЛ 0,4 кВ	7шт/7,239 км.	Март-август		
195.	Замена провода ВЛ-0,4 на большее сечение	8,44км.	Март-август		
196.	Замена изоляторов 0,4 кВ	375 шт	Май-август		
197	Кап. ремонт ТП-10/0,4кВ	18 шт.	Март-август		
198.	Кап. ремонт силовых трансформаторов	16 шт.	Март-август		
199	Замена автоматический выключателей в РУ-0.4кВ на ТП-10	6 шт	Март-апрель		
200	Замена рубильников в РУ-0,4кВ на ТП-10/0,4кВ	4 шт	Март-апрель		
201.	Ремонт инвентаря для уборки снега и льда.	5 шт	октябрь		
03VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	
МУП «Транспортно-коммерческий центр»	
202.	Установка заглушек на трубопроводы теплопункта согласно акту по разграничению балансовой принадлежности теплосетей	2 шт	до 01.09.17	МУП «Транспортно-коммерческий центр»	
203	Ремонт внутренних теплосетей в тепловом пункте (ремонт вентилей).	3 шт	до 01.09.17		
204.	Промывка и испытание на прочность внутренних теплосетей	330 м	по графику организации подрядчика		
205.	Ревизия запорной арматуры и проведение испытаний на плотность	2 шт			
206.	Утепление окон в помещениях.	4 шт	до 01.10.17		
207.	Ревизия состояния  мягкой кровли по необходимости. 	--	до 01.10.17		
208.	Подготовка и закупка уборочного инвентаря к зимнему периоду	5 шт	до 15.10.17		
МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства»	
209.	Проведение очередных  режимно-наладочных работ по  БМТ МСОШ д. Акатово	2шт.	июнь-август	гл. инженер
Мамонтов А.А.
мастер ГС
Тимофеев Ю.Т.	
210.	Проведение очередных поверок  средств измерений  и КиПА на БМТ МСОШ д. Никольское, КБТА  МСОШ д. Акатово, КБТА МСОШ д. Токарёво	68 ед.	май-август		
211.	Ревизия системы автоматики газовых горелок БМК д. Акатово	 1 котел
1 клапан	май	гл. инженер
Мамонтов А.А.	
212.	Ремонт (восстановление утепления, замена зонтов) на дымоотводящих трубах БМТ МСОШ д. Никольское	3 трубы	июнь	гл.инженер
Мамонтов А.А.	
213.	Очистка и химическая промывка теплообменников котлов  БМТ МСОШ д. Никольское (3 котла  THERM) и  КБТА МСОШ д. Токарёво (4 котла THERM) 	7 котлов	июль	мастер ГС
Тимофеев Ю.Т.	
214.	Очистка и химическая промывка пластинчатых  водоподогревателей  КБТА  МСОШ д. Акатово и МСОШ д. Токарёво	2 шт.	Август -сентябрь		
215.	ревизия тепловых узлов на ж/домах	44 шт	июнь-август		
216.	Гидравлические испытания тепловых сетей ж/домов	44 шт	Июнь-август		
217	Замена задвижек  тепловая камера ул. Мелиоративная д.5, ул. Красноармейская д.52	6 шт	Июнь-август		
218	Утепление торцевых стен пер. Мелиоративный д.4,6	100 кв.м	Май-сентябрь		
219	Замена 2-х настенных котлов ТГ СДК д. Родоманово	2 шт	Май-сентябрь		
220	Гидравлические испытания внутренних систем отопления МСОШ д. Акатово, д. Никольское, д. Токарево	3700п.м.	Май-сентябрь		
VII. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	
221.	Подготовка спецтехники	30 ед.	май-октябрь	МУП «Коммунальщик», Гагаринский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор»	
222.	Ямочный ремонт  улично-дорожной сети	360550 кв.м.	май-октябрь		
223.	Заготовка песко-соляной смеси	12350 тонн	май-октябрь		
224.	Прочистка колодцев ливневой канализации дорожной сети улиц г. Гагарин	33 ед.	2-3 квартал		
VIII. ОБЪЕКТЫ  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЫ	
Комитет по образованию	
225.	Заготовка и организация  хранения топлива:
уголь – 165 тонн
дрова - 75 м3		165т
75 м3	май-сентябрь
	Комитет по образованию, руководители
образовательных
организаций	
226.	Техническое  освидетельствование отопительных котлов, наладка котлов и оборудования, поверка приборов КИПиА котельных МБОУ «Ашковская основная школа», «Серго-Ивановская основная школа» «Колокольнинская основная школа»		май- август
		
227.	Опрессовка и промывка систем отопления.	24 шт	май- август		
228.	Проведение замеров сопротивления изоляции.	26 шт	июнь- ноябрь 		
229.	Поверка теплового счётчика МБДОУ «Детский сад «Звёздочка»	1 шт	май-август	Заведующий  МБДОУ	
230.	Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом, испытание пожарных кранов на водоотдачу	15 шт	июль-август	Комитет по образованию, руководители  образовательных
учреждений	
231.	Замена оконных блоков в группах №1.2.3.4  МБДОУ «Детский сад «Жемчужинка» 	363м2	май-июнь	Комитет по образованию, заведующий МБДОУ	
232.	Замена оконных блоков в группе №1.5.8.12 МБДОУ «Детский сад им. Ю.А.Гагарина»	183 м2	май-июнь		
233.	Замена оконных блоков в группе №2 МБДОУ «Детский сад «Жемчужинка»	155м2	май-июнь 		
334.	Ремонт кровли МБДОУ д/сад «Жемчужинка»	363 м2	май-июнь 	Комитет по образованию, директор образовательного учреждения	
335.	Замена оконных блоков МБОУ «Средняя школа №1»	105м2	июнь-август		
336.	Ремонт фекальной канализации в подвале, ливневой канализации МБДОУ д/сад «Снежинка»	310 м	июнь-август		
337.	Замена деревянных оконных блоков МБОУ «Средняя школа №3»	94,8м2	июнь-август		
338.	Ремонт кровли МБОУ «Средняя школа №1»	1050м2	июль-август		
339.	Замена деревянных оконных блоков МБОУ «Средняя школа №4»	233м2	июнь-август		
340.	Ремонт кровли над спортивным и актовым залами МБОУ «Токаревская средняя школа»	603м2	июнь-август		
341.	Заключение энергосервисных контрактов 10 шт.	10шт	июнь-август		
342.	Замена деревянных оконных блоков МБОУ «Никольская средняя школа»	238м2	июль-август		
Отдел по культуре	
343.	Опрессовка системы отопления МБУК МКДЦ  «Комсомолец», 
МБУК Кармановский КДЦ, МБУК «Гагаринская МЦБС», МБУДО «Гагаринская ДМШ имени И.Д. Кобзона», МБУДО «Гагаринская ДХШ	451м	июнь-август	Руководители  учреждений	
344.	Приобретение твердого топлива для сельских учреждений культуры
МБУК МКДЦ  «Комсомолец»  (уголь,  дрова)
МБУК «Гагаринская МЦБС» дрова	Уголь6м3
Дрова118м3	май - октябрь		
345.	Огнезащитная обработка МБУК МКДЦ  «Комсомолец», МБУДО «Гагаринская ДМШ имени И.Д. Кобзона»	298.5м2	июль-август		
346.	Контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций
МБУК МКДЦ  «Комсомолец», МБУК Кармановский КДЦ, МБУК «Гагаринская МЦБС»	4 об.	июнь-декабрь		
347.	Замеры сопротивления электропроводки МБУК МКДЦ «Комсомолец»,
МБУК Кармановский КДЦ, МБУК «Гагаринская МЦБС», МБУДО «Гагаринская ДМШ имени И.Д. Кобзона», МБУДО «Гагаринская ДХШ»	6 об.	июнь-август
		
348.	Ремонт парапетов и примыканий кровли в МБУДО «Гагаринская ДМШ»	246,9м2	июнь-август
		
349.	Ремонт кровли МБУДО «Гагаринская ДМШ»	1636м2	июнь-август		
350	Замена оконных блоков в Мишинском СДК	10шт	Май-июнь		
351	Замена оконных блоков МБУДО «Гагаринская ДМШ»	19шт	Апрель-май		
352	Ремонт кровли в Самуйловском СДК	282м2	Май-июль		
353	Ремонт кровли МБУК МКДЦ «Комсомолец»	86м2
	Май-сентябрь		

Приложение № 3
к постановлению
  Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от  _17.05.2017___  № _691_
Общий план
неотложных мероприятий, требующих финансовой поддержки  
бюджетов  Гагаринского городского поселения и муниципального образования 
«Гагаринский район»  Смоленской области в 2017 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Стоимость,
(тыс. руб.)	
Гагаринское городское поселение Гагаринского района	
1.	Реконструкция водопровода по ул. Гагарина от ул. 50-лет ВЛКСМ до центральной площади города Гагарин Смоленской области 	2 квартал	2 этап 2017 г.-7048,47 тыс.руб., в т.ч.:
областной бюджет-3500,0 тыс. руб.
городской бюджет – 3548,47 тыс. руб.	
2.	Приобретение 3-х теплообменников для котлов «Термона»	3 квартал	65,2	
3.	Приобретение модуля мобильной связи	3 квартал	22,4 	
Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области 

Объекты образования	
1.	Замена 2-х приборов учета тепловой энергии МБОУ «Кармановская средняя школа»	Июнь-июль	187,5	
2.	Замена приборов учета тепловой энергии и горячей воды МБОУ «Средняя школа № 3»	Июнь-июль	
250,0	
3.	Замена приборов учета тепловой энергии МБОУ детский сад «Крепыш»	Июнь-июль	
150,0	

Объекты культуры	
1	Замена 2-х оконных блоков дискозала  Мишинского СДК	Май-август	70,0	
2	Ремонт системы отопления Липецкого клуба	Май-август	20,0	
3	Замена 2-х котлов отопления в Родомановском СДК	Май-август	98,0	
4	Замена оконных блоков Ельнинского СДК	Май-август	33,5	
5.	Ремонт подвала МБУДО «Гагаринская ДМШ»	Май-август	820,0	
6.	Замена оконных блоков и дверей в Кармановской библиотеке	Май-август	150,0	
7.	Ремонт полов гардероба МБУДО «Гагаринская ДМШ»	Май-август	315,4	

Приложение № 4
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от  _17.05.2017___  № _691_

ГРАФИ К
остановки котельных и ЦТП Вяземского филиала ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" с прекращением
подачи горячего водоснабжения в летний период 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата остановки по отоплению	Дата остановки по ГВС	Время ремонта отопления/ГВС	
1	2	3	4	5	
Гагаринское городское поселение	
	Районная котельная,(вкл. ЦТП1-ЦТП10) 
 Воинский проезд 1А 	30.04.2017	13.06.2017 - 02.07.2017	20 дней	
	ЦТП1-ЦТП6	30.04.2017	13.06.2017-23.07.2017	41 день	
2	БМК ул. Бахтина (БМК-1)	30.04.2017	03.07.2017- 16.07.2017	14 дней	
	БМК ул. Заводская (БМК-2)	30.04.2017	22.05.2017 - 04.06.2017	14 дней	
4	ЦТП от ООО "Факел"	30.04.2017	15.05.2017-28.05.2017	14 дней	
5	Котельная в микрорайоне  «Лесной» (БМК-3)	30.04.2017	услуга горячего водоснабжения не предоставляется	153 дня	
б	БМК ул. Пушная, 2а	30.04.2017	17.07.2017-30.07.2017	14 дней	
Кармановское сельское поселение	
1	Котельная по ул. Заводская, д.4	30.04.2017	22.05.2017 - 04.06.2017	14 дней