АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от____28.01.2021____№_64_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 29.12.2020  № 1626

Во исполнение решения Гагаринского районного суда Смоленской области от 03.12.2019 дело № 2-261/19 по иску Роговой Ирины Александровны, действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетних детей Петрова Егора Викторовича, Петрова Ильи Викторовича, Петрова Марка Викторовича, к Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о принятии исчерпывающих мер по организации газоснабжения и водоснабжения  земельного участка с кадастровым номером 67:03:0010123:1162, расположенного в массиве ограниченного ул. Пролетарская, ул. Свердлова,          пер. Советский и ул. Советская г. Гагарин Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 29.12.2020 № 1626 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации газоснабжения и водоснабжения пер. Газетный в г. Гагарин Смоленской области»:
1.1. Приложения № № 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                          Р. В. Журавлев

Исполнитель:                                                       	Разослать:
                                                                                	прокуратура
  ______________ Е. Г. Перкусова                     	Управление СиЖКХ 
    3-46-60 						сайт
   « _____» ____________2021г. 

Визы:

О. И. Мартыненкова   _________________	«____» __________ 2021 г.

А. А. Жигалов            _________________	«____» __________ 2021 г.

Н. В. Добровольская  _________________	«____» __________ 2021 г.

А. А. Белова		_________________		«____» __________ 2021 г.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район»
 Смоленской области
от____28.01.2021____№_64_

ПЛАН
План мероприятий («дорожной карты») по организации
газоснабжения пер. Газетный в г. Гагарин
Смоленской области

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный	
1	Запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации, в ценах 2021 года	15.02.2021	Е. Г. Перкусова	
2	Проведение электронного аукциона на разработку проектно-сметной документации (заключение прямого договора)	31.03.2021	П. А. Базеева	
3	Проектирование (разработка проектно-сметной документации) на линейный объект	31.08.2021	Е. Г. Перкусова	
4	Прохождение экспертизы проектно-сметной документации	31.10.2021	Е. Г. Перкусова	
5	Утверждение проектно-сметной документации	30.11.2021	Е. Г. Перкусова	
6	Проведение электронного аукциона на строительство линейного объекта	31.03.2022	П. А. Базеева	
7	Заключение Договора аренды земельного участка на период строительства линейного объекта	30.04.2022	Д. Ю. Субботин	
8	Получение разрешения на строительство линейного объекта	16.05.2022	А. А. Рытьков	
9	Строительство линейного объекта	30.09.2022	Е. Г. Перкусова	
10	Заключение Департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области	31.10.2022	Е. Г. Перкусова	
11	Акт ввода в эксплуатацию законченного строительства линейного  объекта	14.11.2022	Е. Г. Перкусова	
12	Постановка на кадастровый учет трассы линейного объекта	30.11.2022	Д. Ю. Субботин	
13	Передача линейного объекта на баланс эксплуатирующей организации	31.12.2022	Е. Г. Перкусова	
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от____28.01.2021____№_64_

План мероприятий («дорожной карты») по организации
водоснабжения и водоотведения пер. Газетный в г. Гагарин
Смоленской области

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный	
1	Запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации, в ценах 2021 года	15.02.2021	Е. Г. Перкусова	
2	Проведение электронного аукциона на разработку проектно-сметной документации (заключение прямого договора)	31.03.2021	П. А. Базеева	
3	Проектирование (разработка проектно-сметной документации) на линейный объект	31.08.2021	Е. Г. Перкусова	
4	Прохождение экспертизы проектно-сметной документации	31.10.2021	Е. Г. Перкусова	
5	Утверждение проектно-сметной документации	30.11.2021	Е. Г. Перкусова	
6	Проведение электронного аукциона на строительство линейного объекта	31.03.2022	П. А. Базеева	
7	Заключение Договора аренды земельного участка на период строительства линейного объекта	30.04.2022	Д. Ю. Субботин	
8	Получение разрешения на строительство линейного объекта	16.05.2022	А. А. Рытьков	
9	Строительство линейного объекта	30.09.2022	Е. Г. Перкусова	
10	Заключение Департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области	31.10.2022	Е. Г. Перкусова	
11	Акт ввода в эксплуатацию законченного строительства линейного  объекта	14.11.2022	Е. Г. Перкусова	
12	Постановка на кадастровый учет трассы линейного объекта	30.11.2022	Д. Ю. Субботин	
13	Передача линейного объекта на баланс эксплуатирующей организации	31.12.2022	Е. Г. Перкусова