АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   __21.05.2019___     №    _786_

О первоочередных мерах, утверждении планов 
организационно-технических и неотложных 
мероприятий по подготовке жилищного фонда,
объектов жилищно-коммунального хозяйства,
электро- и теплоэнергетики, социальной сферы
Гагаринского района Смоленской области 
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро-  и теплоэнергетики, социальной сферы Гагаринского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года,  руководствуясь Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103,  распоряжением Администрации Смоленской области от 10.04.2019 № 489-р/адм «О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов», в соответствии с Уставом  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать штаб по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергетики, социальной сферы муниципального образования  «Гагаринский  район» Смоленской области  к работе в осенне - зимний период 2019-2020 годов (далее - Районный штаб) и утвердить его состав (Приложение № 1).
2. Утвердить  общий план первоочередных организационно-технических мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергетики, социальной сферы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области к  работе в осенне - зимний период 2019-2020 годов (Приложение №2).
3. Районному штабу (А. А. Жигалов):
3.1. Утвердить график проведения заседаний Районного штаба.
3.2. Проводить заседания один раз в две недели, по понедельникам. 
3.3. Организовать контроль по восстановлению резервных топливных хозяйств объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Гагаринский район).
4. Комитету по образованию (А. Н. Смирнов), отделу по культуре                (О. В. Брехова), отделу по физической культуре, спорту и делам молодёжи            (В. С. Панков) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Администрация района) обеспечить:
4.1. Участие своих представителей в заседаниях Районного штаба, на которых будет заслушиваться информация о ходе подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 гг.
4.2. Контроль подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 гг.
4.3. Контроль ежемесячных расчётов подведомственными организациями за коммунальные услуги: по отоплению, холодному и горячему водоснабжению,   водоотведению, электроснабжению, газоснабжению;
4.4. Контроль бесперебойной работы систем теплоснабжения подведомственных организаций. 
4.5.  Контроль создания необходимого запаса топлива, его своевременной вывозки и сохранности в подведомственных организациях. 
4.6. В срок до 01.07.2019 назначить приказами комиссии по оценке готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.
4.7. В срок до 01.09.2019 провести электротехнические измерения и испытания основного энергетического оборудования объектов с массовым пребыванием людей.
4.8.  В срок до 01.10.2019 обеспечить восстановление резервных источников электроснабжения для электрооборудования котельных I и II категории, отапливающих муниципальные учреждения. 
5. Руководителям теплоснабжающих предприятий 
5.1. В срок до 01.10.2019 обеспечить создание 10-дневного запаса по резервным видам топлива. 
5.2. Заключить договоры с потребителями различных форм собственности на поставку им тепловой энергии, с ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» - на поставку природного газа.
5.3. В срок до 01.10.2019 осуществить необходимый капитальный и текущий ремонт энергетического оборудования, перекладку и ремонт тепловых сетей согласно планам мероприятий по подготовке энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 гг., ремонт и восстановление резервного топливного хозяйства, обеспечение резервным топливом, предусмотрев мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.
5.4. Обеспечить ежемесячные расчеты с предприятиями-поставщиками за потребленный природный газ, полученные энергетические ресурсы с учетом кассового разрыва, возникающего при платежах населения за тепловую энергию.
          6. Финансовому управлению Администрации района (Т. В. Кудрина) обеспечить контроль исполнения  своевременных расчетов организациями, финансируемыми из бюджета муниципального района, с поставщиками за потребляемые топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.
7. Управлению по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района (далее – Управление СиЖКХ) (О. И. Мартыненкова):  
7.1. Обеспечить организацию заседаний Районного штаба.
7.2. Организовать сбор, проверку достоверности и обобщение сведений о подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского и сельских поселений к работе в зимних условиях. 
7.3. Для Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству: 
7.3.1. Предоставлять статистическую отчетность о ходе подготовки к отопительному сезону 2019 - 2020 гг. и его прохождении по формам:
	-№ 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», (далее – форма № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7, в соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 04.04.2019 № 459-р/адм, ежемесячно с 01.06.2019 по 01.11.2019;
	-№ 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе  жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 №206 - по состоянию на 01.12.2019;
	-№ 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 №206 - ежемесячно с 01.11.2019 по 01.04.2020;
7.3.2. В срок до 01.08.2019  завершить разработку лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2020 год для потребителей, финансируемых из местных бюджетов, и представить на окончательное согласование.
           7.4. Обеспечить контроль  ввода в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства, строительство и реконструкция которых осуществляется за счёт средств бюджетов различных уровней.
          8. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений  Гагаринского района Смоленской области: 
8.1. Создать штабы по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро-  и теплоэнергетики, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 гг.
8.2. Завершить в срок до 15.09.2019 ремонт систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, конструктивных элементов зданий, утепление жилых домов, производственных и общественных зданий. Оформить в срок до 01.11.2019 паспорта готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 гг. в соответствии с федеральным законодательством и предоставить его в Управление СиЖКХ Администрации района. 
8.3. Обеспечить выделение денежных средств из местных бюджетов на проведение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 гг., на приобретение необходимых материально-технических ресурсов и создание запаса топлива.
8.4. Обеспечить контроль проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) зданий и объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию указанных зданий и объектов.
8.5. Организовать контроль восстановления резервных топливных хозяйств объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований независимо от форм собственности.
8.6. Выявить бесхозяйные тепловые сети и до начала отопительного сезона 2019 - 2020 гг., но не более чем в течение 30 дней с даты их выявления, определить  теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями и которая до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети будет осуществлять их содержание и обслуживание.
8.7. Разработать и утвердить календарный план-график постановки на государственной кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. 
8.8. Обеспечить создание 45-дневного запаса по основным и 10-дневного запаса по резервным видам топлива к началу отопительного сезона 2019 - 2020 гг.
8.9. В срок до последнего числа месяца отчетного периода  обеспечить предоставление в Управление СиЖКХ Администрации района формы № 1-ЖКХ (зима).
8.10. Заключить договоры с обслуживающими организациями на зимнее содержание улично-дорожной сети и сооружений на них в населенных пунктах.
     9. В срок до 15.09.2019 предприятиям и организациям всех форм собственности, их обособленным подразделениям, имеющим на своем балансе жилые дома и объекты коммунальной инфраструктуры, теплоэнергетического хозяйства, расположенным на территории Гагаринского  городского поселения и Гагаринского района:
- обеспечить выполнение ремонтных работ на системах электро-, тепло,- водо, – газоснабжения и водоотведения с применением энергосберегающих технологий, уделить особое внимание готовности тепловых сетей и котельных;
- подготовить жилые, общественные и производственные здания к эксплуатации в осенне-зимний период, обеспечить создание в них теплового контура.
    10. Руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории Гагаринского городского поселения и Гагаринского района, занятых выполнением предзимних работ, начиная с 01 06 2019 года ежемесячно, до второго числа, следующего за отчетным месяцем представлять в Управление СиЖКХ Администрации района оперативный отчет о подготовке к работе в зимних условиях № 1- ЖКХ (зима) по форме, утвержденной Постановлением Федеральной службы  государственной статистики (Росстата) от 27.02.2006 №7. 
          11. В срок до 15.09.2019   управляющим и обслуживающим жилищным  организациям обеспечить готовность жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 гг. и принять все меры по сокращению задолженности  населения за жилищно-коммунальные услуги.
12. В срок до 01.10.2019:
12.1. Всем организациям, находящимся на территории Гагаринского городского поселения и Гагаринского  района, участвующим в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от организационно-правовой формы и вида собственности, на основании актов проверки готовности к работе в осенне-зимний период, получить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 гг. в по ранее согласованным формам и предоставить их в Управление СиЖКХ Администрации района.
12.2. Организациям, эксплуатирующим автомобильные дороги и сооружения на них, обеспечить выполнение ремонтно-восстановительных работ, создание нормативного запаса песко - соляной смеси  и подготовку техники для содержания объектов в зимних условиях.
13. Гагаринскому лесничеству- филиалу ОГКУ «Смоленское управление лесничествами» (Н. А. Воробьев) выделить делянки для заготовки дров для обеспечения потребности населения и муниципальных учреждений в соответствии с заявками.
14. Предложить всем предприятиям и организациям, независимо от организационно-правовой формы и вида собственности, и населению Гагаринского района максимально погасить к началу отопительного сезона  имеющуюся задолженность за коммунальные услуги: по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению. 
15. Еженедельно, начиная с 01.06.2019, руководителям управляющих организаций и предприятий  жилищно-коммунального хозяйства района представлять информацию  в Управление СиЖКХ Администрации района о проводимых предзимних работах.
16. Отделу ГО, ЧС и ЕДДС Администрации  района  (А. А. Захаров):
16.1. На основании типового регламента организации и применения временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории Гагаринского района Смоленской области разработать и утвердить типовой регламент организации временного электроснабжения потребителей района.
16.2. В срок до 25.06.2019 отработать схему  взаимодействия с эксплуатационными, ремонтными, строительно-монтажными, транспортными, наладочными и другими организациями по предупреждению и ликвидации  аварийных ситуаций на объектах тепло-, электроэнергетики и коммунального хозяйства  Гагаринского района Смоленской области.
17. Опубликовать данное постановление с приложениями на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в сети «Интернет». 
18. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                           А. А. Жигалов

Приложение № 1
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район»
Смоленской области
от  _21.05.2019_  № _786_

СОСТАВ

штаба по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергетики, социальной сферы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  к работе в осенне - зимний период 2019 -2020 гг. (далее - Районный штаб)

Жигалов Алексей Анатольевич	- первый заместитель Главы  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – муниципальное образование), начальник Районного штаба;	
Мартыненкова Оксана Ильинична	- начальник Управления СиЖКХ  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, заместитель начальника Районного штаба; 	
Герасина Лола Абдухакимовна
	- старший менеджер отдела ЖКХ Управления СиЖКХ Администрации района, секретарь Районного штаба;	
Смазкина Ксения  Сергеевна	- ведущий  специалист отдела ЖКХ Управления СиЖКХ, муниципальный жилищный инспектор, секретарь Районного штаба;	
Члены штаба:		
Акимов Владимир Васильевич	- директор ООО «Стройизоляция» (по согласованию);	
Акимов Сергей Владимирович   	- директор ООО «Гагаринское ЖЭУ» (по согласованию);	
Британова Наталья Николаевна        	- помощник Гагаринского межрайонного прокурора  юрист 1 класса (по согласованию);	
Деев Геннадий Михайлович	- председатель  Совета депутатов Гагаринского городского поселения (по согласованию);	
Дергачев Виктор Андреевич	- генеральный директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию);	
Загородний Вадим Владимирович	- Директор ООО «Маяк»  (по согласованию);	
Захаров Александр Алексеевич	- начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации района;	
Иванов Алексей Николаевич 	- начальник Гагаринского РЭС (по согласованию);	
Иванов Виктор Иванович	- директор МУП «Горводоканал» (по согласованию);	
Крутова Юлия Викторовна	- начальник отдела ЖКХ Управления Администрации района;	
Кудрина Татьяна Валентиновна  	- Заместитель Главы - начальник финансового Управления Администрации района; 	
Кузенков Вадим Викторович	Начальник МУП «Управление ЖКХ и С» (по согласованию);	
Кухарев Андрей Васильевич	- начальник Гагаринского РТС ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (по согласованию); 	
Мирошник Александр Владимирович 	- директор ООО «Факел» (по согласованию);	
Молдованова Эльвира Михайловна	- директор ООО «Наш Дом» (по согласованию);	
Морозова Людмила Васильевна 	- заместитель Главы муниципального образования;	
Семенов Владимир Михайлович	- младший специалист инспекторского отдела ГУ «Государственная жилищная инспекция  Смоленской области» (по согласованию);	
Хайленко Дмитрий Владимирович	- руководитель Гагаринского участка филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» (по согласованию)	
Чернов Виктор Иванович	- директор ООО «Кармановское ЖЭУ» (по согласованию)	

	                                                                                                                              Приложение № 2	                           Приложение № 2
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от  _21.05.2019_  № _786_
Общий план
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергетики, социальной сферы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области к работе в осенне - зимний период 2019-2020 гг.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
№
п\п	Наименование мероприятий 	Планируемая стоимость работ, тыс.руб.	Планируемый объем работ	Срок исполнения	Исполнитель 	
	I.Объекты водоснабжения и водоотведения	
	МУП «Горводоканал»                                                общая стоимость мероприятий  15 511,6 тыс.руб.(средства предприятия)	
	Сети канализации(водоотведения) на сумму                                                                                                                          310,0 тыс.руб.	
1.	Ремонт канализационных колодцев	30,0	20 шт.	май-сентябрь	МУП «Горводоканал»	
2.	Промывка канализационной сети	280,0	30 км	май-сентябрь		
	Очистные сооружения канализации(водоотведение)                                                                                               на сумму 350,0 тыс.руб	
3.	Обваловка песковых и иловых площадок на городских очистных сооружениях (ОСК)	200,0	1800 м²	июль-август	МУП «Горводоканал»	
4.	Ремонт выпускного коллектора ОСК	150,0	600 м	май-июль		
	Сети водопровода                                                                                                                                             на сумму 14 851,6 тыс.руб.	
5.	Реконструкция участка  водопроводной сети по ул. Ленина: от ул. Гагарина до пересечения с ул. Льва Толстого	4594,2	500 м	июль-сентябрь	

МУП «Горводоканал»

	
6.	Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Петра Алексеева: от ул. Строителей до пересечения с ул. Гагарина	3201,4	500 м	      июнь-июль		
7.	Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Мичурина	2700,0	500 м	апрель-июнь		
8.	Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Ленина, д. 77 	80,0	100 м	апрель-май		
9.	Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Ленина: от дома №75 до дома № 83 	80,0	100 м	апрель-май		
10.	Подключение абонентов к новому водоводу по ул. Танкистов: от пересечения с ул. Пушная до пересечения с ул. Мичурина, от пересечения с ул. Танкистов до пересечения с пер. Студенческий	3551,0	500 м	июль		
11.	Замена участка сети по ул. Красноармейская к домам №74,76	90,0	100 м	апрель		
12.	Замена ввода в дома: ул. Свердлова д. 90, ул. Строителей д. 86, ул. Красноармейская д. 75-77,71, ул. Строителей д. 157, ул. Петра Алексеева д. 15	180,0	150 м	апрель		
13.	Ремонт водопроводных колодцев с запорной арматурой	35,0	15 шт.	май-сентябрь		
14.	Ремонт пожарных гидрантов	200,0	15 шт.	апрель-август		
15.	Промывка водопроводных сетей	90.0	40 км	май-сентябрь		
16.	Ремонт водозаборных колонок	50,0	15 шт.	апрель-август		
	ООО «Кармановское ЖЭУ»                                                      общая стоимость мероприятий 56,86 тыс.руб.(средства предприятия)	
	Водопотребление на сумму 32,8 тыс.руб.	
17.	Промывка и опрессовка системы отопления с. Карманово, м-н Западный, д. №1,2,3,4,5 и ул. Мира, д. №3		6 шт.	май-июнь	ООО «Кармановское ЖЭУ»	
18.	Замена запорной арматуры и вентилей, непригодных к дальнейшей эксплуатации в подвалах МКД			май-сентябрь		
19.	Дезинфекция водопровода после весеннего паводка		12219 м/п	апрель		
20.	Чистка и дезинфекция резервуара №1		1 шт.	май		
21.	Замена труб центрального водопровода на ПНД мкн. Западный		170 м²	июль-август		
22.	Замена насоса ЭВЦ 6-16-90		1 шт.	июль-август		
23.	Замена задвижек центрального водопровода ø 100 ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пушкинская		4 шт.	апрель-май		
	Водоотведение: на сумму 24,06 тыс.руб.	
24.	Очистка иловых карт		2 шт.	апрель-август	ООО «Кармановское ЖЭУ»	
25.	Вырубка кустарников			май, август		
26.	Очистка центральной КНС		1 шт.	апрель		
27.	Очистка КНС м-н Западный, ул. Заводская			1 раз в квартал		
28.	Обкос травы			май, август		
29.	Очистка резервуаров отстойников		8 шт.	июнь-август		
30.	Очистка сточного канала		1 км	июль		
31.	Ремонт кровли аэротенка		180 м²	июнь-июль		
32.	Окраска металлических лестниц, перил, табличек на очистных сооружениях		6 шт.	июль-август		
33.	Очистка, промывка канализационных колодцев		37 шт.	июль-август		
34.	Очистка аэротенка		1 шт.	июль-август		
35.	Чистка вторичных отстойников		2 шт.	июль-август		
36.	Демонтаж аэраторов		24 м	июль-август		
	Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  администрация муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области          общая стоимость мероприятий 3000,0 тыс.руб. (средства бюджета Гагаринского городского поселения)	
37.	                         Реконструкция ветхих водопроводных сетей г. Гагарин                                                                                    на сумму 2000,0 тыс. руб	
38.	Водопроводная сеть по ул.Ленина от кинотеатра «Космос» до пересечения с ул.Льва Толстого		550 м			
39.	Водопроводная сеть по ул. Петра Алексеева от пересечения с ул. Гагарина		500 м			
40.	Водопроводная сеть по ул. Строителей от ЦТП №1 вдоль швейной фабрики		160 м			
	Реконструкция объектов водоотведения на сумму 60997,5 тыс.руб.( в т.ч. средства областного бюджета 58063,9 тыс.руб. и средства бюджета Гагаринского городского поселения  2933,6 тыс.руб.)	
41.	Реконструкция блока механической очистки, капитальный ремонт сооружений биологической очистки на городских очистных сооружениях города Гагарин Смоленской области	60997,51,в т.ч.
58063,9 т.руб.-ОБ;
2933,6 т.руб.-МБ				
                                         Проведение проектирования по объектам водоснабжения и водоотведения                                                   на сумму 1000,0 тыс. руб 	
42.	Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей отведения сточных вод, с устройством канализационной насосной станции производительностью 100м³/ч и напорным коллектором, для перекачки сточных вод на очистные сооружения города, в 
г. Гагарин, микрорайон Звездный					
43.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационной насосной станции КНС №4 г. Гагарин, микрорайон Северный, ул. Строителей					
	II. Жилищный фонд	
	ООО «Стройизоляция»                                                               общая стоимость мероприятий 1638,54тыс.руб. (средства предприятия)	
44.	Установка рассечек на вводах в тепловых пунктах домов	21,3	71 шт.	май	

ООО «Стройизоляция»	
45.	прмывка и опрессовка систем отопления	177,5	71 шт.	июнь-август		
46.	Ревизия запорной  арматуры 	29,24	680 шт.	май-август		
47.	Ремонт внутренних трубопроводов 	126,0	320 п. м.	май-август		
48.	Ревизия оборудования тепловых пунктов, поверка и установка КИП 	96,0	71 шт.	май-июль		
49.	Снятие рассечек на вводах систем отопления ж/домов 	21,3	71 шт.	сентябрь		
50.	Наладка и регулировка систем отопления и ГВС 	46,0	71 шт.	сентябрь		
51.	Текущий ремонт жилого фонда в т. ч.:
-ремонт дверных полотен и заполнений	28,0	6 шт.	июнь-сентябрь		
52.	-остекление мест общего пользования	4,5	15 м²	июль-сентябрь		
53.	-заделка подвальных продухов	12,0	6 шт.	сентябрь-октябрь		
54.	Ремонт изоляции наружных межпанельных швов	140,0	1800 м.п.	май-октябрь		
55.	Ремонт мягких кровель	849,7	2900 м²	июнь - сентябрь		
56.	Ремонт шиферных кровель 	68,0	70 м²	июнь - сентябрь		
57.	Ремонт козырьков балконов и входов в подъезды	11.0	3 шт.	май-август		
58.	Ремонт печей 	         -  		июнь-август		
59.	Установка пружин на дверях 	8,0	40 шт.	август-сентябрь		
	ООО «Гагаринское ЖЭУ»                                                                      общая стоимость мероприятий 582,9 тыс.руб. (средства предприятия)	
60.	Установка рассечек на вводах в тепловых пунктах домов	6,3	21шт.	май	ООО «Гагарин. ЖЭУ»

	
61.	Ревизия запорной  арматуры	5,74	84 шт.	май-август		
62.	Ремонт внутренних трубопроводов 	7,4	15 п.м.	май-август		
63.	Промывка и опрессовка систем отопления	9,0	21шт.	июнь-август		
64.	Ревизия оборудования тепловых пунктов, поверка и установка КИП	3,7	21 пункт	май-июль		
65.	Ремонт печей	4,0	2 шт.	июнь-август		
66.	Наладка и регулировка систем отопления и ГВС	19,0	21 шт.	сентябрь		
67.	Снятие рассечек на вводах систем отопления ж/домов	6,3	21 шт.	сентябрь		
68.	Текущий ремонт жилого фонда в т. ч.:
-ремонт дверных полотен и заполнений	5,4	2 шт.	июнь-сентябрь		
69.	-остекление мест общего пользования	5,3	8 м²	июль-сентябрь 		
70.	-заделка подвальных продухов	1,8	2 шт.	сентябрь-октябрь		
71.	Ремонт мягких кровель	390,0	1300 м²	июнь-сентябрь		
72.	Ремонт изоляции наружных межпанельных швов	         - 		май-октябрь		
73.	Ремонт шиферных кровель	88,0	90 м. п.	июнь-сентябрь		
74.	Установка пружин на дверях	4,0	20 шт.	август-сентябрь		
75.	Ремонт козырьков балконов и входов в подъезды	27,0	2 шт.	май-август		
	ООО «Управляющая компания»                                              общая стоимость мероприятий  4371,2тыс.руб. (средства предприятия)	
76.	-Ремонт мягких кровель	105,0	420 м²	апрель-сентябрь	ООО «Управляющая компания»	
77.	-Ремонт шиферных кровель	25,3	10 м²	апрель-сентябрь		
78.	-прочистка вентканалов	41,5	160 п. м.	по заявлениям		
79.	-замена трубопроводов отопления	50,8	42 п.м.	аварийно-
восстановительные
работы		
80.	-замена труб горячего водоснабжения	95,9	70 п.м.			
81.	-замена труб холодного водоснабжения	220,0	175 п.м.			
82.	-замена труб канализации	300,0	100 п. м.			
83.	-замена запорной арматуры	166,0	250 шт.	май-октябрь		
84.	-теплоизоляция инженерных сетей в тамбурах и подвалах	26,4	3 м³	май-октябрь 		
85.	-ремонт, изготовление и установка окон и дверных заполнений	445,0	30 шт.	май-октябрь		
86.	-ремонт цоколей и отмосток	176,0	200 м²	май-октябрь		
87.	-ремонт аварийных балконов (по заявлениям)	86,0	6 шт.	май-октябрь		
88.	Благоустройство дворовых территорий (скамейки, песочницы)	42,0	4 шт.	май-сентябрь		
89	Кронирование и удаление переросших деревьев на придомовых территориях	55,2-	12 шт.	весна-осень		
90	Замена подъездных деревянных дверей  на металлические и их тепление 	          -		май-октябрь		
91	Изготовление и установка вторых оконных рам	           -		май-октябрь		
92.	Электроснабжение: в т.ч. ремонт электрощитов	200,0	15 дом.	апрель-октябрь		
    93.	Остекление мест общего пользования (по сезону)	19,8	28 м²	май-октябрь		
94.	Промывка и опрессовка систем отопления жилых домов муниц. жил. фонда	981,6	74 сист.	май-сентябрь		
95.	Прочистка лежаков канализации по подвалам	315,7	500 м³	по заявкам		
96.	Промывка квартирных приборов отопления	2,2	4 шт.	май-сентябрь		
97	Восстановление подъездного отопления жил. фонда	5,8	2 подъезда	май-октябрь		
	 ООО «Наш Дом»                                                                            общая стоимость мероприятий 420,0 тыс. руб (средства предприятия)	
98.	Установка рассечек на вводах отопления, закрытие шаровых кранов в тепловых пунктах МКД		34 шт.	до 15 мая	

ООО «Наш Дом»	
99.	Промывка и опрессовка систем отопления, ГВС и ХВС		18 шт.	согласно графику		
100.	Ревизия запорной арматуры тепловых пунктов и стояков  		72 шт.	май-август		
101.	Ремонт и  замена трубопроводов отопления, ГВС и ХВС, окраска, ремонт теплоизоляции		119 п. м.	май-август		
102.	 Ревизия оборудования тепловых пунктов, проверка и установка КИП 		18 пунктов	июль-август		
103.	Снятие рассечек на вводах систем отопления жилых домов		36 шт.	сентябрь 		
104.	Наладка и регулировка  систем отопления и ГВС 		26 систем	октябрь		
105.	Ремонт входных и тамбурных дверей, установка доводчиков		3 шт.	май-сентябрь		
106.	Ремонт и остекление окон в подъездах 		12 м²	май-сентябрь		
107.	Замена окон в местах общего пользования на ПВХ			май-сентябрь		
108.	Заделка подвальных продухов		4 шт.	сентябрь		
109.	Оштукатуривание вент шахт		35 м²	май-сентябрь		
110.	Ремонт  отмостки вокруг домов		120 м²	май-октябрь		
111.	Ремонт межпанельных швов 		60 п. м.	май-октябрь		
112.	Снятие и поверка приборов учета тепловой энергии		2 шт.	май-октябрь		
113.	Ремонт подъездных козырьков		8 шт.	май-октябрь		
	ООО «Жилищник»                                                                       общая стоимость мероприятий 158 тыс.руб. (средства предприятия)	
	Городской жилищный фонд                                                                                                                                   на сумму 148,0 тыс.руб.	
114.	Ремонт мягкой кровли и устройство будки выхода на кровлю по ул. Мира д.1	47,0		май-июнь	ООО«Жилищник»
ООО «Жилищник»	
115.	Ремонт системы отопления по ул. Мира д. 6	20.0		август		
116.	Утепление чердачного покрытия по ул. Гжатская д. 4	31.0		июнь		
117.	Ремонт кровли и чердачного покрытия, утепление дома №3 по ул. Заводская	50,0		июнь		
	Районный жилищный фонд                                                                                                                                         на сумму 10.0 тыс.руб.	
118.	Утепление инженерных сетей в доме по ул. Новая д.16 дер. Поличня	10,0		июль	ООО «Жилищник»	
	ООО «Кармановское ЖЭУ» общая стоимость мероприятий общая стоимость  мероприятий 300.0 тыс.руб.(средства предприятия)	
119.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры в подвалах жилых домов			июнь-август	ООО «Кармановское ЖЭУ»	
120.	Частичная замена шифера, коньков м-н Западный, д. №5;		12 шт.	июль-август		
121.	Частичная замена шифера и ремонт коньков м-н Западный, д. №2,3;			июнь-сентябрь		
122.	Косметический ремонт  м-н Западный, д. №2		4 шт.	май-июнь		
123.	Ремонт балконных козырьков м-н Западный, д. №2		8 шт.	май-июль		
124.	Установка стекол на лестничных площадках м-н Западный, д. № 1,2,3,4,5		7  шт.	июнь-сентябрь		
125.	Замена электропроводки в подвальном помещении, замена датчиков движения и светильников на лестничных площадках м-н Западный, д. №3,5		53 шт.	май-сентябрь		
126.	Замена входных подъездных  дверей м-н Западный, д. №1,2,5		6 шт.	июль-октябрь		
127.	Заделка швов м-н Западный, д. №2,3		714 м/п	июль-сентябрь		
128.	Частичный ремонт труб ХВС в подвале м-н Западный, д. №1,2,3,5			по мере необходимости		
129.	Замена наружной канализационной трубы		12 м/п	апрель-май		
	III. ТЕПЛОЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	
	ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»                            общая стоимость мероприятий 15561,062 тыс .руб.(средства предприятия)	
Районная котельная                                                                                                                               на сумму 9896,36 тыс.руб.	
   130.	Текущий ремонт и обслуживание теплотехнического оборудования,  КИП и А  котельной и ЦТП		20 шт.	март-сентябрь 	Гагаринский РТС 
	
131.	Ремонт арматуры на котельной		549 шт.	май		
132.	Ремонт и замена насосных агрегатов		6 шт. 	май		
133.	Гидравлическое испытание тепловых сетей 		27,02 км 	май		
134.	Ремонт насосных агрегатов на ЦТП №1-9		18 шт.	май, июль		
135.	Ремонт арматуры на котельной		549 шт.	май		
136.	Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов:
- ЦТП-3: от ТК-9 до ж.д. №11 Ленингр.наб.-ППУ ПЭ(д.159-58м, д.89-29м, д. 57-29м), от ТК-1 до ж.д. №3 ул.Матросова-ППУ ПЭ(д.159-136м,д.89-68м,д.57-68м)
- ЦТП-6: от ТК-4 до ТК-5-ППУ ПЭ (д.133-150м, д.76-75м, д.57-75м)
- ЦТП-3: от ТК-3 до ТК-9- ППУ ПЭ(д. 159-80м,д.89-40м,д.57-40м)
- Магистраль от ТК-14 до ТК-17-ППУ ПЭ-д.219
- ЦТП-1:от ТК-2 до ТК-3 ул.Строителей-ППУ ПЭ(д.133-100м,д.76-50м,д.57-50м)		1318 м	май,
 июль, 
июль,
июнь,
июнь,
август		
137.	Реконструкция ГРУ)		1 шт.	май		
138.	Ремонт электрооборудования ЦТП №1-9		5 шт.	июнь-август		
139.	Ремонт котлов (трубная часть, обмуровка)		3 шт.	июль		
140.	Установка узла учета тепловой энергии ЦТП-1, ЦТП-8, ЦТП-5		3 шт.	август		
141.	Благоустройство территории  после земляных работ		510 м²	август, сентябрь		
142.	Ремонт тепловой изоляции  трубопроводов ТС и ГВС:
- ЦТП-9 от ЦТП до ТК-2-скорлупа
- Магистраль от П-3 до ЦТП-9-скорлупа
- Магистраль СК-ЦТП-6-скорлупы
- Магистраль П-2-П-3-скорлупы		394 м	октябрь,
октябрь,
ноябрь,
ноябрь		
	 Котельная БМК-1 (ул. Бахтина)                                                                                                                    на сумму 880,086 тыс. руб.	
143.	Техническое обслуживание и текущий  ремонт теплотехнического оборудования, КИП и А котельной		7 шт.	апрель 	Гагаринский РТС	
144.	Ремонт арматуры ТС		368 шт.	июнь		
145.	Ремонт тепловых камер ТС              		2 шт.	июль		
146.	Благоустройство территории после земляных работ (ул. Строителей, ул. Бахтина, ул. 50 лет ВЛКСМ)		50 м²	август		
147.	Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов		244 м	июль, август		
148.	Ремонт насосных агрегатов на ЦТП-13		4 шт.	май		
149.	Гидравлическое испытание ТС		5,9 км	май		
	Котельная БМК-2 (ул. Заводская)                                                                                                                        на сумму 1622,76 тыс. руб.	
150.	Ремонт оборудования ЦТП №314,15           		1 шт.	июль	

. Гагаринский. РТС 	
151.	Ремонт и замена арматуры ТС, на котельной, на ЦТП  		196 шт.	май, июль		
152.	Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов		500 м	май		
153.	Благоустройство территории после выполнения земляных работ 		30 м²	сентябрь		
154.	Ремонт водоподогревателей		1 шт.	апрель		
155.	Гидравлическое испытание ТС		1,84 км	май		
156.	Замена насосных агрегатов на ЦТП-14		1 шт.	июль		
	Котельная БМК  - 3  (м/н «Лесной»)                                                                                                                      на сумму 247,038 тыс.руб.	
157.	Гидравлическое испытание ТС		1,81 км	май	 Гагарин. РТС	
158.	Ремонт и замена арматуры ТС и котельной		74 шт.	май-июнь		
159.	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС		173 м	сентябрь-ноябрь		
160.	Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов		84 м	июль, август		
161.	Ремонт  насосных агрегатов		1 шт.	июнь		
162.	Текущий ремонт оборудования котельной		1 шт.	июль		
	Котельная БМК  по ул. Пушная                                                                                                                                    на сумму 67,31 тыс.руб.	
163.	Гидравлическое испытание ТС		0,443 км	май	 Гагарин. РТС	
164.	Ремонт и замена арматуры ТС		66 шт.	май, июль		
165.	Замена и ремонт насосных агрегатов		4 шт.	май-июль		
166.	Ремонт оборудования котлов		20 шт.	июнь		
	Котельная с. Карманово                                                                                                                                        на сумму 1402,868 тыс.руб.	
167.	Гидравлическое испытание ТС		9,82 км	май	Нач. Гагарин. РТС 

. Гагарин. РТС
	
168.	Ремонт и техническое обслуживание оборудования котельной		72 шт.	апрель-сентябрь		
169.	Ремонт и замена арматура ТС (на котельной)		708 шт.	май		
170.	Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов на ЦТП-30		208 м.	май		
171.	Ремонт и техническое обслуживание оборудования ЦТП		2 шт	июль-август		
172.	Ремонт котлов		2 шт.	май		
173.	Текущий ремонт ТС		66 м	июль		
174.	Ремонт тепловых камер ТС		2 шт	июнь		
175.	Ремонт насосных агрегатов на ЦТП-30,31		2 шт.	май		
176.	Ремонт оборудования ХВО		1 шт. 	июль		
177.	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС (изоляция внутренних трубопроводов ЦТП-31 и магистраль ПР2-ЦТП-31-урса, стеклопластик)		27 м² и 10 м	август и сентябрь 		
178.	Благоустройство территории после выполнения земляных работ		150 м²	сентябрь		
179.	Ремонт оборудования ЦТП-30,31		2 шт.	июнь		
180.	Ремонт электрооборудования ЦТП		1 шт.	июль		
181.	Ремонт насосных агрегатов		10 шт.	июль		
182.	Ремонт КИПиА на ЦТП-30		1 шт.	июль		
183.	Ремонт газового оборудования		1 шт.	июль		
	Сети от котельной ООО «Факел»                                                                                                                             на сумму 2444,64 тыс.руб.	
184.	Гидравлическое испытание ТС		14,9 км	май	 Гагарин. РТС 	
185.	Ремонт и замена насосных агрегатов на ЦТП-11,12,17,18		12 шт.	май		
186.	Ремонт и замена арматуры ТС и ЦТП-11,12,17,18		725 шт.	май, июль		
187.	Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов ЦТП-11		344 м	май		
188.	Ремонт тепловых камер ТС		2 шт.	июль		
189.	Ремонт КИПиА на ЦТП-12		1 шт.	июль		
190.	Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с. до 1 м, заваривание повреждений и т.д.)		60 м	июнь		
191.	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС		270 м	июль		
192.	Благоустройство территории после земляных работ		200 м²	август		
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  администрация муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области                                                           общая стоимость мероприятий 1250,0 тыс. руб (бюджет Гагаринского городского поселения)	
193.	Замена ветхих тепловых сетей протяженностью 44м БМК 8 (ЦТП- 12) от здания ЦТП до ТК-3 в       г. Гагарине Смоленской области	500,0				
194.	Замена ветхих тепловых сетей 64 м ЦТП – 18 котельной ООО «Факел» от ТК-1 до ТК-4	500,0				
195.	Изоляция бесхозяйных тепловых сетей	250,0				
	Котельная ООО «Факел»                                                            общая стоимость мероприятий 2805,0 тыс. руб (средства предприятия)	
	Водогрейная котельная                                                                                                                                             на сумму1500,0 тыс.руб.	
196.	Текущий ремонт котла ПТВМ-30М №1 (ремонт горелочных устройств, ревизия запорной арматуры)		6 горелок
10 з/о	июнь	ООО «Факел»

ООО «Факел»	
197.	Текущий ремонт котла ПТВМ-30М № 2 (ремонт горелочных устройств, ревизия запорной арматуры)		6 горелок
10 з/о	июнь		
198.	Текущий ремонт сетевых насосов (Д-630/90 №2,Д-630/90 №3)  		2 шт.	август, апрель		
199.	Текущий ремонт  ХВО  (ревизия запорной арматуры, досыпка смолы КУ-2-8)		22 з/о
500 кг смолы	май		
200.	Промывка емкости деаэратора ДСА-15/50		1 шт.	июнь		
201.	Текущий ремонт подпиточных насосов К-20/30 №1,К-45/50 №2, К-45/50 №3, насосов рециркуляции НКУ-250/50 №1, НКУ 90/50 №2, насосов сырой воды КМ-50/50 №1, КМ-80/125 №2		7 шт.	июнь- октябрь, 		
202.	Ревизия электроводонагревателей насосного оборудования		13 шт.	апрель-сентябрь		
203.	Опрессовка и гидропневматическая промывка внутренних трубопроводов теплосети (ревизия запорной арматуры, очистка грязевиков)		270 м. п.
26 з/о.	июль		
204..	Покраска оборудования и трубопроводов		100 м²	май-октябрь		
205.	Ревизия запорной арматуры		34 з/о	май		
206 .	Промывка щелевого деаэратора соляной кислотой		1 шт./30 кг	июнь		
207.	Промывка резервных баков сырой воды		2 шт.	июнь		
208.	Проверка и настройка  манометров, приборов КИПиА		122 шт.	апрель-май		
209.	Ревизия освещения в котельной		100 светил.	июль-август		
210.	Проверка и настройка  манометров, приборов КИПиА		122 шт.	апрель-май		
211.	Ревизия автоматических выключателей, контакторов, пускателей в электрощитовой		40 шт.	июнь-июль		
212.	Ревизия электромоторов для сетевых, подпиточных  и рециркуляционных насосов		7 шт.	апрель-май		
213.	Ревизия шкафов управления для котлов ПТВМ №1 и ПТВМ №2		2 шт.	апрель-май		
	Паровая котельная на сумму                                                                                                              600,0 тыс.руб.		
214.	Ремонт запорной арматуры насосного оборудования		20 шт.	апрель-сентябрь		
215.	Текущий ремонт котла ДЕ 16/14 ГМ и вспомогательного оборудования		1 шт.	март 		
216.	Текущий ремонт парового котла ДКВР 6,5/13 №3 и вспомогательного оборудования		1 шт.	февраль		
217.	Текущий ремонт питательных насосов ЦНСГ 38/220 №1, ЦНСГ 13/175 №2, ЦНСГ 13/245 №3, насосов сырой воды К-45/50 №1, К-45/50 №2, парового насоса ПДВ-25/20 №1, ПДВ-25/20 №2		6 шт.	февраль-ноябрь, 		
218.	Ревизия освещения в паровой котельной 		50 светил.	апрель-август		
219.	Промывка емкости деаэратора ДСА-25/50		1 шт.	май		
220.	Ремонт запорной арматуры ХВО		34 ед.	июнь		
221.	Покраска запорной арматуры, оборудования и трубопроводов		99 м²	май-июль		
222.	Проверка и настройка манометров, приборов КИПиА		68 шт.	июнь		
223.	Ревизия электродвигателей питательных насосов, вентиляторов, дымососов		10 шт.	апрель-август		
224.	Ревизия шкафов управления котлов ДЕ и ДКВР		2 шт.	апрель-май		
225.	Ревизия автоматических выключателей, контакторов, пускателей		30 шт.	апрель-август		
	ГРУ                                                                                                                                                                               на сумму 300 тыс.руб.	
226.	Текущий ремонт оборудования ГРУ, внутренних газопроводов		42 ед.	май	ООО «Факел»	
227.	Покраска оборудования ГРУ и внутренних газопроводов		40 м²	апрель-сентябрь		
	Солевое хозяйство                                                                                                                                                           на сумму 405 тыс.руб.	
228.	Ремонт солевых насосов Х-18/20 №1,2,3,4,5		5 шт.	март - август, 	ООО «Факел»	
229.	Чистка бункера мокрого хранения и  сухого хранения соли		2 шт.	май		
230.	Ревизия запорной арматуры насосного оборудования		18 ед.	март-ноябрь 		
231.	Покраска оборудования и трубопроводов солевого хозяйства		28 м²	май-август		
232.	Промывка баков раствора соль V-16 м³		2 шт.	май		
	ООО «Маяк»                                                                                общая стоимость мероприятий 245,1 тыс.руб.(средства предприятия)	
		Котельная МКД ул. Комсомольская, д. 9                                                                                                            на сумму 17,0 тыс. руб.	
233	Промывка котлов «THERM-TRIO 90T»	2,0	2 шт.	июнь	ООО «Маяк»	
234.	Поверка контрольно-измерительных приборов	7,5	19 шт.	сентябрь		
235.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	6,0	12 шт.	июнь		
236.	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 	1,5	3 шт.	сентябрь		
	котельная ФОК «Восток» г. Гагарин                                                                                                                        на сумму 85,5 тыс.руб.	
237.	Промывка котлов КЧМ-5	9,0	4 шт.	июль	ООО «Маяк»	
238.	Промывка бойлера горячего водоснабжения	2,0	1 шт.	июль		
239.	Поверка контрольно-измерительных приборов	15.0	38 шт.	сентябрь		
240.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	18,0	36 шт.	июль		
241.	Замена циркуляционного насоса горячего водоснабжения ЦНЛ 15/80-0,25/2	40,0	1 шт.	июль		
242.	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 	1.5	        6 шт.	июль		
	котельная школы в д. Родоманово                                                                                                                              на сумму 26,3 тыс. руб.	
243.	Промывка котлов КЧМ-7	9,0	4 шт.	июнь	ООО «Маяк»	
244.	Поверка контрольно-измерительных приборов	6,8	17 шт.	сентябрь		
245.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	3,0	12 шт.	июнь		
246.	Ревизия и текущий ремонт системы автоматики котельной	6,0	1 шт.	июль		
247.	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 	1,5	5 шт.	август		
	котельная школы, детсада в д. Пречистое                                                                                                                на сумму 64,8 тыс. руб.	
248.	Промывка котлов КЧМ-5	9,0	4 шт.	июль	ООО «Маяк»

    ООО «Маяк»	
249.	Текущий ремонт  котлов КЧМ-5 №1,2	35,0	2 шт.	июнь		
250.	Поверка контрольно-измерительных приборов	8,8	22 шт.	сентябрь		
251.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	4,5	17 шт.	июнь		
252.	Ревизия и текущий ремонт системы автоматики котельной	6,0	1 шт.	август		
253.	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов	1,5	5 шт.	август		
	котельная в д. Поличня, ул. Новая                                                                                                                                на сумму 51,5 тыс.руб.	
254.	Промывка котлов КТГ-0,16	4,0	2 шт.	июнь	ООО «Маяк»	
255.	Промывка и очистка пластинчатых теплообменников сетевой воды	4,0	2 шт.	июнь		
256.	Поверка контрольно-измерительных приборов	10,5	26 шт.	сентябрь		
257.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	8,5	21 шт.	июнь		
258.	Ревизия и текущий ремонт системы автоматики котельной	3,0	       1 шт.	июль		
259.	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 	1,5	      5 шт.	август		
260.	Техническое обслуживание и наладка системы автоматики	20,0	1 шт.	сентябрь-октябрь		
	МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства»                        общая стоимость мероприятий 600,6 тыс.руб.                                                                                                              (средства предприятия)	
	Блочно модульная котельная МСОШ д. Акатово                                                                                                            на сумму 125,1 тыс.руб.	
261.	Поверка контрольно-измерительных приборов	6,0	34 шт.	май-август	

МУП «УЖКХиС»	
262.	Замена горелочного устройства на котле №1	60,0		май-сентябрь		
263.	Протоколы эл. измерений	11,0		март		
264.	Проверка резервных источников питания	-		май		
265.	Обучение  персонала (операторы, слесаря)	3.0		сентябрь		
266.	Укладка резиновых ковриков на полы	8,0		май		
267.	Текущий ремонт (промывка теплообменника с разборкой котлов, замена запорной арматуры, окраска трубопроводов, дверей, стен)	37,1		май-сентябрь		
	Блочно модульная котельная МСОШ д. Никольское                                                                                                            на сумму 82,4 тыс.руб.	
268.	Поверка контрольно-измерительных приборов	5,5	23 шт.	май-август	МУП «УЖКХиС»
	
269.	Текущий ремонт (промывка теплообменника с разборкой котлов, продувка горелок, замена запорной арматуры, окраска трубопроводов, дверей, стен)	61,4	3 котла	июль-август		
270.	Замена светильников  	11,0	1 шт.	май		
271.	Обучение  персонала (операторы, слесари)	3,0		сентябрь		
	Мероприятия, требующие дополнительных средств, не  предусмотренных в бюджете в 2019г., на сумму 200.0 тыс.руб.(средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области)	
272.	Замена 1 котла THERM TRIO-90 в БМК Никольской МСОШ	200,0	1 котел	май-сентябрь		
	Блочно модульная котельная МСОШ д. Токарёво                                                                                                               на сумму 63.8 тыс.руб.	
273.	Поверка контрольно-измерительных приборов	6,5	38 шт.	май-июнь	
МУП «УЖКХиС»
	
274.	Текущий ремонт (промывка теплообменника с разборкой котлов, продувка горелок, замена запорной арматуры, окраска трубопроводов, дверей, стен)	34,8	4 котла	июль-август		
275.	Установка резиновых ковриков на полы	8.0		май		
276.	Протоколы эл.измерений	11,0		май		
277.	Обучение  персонала (операторы, слесари)	3,5		сентябрь		
	Газовая котельная СДК д. Клушино                                                                                                                             на сумму 76,9 тыс.руб.	
278.	Поверка контрольно-измерительных приборов и газового измерительного комплекса	25,0	21 шт	июль-август	

МУП «УЖКХиС»
	
279.	Текущий ремонт (промывка теплообменника с разборкой котлов, продувка горелок, замена запорной арматуры, окраска трубопроводов, дверей, стен)	41.4	2 котла	июль-август		
280.	Протоколы эл. измерений	9,0		сентябрь		
281.	Проверка резервных источников питания			май		
282.	Обучение  персонала (операторы, слесари)	1,5		сентябрь		
	Газовая котельная базы АБК  г. Гагарин, проезд Первомайский, д. 1а                                                                         на сумму 52.4 тыс.руб.	
283.	Поверка контрольно-измерительных приборов	4,5		июль-август	

МУП «УЖКХиС»

284.	Текущий ремонт (промывка теплообменника с разборкой котлов, продувка горелок, замена запорной арматуры, окраска трубопроводов, дверей, стен)	34,9	2 котла	июль-август		
285.	Протоколы эл. измерений	11,0		сентябрь		
286.	Проверка резервных источников питания	-		май		
287.	Обучение  персонала (операторы, слесаря)	2.0		сентябрь		
	IV. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	
	Гагаринский РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» общая стоимость мероприятий 755,96 тыс.руб.(средства предприятия)	
288.	Замена мягкой кровли и дверей на ЗТП-4 Токарево	209,31		до 1 сентября	
Гагаринский РЭС	
289.	Замена мягкой кровли и дверей на ЗТП-2 КРС Родоманово	91,52		до 1 сентября		
290.	Замена мягкой кровли и дверей на ЗТП-1 КРС Родоманово	102,94		    до 15 сентября		
291.	Замена дверей на ТП 003	164,27		до 15 сентября		
292.	Замена мягкой кровли на ЗТП-1 КРС Черногубцево	95,24		до 15 сентября		
293.	Замена мягкой кровли на ТП 039	92,68		до 15 сентября		
	V. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ.	
	МУП «ПЖРТ»                                                                           общая стоимость мероприятий 307,704 тыс.руб.(средства предприятия)	
294.	Замеры контуров заземления, сопротивления изоляции э/сетей, испытание энергетического оборудования	30,0		до 01 июня	МУП ПЖРТ	
295.	Промывка и гидравлическое испытание на прочность и плотность системы отопления ,ГВС, бойлерной установки	3,0		до 01 сентября		
296.	Ревизия запорной арматуры и частичная ее замена	2,0		до 01 сентября		
297.	Ремонт изоляции трубопроводов	0,64		до 01 сентября		
298.	Ремонт и замена ветхих трубопроводов отопления	1,31		до 01 сентября		
299.	Опрессовка котла «Китурами»	0,95		до 10 июня		
300.	Ремонт мягкой кровли	4,2		до 01 сентября		
301.	Ремонт системы очистки холодной воды через фильтры бассейнов	2,7		до 01 июня		
302.	Ремонт отмостки и цоколя здания	0,75		до 01 октября		
303.	Утепление тамбуров помещений	0,45		до 01 сентября		
304.	Ремонт душевых помещений с реконструкцией системы душевых установок	27,0		до 01 сентября		
305.	Ремонт парильной печи в мужском отделении	1,08		до 01 сентября		
306.	 Помывка и опрессовка бойлерной установки	0,85		до 01 ноября		
307.	Заготовка дров для топки парильных печей	183,75		до 01 ноября 2019		
	МБУ «Благоустройство Гагарин»    общая стоимость мероприятий  5959,0 т.руб. (средства бюджета Гагаринского городского поселения)	
308.	Подготовка спецтехники	960,0	24 ед.	май-октябрь	МБУ «Благоустройство Гагарин»	
309.	Ямочный ремонт  улично-дорожной сети	1999,0	10,6 км.	май-октябрь		
310.	Заготовка песко-соляной смеси	2000,0	12350 тонн	май-октябрь		
311.	Прочистка колодцев ливневой канализации дорожной сети улиц г. Гагарин	1000,0	33 ед.	2-3 квартал		
	VI. ОБЪЕКТЫ  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЫ	
	 Комитет по образованию                   общая стоимость мероприятий 16 970.0 тыс.руб. (средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области)	
312.	Техническое  освидетельствование отопительных котлов, наладка котлов и оборудования, поверка приборов КИПиА котельных МБОУ «Ашковская основная школа», «Серго-Ивановская основная школа» «Колокольнинская основная школа»	0,00	9 котлов	май- август

руководители
образовательных
организаций	
313.	Заготовка и организация хранения топлива для:
МБОУ «Ашковская основная школа»,
 
«Серго-Ивановская основная школа»
	252,0

17,33
609,84
25,05	
Уголь-50 т.
Дрова-10 м³
Уголь 121тн
дрова 15м3	апрель-август		
314.	Проведение работ по испытанию на прочность и плотность, промывке трубопроводов систем отопления	406,9	27 объектов	май-август		
315.	Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом, поверка пожарных кранов и лестниц	1232,0	18 объектов	В соответствии с графиком		
316.	Проведение замеров сопротивления изоляции	1132,0	28 объектов	В соответствии с графиком		
317.	Ремонт кровли МБДОУ «Детский сад «Звездочка» с покрытием парапетов оцинкованной сталью и восстановлением вентиляционных шахт	1788,946	1174 м²;
	май-июнь	
Заведующий МБДОУ	
318.	Ремонт кровли МБДОУ «Детский сад «Снежинка»с устройством выравнивающей стяжки и плоской однослойной кровли, примыканий кровли, козырьков из ПВХ мембран	2129,633	1450 м²	июнь-июль	Заведующий МБДОУ	
319.	Ремонт кровли МБДОУ «Детский сад им. Ю. А. Гагарина»:
- Устройство выравнивающей стяжки и плоской однослойной кровли, примыканий кровли, козырьков из ПВХ мембран;	2135,518	1400 м²	июнь-июль	Заведующий МБДОУ	
320.	Ремонт кровли МБОУ «Токарёвская средняя школа»:
- Устройство выравнивающей стяжки и плоской однослойной кровли, примыканий кровли, козырьков из ПВХ мембран;	1840,678	1548 м²	июнь-август	Директор ОУ	
321.	Ремонт кровли МБОУ «Ашковская основная школа»:	4100,0	3200 м²	июнь-август	Директор ОУ	
322.	Ремонт системы отопления, вентиляции, канализации, текущий ремонт стен и потолка  раздевалок в  спортивном зале МБОУ «Пречистенская средняя школа»	1300,0	337 м²	июнь-июль
	Директор ОУ
	
	мероприятия, требующие дополнительных средств, не  предусмотренных в бюджете в 2019г.,                           на сумму 529,018 тыс.руб	
323.	Поверка теплового счетчика МБОУ СШ № 4 	52.0	1 шт.	июнь-август		
324.	Замена прибора тепловой энергии МКОУ «Открытая школа»	150.0	1шт.	июнь-август		
325.	Ремонт теплового узла МБОУ «Никольская СШ»	94,059	1 шт.	июнь-август		
326.	Ремонт ВРУ и щитов освещения МБДОУ «Детский сад «Солнышко»	232,959	1 шт.	июнь-август		
		
	Отдел по культуре    общая стоимость мероприятий 5699,3 т.руб. (средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области)	
327.	Опрессовка системы отопления:
- МБУК МКДЦ «Комсомолец»;	22,0	
451 м. (2 об.)	
июнь		
328.	- МБУК Кармановский КДЦ;	5,0	130 м.	июнь		
329.	- МБУК «Гагаринская МЦБС»; 	11,0	90 м.	июль		
330.	- МБУДО «Гагаринская ДМШ имени И. Д. Кобзона»	12,5	158 м.	август		
331.	Приобретение твердого топлива для сельских учреждений культуры:
- МБУК МКДЦ «Комсомолец» (дрова);	195,5	
115 м³	апрель-октябрь		
332.	- МБУК «Гагаринская МЦБС» (дрова)	76,5	45 м³			
333.	Огнезащитная обработка МБУК МКДЦ «Комсомолец», МБУК «Гагаринская МЦБС»	45,0	3 филиала	апрель		
334.	Контроль качества огнезащитной обработки:
- МБУК Кармановский КДЦ;	2,8	1 объект	июнь-декабрь		
335.	- МБУДО «Гагаринская ДМШ им.И.Д. Кобзона»	5,0	2 объекта	июнь-декабрь		
336.	Замеры сопротивления электропроводки:
- МБУК МКДЦ «Комсомолец»;	141,3	
8 филиалов	
июнь-август		
337.	- МБУК Кармановский КДЦ;	23.0	1 об.	июнь-август		
338.	- МБУК «Гагаринская МЦБС»;	44.1	9 филиалов	июнь-август		
339.	- МБУДО «Гагаринская ДМШ им.И.Д. Кобзона»;	12.5	1 об.	июнь-август		
340.	- МБУДО «Гагаринская ДХШ»	10.0	1 об.	июнь-август		
341.	Ремонт кровли Родомановского СДК	250.0		апрель-май		
342.	Замена оконных блоков Никольской библиотеки	150,0	7 шт.	апрель		
343.	Электромонтажные работы в Никольском СДК - филиале МБУК МКДЦ «Комсомолец»	630.0		апрель-июль		
344.	Ремонтные работы в МБУДО «Гагаринская ДМШ имени И. Д. Кобзона» 
- гидроизоляция подвала, ремонт и устройство отмостки, установка навеса над входом в подвал 
- ремонт подвальных помещений
- ремонт полов в раздевалке	1518,09		июнь-август		
345.	Ремонт кровли в МБУК «Гагаринская МЦБС», ремонт электропроводки и внутренних помещений	2545.0		июнь-август		
346.	мероприятия, требующие дополнительных средств, не  предусмотренных в бюджете в 2019г., на сумму 215,9 тыс.руб	
347.	Замеры сопротивления электропроводки МБУК «Гагаринская МЦБС»	15,9		2 квартал		
348.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций МБУК МКДЦ «Комсомолец»	200,0	6106м2(10 филиалов)	2 квартал		
	Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи  общая стоимость мероприятий 6381,175 тыс.руб.(в т.ч. средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 4044,585 тыс. руб, областного бюджета 2310,17собственные средства учреждения 26,42 тыс. руб )	
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию» на сумму1546,50 тыс.руб.(в т.ч. средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 1542 тыс. руб, средства учреждения 4,5 тыс. руб )	
349.	Ревизия циркуляционных  насосов, запорной  арматуры	-		август	

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи
плавательный бассейн	
350.	Ревизия аппарата подготовки гипохлорита (система дезинфекции воды)	-		август		
351.	Опрессовка тепловых сетей	1,5		июнь		
352.	Замена фильтрующего материала в емкости на спортивную  ванну	-		август		
353.	Ревизия бойлеров (тепловой узел)	-		май		
354.	Ремонт в женской и мужской раздевалках и душевых: замена плиток пола, стен, сантехники, ламп освещения, вентиляции, покраска  	1500,0		август		
355.	Ремонт в спортивном зале: замена кабеля, ламп, побелка.	15,0		сентябрь		
356.	Замена окон в кабинете ЛФК	30,0		октябрь		
357.	Ремонт вытяжной вентиляции на крыше, парапетов, шахт воздуховодов, будки выхода на крышу	-		август		
358.	Ремонт крыльца центрального входа	-		август		
359.	Замена металлической трубы на пластиковую на вводе холодной воды	-		июль		
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1» на сумму  2324,7 тыс.руб.	
360.	Ремонт зала тяжелой атлетики	2283.2		май-июль	

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи
Гагаринская спортивная школа	
361.	Промывка и испытание на прочность и плотность систем отопления и горячего водоснабжения	30,0		июнь		
362.	Осмотр и проверка канализационных сетей	-		июль		
363.	Осмотр и проверка электропроводки	-		июль		
364.	Осмотр и проверка водопроводных сетей	-		август		
365.	Осмотр и проверка утепления помещений	-		август		
366.	Замена разбитых стекол окон	4,0		август		
367.	Локальный ремонт кровель в местах вероятных протечек	2.0		сентябрь		
368.	Замена неисправных рубильников, предохранителей, изоляторов и контактных оснований	3,0		сентябрь		
369.	Обеспечение объекта инструментом для зимней уборки территорий 	2,5		октябрь		
	Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Восток» на сумму 2509,975 тыс.руб.(в т.ч.21,92 тыс.руб.- собственные средства.;177,884 тыс.руб.- бюджет МО «Гагаринский район»; 2310,17 тыс.руб. – областной бюджет )	
	Водоснабжение и водоотведение:	
370.	Очистка уличной канализации (дренажей)	-	600 м.	май	

МБУ «ФОК «Восток»	
371.	Прочистка внутренней канализации	-	160 м.	июнь		
372.	Проверка запорной арматуры (замена кранов, задвижек)	2,5	1 шт.	май		
    373.	Промывка фильтров на трубопроводах ХВС и ГВС	-	2 шт.			
    374.	Ревизия внутренних сетей водопровода и канализации	-		июнь		
375.	Проверка на водоотдачу наружных и внутренних пожарных гидрантов	4,0	3 шт.	июнь		
	Электроснабжение:	
376.	Замена ламп внутреннего освещения вспомогательных помещений на светодиодные	17,32	20 шт.	март-май	МБУ «ФОК «Восток»	
377.	Проверка работы автоматики включения дренажных насосов	-	1шт.	июль		
378.	Замена неисправных фонарей уличного освещения	0,6	1 шт.	июль		
	Теплоснабжение:	
    379.	Ремонт, регулировка узла учета тепла, тепловых систем в помещениях, промывка и испытание системы отопления			август	ООО «Маяк»	
    380.	Ревизия циркуляционных насосов			июль		
    381.	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов системы отопления и ГВС (осмотр, проверка технического состояния, подтяжка болтовых креплений, очистка, устранение мелких дефектов, подкраска, восстановление теплоизоляции)			июль		
	Ремонт кровли:	
 382.	Ремонт кровли МБУ «ФОК «Восток» и пристройки к нему	22485,555, в т.ч.
2310,171 ОБ
173,884МБ
1,5  - собств.ср-ва	1190 м²	май-август	подрядная организация по конкурсу	
						
	Итого общая стоимость мероприятий 	142 815,541 				
	в т.ч средства  бюджета Гагаринского городского поселения	13 142,6				
	в т.ч.средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	26 713,885				
	в т.ч. средства бюджета Смоленской области	60 374,07				
	в т.ч. собственные средства предприятий и организаций	42 584,986				

Отпечатано  в  1  экземпляре  в дело.
Исполнитель:
_____________ Ю. В. Крутова
3-60-01
«____» мая 2019 г.

	Разослать:
 со всеми  приложениями - 3экз
 прокуратура, Управление С и ЖКХ, финансовое управление;
разместить с приложениями:
 на сайте Администрации,
разослать с приложением № 1 - 15 экз.:  
отдел ГО, ЧС и ЕДДС, 
Гагаринский РТС 
ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», 
ООО «Факел», МУП «ПЖРТ»,             
МУП «Управление ЖКХ и С»,              
МУП «Горводоканал»,                             
ООО «Стройизоляция», ООО «Наш дом», 
ООО «Гагаринское ЖЭУ»,                        
ООО «Управляющая компания»,                
ООО «Кармановское ЖЭУ»,                   
ООО «Маяк», ООО «Жилищник» Гагаринский РЭС, Гагаринский участок филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт»,
разослать без приложений - 8 экз.:
Комитет по образованию, отдел по культуре, отдел по ФКСиДМ,
 МБУ «ФОК «Восток»,
Гагаринское лесничество,
 сельские поселения - Кармановское, Гагаринское, Никольское 	

Визы:
А. А. Жигалов         ___________________________         _______________________                       

Т. В. Кудрина       ____________________________          _______________________

О. И. Мартыненкова      _______________________         _______________________  

С. М. Епишина               _______________________          _______________________  

М. А. Успенская   ____________________________           ______________________