АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __29.12.2020___№ _1626_

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации
газоснабжения и водоснабжения
пер. Газетный в г. Гагарин
Смоленской области

Во исполнение решения Гагаринского районного суда Смоленской области от 03.12.2019 дело № 2-261/19 по иску Роговой Ирины Александровны, действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетних детей Петрова Егора Викторовича, Петрова Ильи Викторовича, Петрова Марка Викторовича к Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о принятии исчерпывающих мер по организации газоснабжения и водоснабжения к земельному участку с кадастровым номером 67:03:0010123:1162, расположенному в массиве ограниченного ул. Пролетарская, ул. Свердлова,                 пер. Советский и ул. Советская г. Гагарин Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по организации газоснабжения и водоснабжения пер. Газетный в г. Гагарин Смоленской области (Приложения №№ 1, 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.

Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев

Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель
______________Е. Г. Перкусова
(подпись)
3-46-60
« ____ » __________________ 2020 г.

                                  	Разослать:
Прокуратура,
Управление делами,
Управление СиЖКХ - 3,
Сайт, юридический отдел
	
Визы:

А. А. Жигалов                          ______________        «____» _______________ 2020 г.

О. С. Тюрина                            ______________        « ____ » ______________ 2020 г.

А. В. Коноплева                       ______________        « ____ » ______________ 2020 г.

								Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район»
Смоленской области
от __29.12.2020___№ _1626_

ПЛАН
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации
газоснабжения пер. Газетный в г. Гагарин
Смоленской области

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный	
1	Запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации, в ценах 2021 года	15.02.2021	Е. Г. Перкусова	
2	Проведение электронного аукциона на разработку проектно-сметной документации (заключение прямого договора)	31.03.2021	П. А. Базеева	
3	Проектирование (разработка проектно-сметной документации) на линейный объект	31.08.2021	Е. Г. Перкусова	
4	Прохождение экспертизы проектно-сметной документации	31.10.2021	Е. Г. Перкусова	
5	Утверждение проектно-сметной документации	30.11.2021	Е. Г. Перкусова	
6	Проведение электронного аукциона на строительство линейного объекта	31.03.2022	П. А. Базеева	
7	Заключение Договора аренды земельного участка на период строительства линейного объекта	30.04.2022	Д. Ю. Субботин	
8	Получение разрешения на строительство линейного объекта	16.05.2022	А. А. Рытьков	
9	Строительство линейного объекта	30.09.2022	Е. Г. Перкусова	
10	Заключение Департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области	31.10.2022	Е. Г. Перкусова	
11	Акт ввода в эксплуатацию законченного строительства линейного  объекта	14.11.2022	Е. Г. Перкусова	
12	Постановка на кадастровый учет трассы линейного объекта	30.11.2022	Д. Ю. Субботин	
13	Передача линейного объекта на баланс эксплуатирующей организации	31.12.2022	Е. Г. Перкусова	
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 
постановлением
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __29.12.2020___№ _1626_

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации
водоснабжения пер. Газетный в г. Гагарин
Смоленской области

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный	
1	Запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации, в ценах 2021 года	15.02.2021	Е. Г. Перкусова	
2	Проведение электронного аукциона на разработку проектно-сметной документации (заключение прямого договора)	31.03.2021	П. А. Базеева	
3	Проектирование (разработка проектно-сметной документации) на линейный объект	31.08.2021	Е. Г. Перкусова	
4	Прохождение экспертизы проектно-сметной документации	31.10.2021	Е. Г. Перкусова	
5	Утверждение проектно-сметной документации	30.11.2021	Е. Г. Перкусова	
6	Проведение электронного аукциона на строительство линейного объекта	31.03.2022	П. А. Базеева	
7	Заключение Договора аренды земельного участка на период строительства линейного объекта	30.04.2022	Д. Ю. Субботин	
8	Получение разрешения на строительство линейного объекта	16.05.2022	А. А. Рытьков	
9	Строительство линейного объекта	30.09.2022	Е. Г. Перкусова	
10	Заключение Департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области	31.10.2022	Е. Г. Перкусова	
11	Акт ввода в эксплуатацию законченного строительства линейного  объекта	14.11.2022	Е. Г. Перкусова	
12	Постановка на кадастровый учет трассы линейного объекта	30.11.2022	Д. Ю. Субботин	
13	Передача линейного объекта на баланс эксплуатирующей организации	31.12.2022	Е. Г. Перкусова