АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __29.04.2021___№_552_

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

Во исполнение решения Гагаринского районного суда от 12.03.2021                 № 2-66/2021 по иску Пилипчак Светланы Анатольевны, действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетних детей: Пилипчака Юрия Александровича, Пилипчак Марии Александровны, Пилипчака Александра Ананьевича, Пилипчака Алексея Александровича к Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области об организации газоснабжения и водоснабжения, а также водоотведение бытовых сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализацию), вновь образованного земельного участка с кадастровым номером 67:03:0010120:1822, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Мичурина, д. 7, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации газоснабжения, водоснабжения и водоотведения земельного участка с кадастровым номером 67:03:0010120:1822, расположенного по адресу: Смоленская область,                  г. Гагарин, ул. Мичурина, д. 7.  (Приложения №№ 1, 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.

Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области			    Р. В. Журавлев

Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель
______________Е. Г. Перкусова
(подпись)
3-46-60
« ____ » __________________ 2021 г.

                                 	Разослать:
Прокуратура,
Управление делами,
Управление СиЖКХ - 3,
Сайт, юридический отдел
	
Визы:

О. И. Мартыненкова                ______________        «____» _______________ 2021 г.

О. С. Тюрина                            ______________        « ____ » ______________ 2021 г.

М. А. Белова                             ______________        « ____ » ______________ 2021 г.

План мероприятий («дорожная карта») строительства газопровода                                     низкого давления земельного участка расположенного по адресу: 
ул. Мичурина д. 7 г. Гагарин Смоленской области

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный	
1	Запрос в АО «Газпром газораспределение Смоленск» филиал в г. Вязьма о возможности технологического присоединения.	до 16.06.2021	Е. Г. Перкусова	
2	Запрос коммерческих предложений на разработку предпроектной документации, инженерных изысканий и пр.	до 30.06.2021	Е. Г. Перкусова	
3	Получение технических условий на технологическое присоединение	до 16.08.2021	Е. Г. Перкусова	
4	Выполнение предпроектных изысканий (геологические, экологические, гидрометеорологические, геодезические изыскания)	до 27.12.2021	Е. Г. Перкусова	
5	Проведение электронного аукциона на разработку проектно-сметной документации 	до 31.03.2022	Е. Г. Перкусова	
6	Проектирование (разработка проектно-сметной документации) на линейный объект	до 31.07.2022	Е. Г. Перкусова	
7	Согласование проектной документации с АО «Газпром газораспределение Смоленск» филиал в г. Вязьма	до 31.08.2022	Е. Г. Перкусова	
8	Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	до 20.10.2022	Е. Г. Перкусова	
9	Утверждение сметной стоимости проекта	до 30.11.2022	Е. Г. Перкусова	
10	Проведение электронного аукциона на строительство линейного объекта	до 31.03.2023	П. А. Базеева	
11	Заключение договора аренды земельного участка на период строительства линейного объекта	до 28.04.2023	Д. Ю. Субботин	
12	Получение разрешения на строительство линейного объекта	до 31.05.2023	А. А. Рытьков	
13	Строительство линейного объекта	до 31.10.2023	Е. Г. Перкусова	
14	Заключение Департамента  государственного строительного и технического надзора Смоленской области	до 30.11.2023	Е. Г. Перкусова	
15	Постановка на кадастровый учет трассы линейного объекта 	до 25.12.2023	Д. Ю. Субботин	
16	Передача линейного объекта на баланс эксплуатирующей организации	до 23.02.2024	Е. Г. Перкусова	

План мероприятий («дорожная карта») строительства водоснабжения и водоотведения земельного участка расположенного по адресу: 
ул. Мичурина д. 7 г. Гагарин Смоленской области

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный	
1	Запрос в МУП «Горводоканал» о возможности технологического присоединения.	до 16.06.2021	Е. Г. Перкусова	
2	Запрос коммерческих предложений на разработку предпроектной документации, инженерных изысканий и пр.	до 30.06.2021	Е. Г. Перкусова	
3	Получение технических условий на технологическое присоединение	до 16.08.2021	Е. Г. Перкусова	
4	Выполнение предпроектных изысканий (геологические, экологические, гидрометеорологические, геодезические изыскания)	до 27.12.2021	Е. Г. Перкусова	
5	Проведение электронного аукциона на разработку проектно-сметной документации 	до 31.03.2022	Е. Г. Перкусова	
6	Проектирование (разработка проектно-сметной документации) на линейный объект	до 31.07.2022	Е. Г. Перкусова	
7	Согласование проектной документации с    МУП «Горводоканал» 	до 31.08.2022	Е. Г. Перкусова	
8	Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	до 20.10.2022	Е. Г. Перкусова	
9	Утверждение сметной стоимости проекта	до 30.11.2022	Е. Г. Перкусова	
10	Проведение электронного аукциона на строительство линейного объекта	до 31.03.2023	П. А. Базеева	
11	Заключение договора аренды земельного участка на период строительства линейного объекта	до 28.04.2023	Д. Ю. Субботин	
12	Получение разрешения на строительство линейного объекта	до 31.05.2023	А. А. Рытьков	
13	Строительство линейного объекта	до 31.10.2023	Е. Г. Перкусова	
14	Заключение Департамента  государственного строительного и технического надзора Смоленской области	до 30.11.2023	Е. Г. Перкусова	
15	Постановка на кадастровый учет трассы линейного объекта 	до 25.12.2023	Д. Ю. Субботин	
16	Передача линейного объекта на баланс эксплуатирующей организации	до 23.02.2024	Е. Г. Перкусова