АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___23.06.202___ № _804_

О первоочередных мерах, утверждении планов 
организационно - технических  и    неотложных 
мероприятий по подготовке жилищного фонда,
объектов жилищно-коммунального   хозяйства,
электро- и теплоэнергетики, социальной сферы
Гагаринского    района    Смоленской     области 
к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро-  и теплоэнергетики, социальной сферы Гагаринского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов,  руководствуясь Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 распоряжением Администрации Смоленской области от 04.05.2022 № 594-р/адм «О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2022/23 года», в соответствии с Уставом  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать штаб по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергетики, социальной сферы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов (далее - Районный штаб) и утвердить его состав (Приложение № 1).
2. Утвердить общий план первоочередных организационно-технических мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергетики, социальной сферы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области к работе в осенне - зимний период 2022-2023 годов (Приложение № 2).
3. Районному штабу (П. В. Хомайко):
3.1. Утвердить график проведения заседаний Районного штаба.
3.2. Проводить заседания один раз в две недели, по понедельникам. 
3.3. Организовать контроль по восстановлению резервных топливных хозяйств объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Гагаринский район).
4. Комитету по образованию (А. Н. Смирнов), отделу по культуре                (О. В. Брехова), отделу по физической культуре, спорту и делам молодёжи            (В. С. Панков) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – структурные подразделения Администрации) обеспечить:
4.1. Участие своих представителей в заседаниях Районного штаба, на которых будет заслушиваться информация о ходе подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов.
4.2. Контроль подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов.
4.3. Контроль ежемесячных расчётов подведомственными организациями за коммунальные услуги: по отоплению, холодному и горячему водоснабжению,   водоотведению, электроснабжению, газоснабжению;
4.4. Контроль бесперебойной работы систем теплоснабжения подведомственных организаций. 
4.5. Контроль создания необходимого запаса топлива, его своевременной вывозки и сохранности в подведомственных организациях. 
4.6. В срок до 01.07.2022 назначить приказами комиссии по оценке готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.
4.7. В срок до 01.09.2022 провести электротехнические измерения и испытания основного энергетического оборудования объектов с массовым пребыванием людей.
4.8.  В срок до 01.10.2022 обеспечить восстановление резервных источников электроснабжения для электрооборудования котельных I и II категории, отапливающих муниципальные учреждения. 
5. Руководителям теплоснабжающих предприятий 
5.1. В срок до 01.10.2022 обеспечить создание 10-дневного запаса по резервным видам топлива. 
5.2. Заключить договоры с потребителями различных форм собственности на поставку им тепловой энергии, с ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» - на поставку природного газа.
5.3. В срок до 01.10.2022 осуществить необходимый капитальный и текущий ремонт энергетического оборудования, перекладку и ремонт тепловых сетей согласно планам мероприятий по подготовке энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов, ремонт и восстановление резервного топливного хозяйства, обеспечение резервным топливом, предусмотрев мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.
5.4. Обеспечить ежемесячные расчеты с предприятиями-поставщиками за потребленный природный газ, полученные энергетические ресурсы с учетом кассового разрыва, возникающего при платежах населения за тепловую энергию.
          6. Финансовому управлению Администрации (Т. В. Кудрина) обеспечить контроль исполнения своевременных расчетов организациями, финансируемыми из бюджета муниципального района, с поставщиками за потребляемые топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.
7. Управлению по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации (далее – Управление СиЖКХ) (Е. Г. Перкусова):  
7.1. Обеспечить организацию заседаний Районного штаба.
7.2. Организовать сбор, проверку достоверности и обобщение сведений о подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского и сельских поселений к работе в зимних условиях. 
7.3. Для Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству: 
7.3.1. Предоставлять статистическую отчетность о ходе подготовки к отопительному сезону 2022 - 2023 годов и его прохождении по формам:
	- № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», (далее – форма № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7, ежемесячно с 01.06.2022 по 01.11.2023;
	- № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе  жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206 - по состоянию на 01.12.2022;
	- № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206 - ежемесячно с 01.11.2022 по 01.04.2023;
7.3.2. В срок до 01.08.2022  завершить разработку лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2023 год для потребителей, финансируемых из местных бюджетов, и представить на окончательное согласование.
           7.4. Обеспечить контроль  ввода в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства, строительство и реконструкция которых осуществляется за счёт средств бюджетов различных уровней.
          8. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений  Гагаринского района Смоленской области: 
8.1. Создать штабы по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро-  и теплоэнергетики, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов.
8.2. Завершить в срок до 15.09.2022 ремонт систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, конструктивных элементов зданий, утепление жилых домов, производственных и общественных зданий. Оформить в срок до 01.11.2022 паспорта готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов в соответствии с федеральным законодательством и предоставить его в Управление С и ЖКХ Администрации. 
8.3. Обеспечить выделение денежных средств из местных бюджетов на проведение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов, на приобретение необходимых материально-технических ресурсов и создание запаса топлива.
8.4. Обеспечить контроль проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) зданий и объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию указанных зданий и объектов.
8.5. Организовать контроль восстановления резервных топливных хозяйств объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований независимо от форм собственности.
8.6. Выявить бесхозяйные тепловые сети и до начала отопительного сезона 2022 - 2023 годов, но не более чем в течение 30 дней с даты их выявления, определить  теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями и которая до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети будет осуществлять их содержание и обслуживание.
8.7. Разработать и утвердить календарный план-график постановки на государственной кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. 
8.8. Обеспечить создание 45-дневного запаса по основным и 10-дневного запаса  по  резервным  видам  топлива  к  началу  отопительного  сезона              2022 - 2023 годов.
8.9. В срок до последнего числа месяца отчетного периода  обеспечить предоставление в Управление СиЖКХ Администрации формы № 1-ЖКХ (зима).
8.10. Заключить договоры с обслуживающими организациями на зимнее содержание улично-дорожной сети и сооружений на них в населенных пунктах.
9. В срок до 15.09.2022 предприятиям и организациям всех форм собственности, их обособленным подразделениям, имеющим на своем балансе жилые дома и объекты коммунальной инфраструктуры, теплоэнергетического хозяйства, расположенным на территории Гагаринского  городского поселения и Гагаринского района:
- обеспечить выполнение ремонтных работ на системах электро-, тепло,- водо, – газоснабжения и водоотведения с применением энергосберегающих технологий, уделить особое внимание готовности тепловых сетей и котельных;
- подготовить жилые, общественные и производственные здания к эксплуатации в осенне-зимний период, обеспечить создание в них теплового контура.
10. Руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории Гагаринского городского поселения и Гагаринского района, занятых выполнением предзимних работ, начиная с 01.06.2022 года ежемесячно, до второго числа, следующего за отчетным месяцем представлять в Управление СиЖКХ Администрации оперативный отчет о подготовке к работе в зимних условиях № 1- ЖКХ (зима) по форме, утвержденной Постановлением Федеральной службы  государственной статистики (Росстата) от 27.02.2006 № 7. 
11. В срок до 15.09.2022 управляющим и обслуживающим жилищным  организациям обеспечить готовность жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов и принять все меры по сокращению задолженности  населения за жилищно-коммунальные услуги.
12. В срок до 01.10.2022:
12.1. Всем организациям, находящимся на территории Гагаринского городского поселения и Гагаринского  района, участвующим в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от организационно-правовой формы и вида собственности, на основании актов проверки готовности к работе в осенне-зимний период, получить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов в по ранее согласованным формам и предоставить их в Управление СиЖКХ Администрации.
12.2. Организациям, эксплуатирующим автомобильные дороги и сооружения на них, обеспечить выполнение ремонтно-восстановительных работ, создание нормативного запаса песко - соляной смеси и подготовку техники для содержания объектов в зимних условиях.
13. Гагаринскому лесничеству - филиалу ОГКУ «Смоленское управление лесничествами» (Н. А. Воробьев) выделить делянки для заготовки дров для обеспечения потребности населения и муниципальных учреждений в соответствии с заявками.
14. Предложить всем предприятиям и организациям, независимо от организационно-правовой формы и вида собственности, и населению Гагаринского района максимально погасить к началу отопительного сезона имеющуюся задолженность за коммунальные услуги: по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению. 
15. Еженедельно, начиная с 01.07.2022, руководителям управляющих организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства района представлять информацию в Управление СиЖКХ Администрации о проводимых предзимних работах.
16. Отделу ГО, ЧС и ЕДДС Администрации:
16.1. На основании типового регламента организации и применения временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории Гагаринского района Смоленской области разработать и утвердить типовой регламент организации временного электроснабжения потребителей района.
16.2. В срок до 25.06.2022 отработать схему взаимодействия с эксплуатационными, ремонтными, строительно-монтажными, транспортными, наладочными и другими организациями по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций на объектах тепло-, электроэнергетики и коммунального хозяйства Гагаринского района Смоленской области.
17. Опубликовать данное постановление с приложениями на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в сети «Интернет». 
18. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                            П. В. Хомайко

Приложение № 1
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район»
Смоленской области
от__23.06.2022__  № _804_

СОСТАВ 

штаба по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергетики, социальной сферы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области к работе в осенне- зимний период 2022-2023 годов (далее - Районный штаб)

Хомайко Полина Викторовна	- Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, начальник Районного штаба;	
Перкусова Елена Геннадьевна	- врио начальника Управления С и ЖКХ  Администрации, заместитель начальника Районного штаба; 	
Вихляева Юлия Геннадьевна	- старший менеджер отдела ЖКХ Управления С и ЖКХ Администрации,  секретарь Районного штаба;	
Кремнева Екатерина Анатольевна	старший менеджер отдела ЖКХ Управления С и ЖКХ Администрации,  секретарь Районного штаба;	
Члены штаба:
		
Акимов Владимир Васильевич	- директор ООО «Стройизоляция» (по согласованию);	
Акимов Сергей Владимирович 

Белова Мария Александровна	- директор ООО «Гагаринское ЖЭУ» (по согласованию);
- и. о. заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;	
Британова Наталья Николаевна        	- помощник Гагаринского межрайонного прокурора юрист 1 класса (по согласованию);	
Дергачев Виктор Андреевич	- генеральный директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию);	
Загородний Вадим Владимирович	- Директор ООО «Маяк»  (по согласованию);	
		
Иванов Алексей Николаевич 	- начальник Гагаринского РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» (по согласованию);	
Иванов Виктор Иванович	- директор МУП «Горводоканал» (по согласованию);	
Крутова Юлия Викторовна	- начальник отдела ЖКХ Управления С и ЖКХ Администрации;	
Кудрина Татьяна Валентиновна  	- Заместитель Главы муниципального образования - начальник финансового Управления Администрации; 	
Кухарев Андрей Васильевич	- начальник Гагаринского РТС ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (по согласованию); 	
Михайлова Ольга Викторовна	- директор ООО «Кармановское ЖЭУ» (по согласованию)	
Семенов Владимир Михайлович	- младший специалист инспекторского отдела ГУ «Государственная жилищная инспекция  Смоленской области» (по согласованию);	
Ченцова Наталья Леонидовна	- Глава города Гагарин (по согласованию);	

Приложение № 2	
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от__23.06.2022__  № _804_

Общий план
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергетики, социальной сферы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области к работе в осенне - зимний период 2022-2023 годов
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
№
п\п	Наименование мероприятий 	Планируемая стоимость работ, тыс. руб.	Планируемый объем работ	Срок исполнения	Исполнитель 	
	I.Объекты водоснабжения и водоотведения	
	МУП «Горводоканал»                                                общая стоимость мероприятий  6 035,00 тыс. руб.(средства предприятия)	
	Сети канализации(водоотведения)                                                                                                                          на сумму 355,0 тыс.руб.	
	Ремонт канализационных колодцев	55,0	20 ед	март-сентябрь	Начальник участка Акимов А. В.	
	Промывка канализационной сети	300,0	30 км	май-сентябрь		
	Очистные сооружения канализации(водоотведение)                                                                                               на сумму 260,0 тыс. руб	
	Замена радиаторов в производственном корпусе на городских очистных сооружениях	150,0	33 ед	май-июль	Начальник ОСК Макарова Е.В.	
	Обваловка иловых площадок на городских очистных сооружениях	110,0	2 ед	июнь-август		
	Сети водопровода                                                                                                                                             на сумму 5420,0 тыс. руб.	
	Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Стройотрядовская	1000,00	200 м 
(Д 63 мм)	июль- август	

Начальник участка Зарубин Ю.

	
	Ремонт водопроводных колодцев с запорной арматурой	75,0	15 ед	      май-сентябрь		
	Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Свердлова от ЦТП 17 в сторону ул. Каплунова	1200,0	300 м
(Д 110мм)	апрель-май		
	Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Ленинградская Набережная от пересечения с ул. Матросова в районе кинотеатра «Комсомолец»	2200,0	200 м
(Д 160 мм)	май-август		
	Замена ветхого участка водопроводной сети по ул. Строителей к домам №167 и № 167а	220,0	100 м
(Д 63 мм)	май-июнь		
	Замена ветхого участка водопроводной сети по ул. Стройотрядовская, ввод в ЦТП 6	250,0	200 м
(Д 110 мм)	июль		
	Ремонт пожарных гидрантов	200,0	10 ед	апрель-август		
	Промывка водопроводных сетей	130,00	37 км	май-сентябрь		
	Ремонт водозаборных колонок	70,00	15 ед	апрель-август		
	Подготовка производственных котельных к отопительному сезону(ревизия оборудования,запорной арматуры)	75,0	3 котельных	Май-сентябрь	Начальники участков	
	ООО «Кармановское ЖЭУ»                                                      общая стоимость мероприятий 533,7тыс. руб.(средства предприятия)	
	Водоснабжение на сумму.251,7 тыс. руб	
	Дезинфекция водопровода после весеннего паводка	25,3	12219 м/п	апрель	ООО «Кармановское ЖЭУ»	
	Чистка и дезинфекция резервуара № 2	28,0	2 шт.	май		
	Ремонт электропроводки скважины № 2 	8,8	1 ед.	июнь-август		
	Замена счетчика ВМХ - 100 водозабор	37,4	2 шт.	май-август		
	Замена счетчика ВМХ - 50 скважина №4	16.5	1 шт.	май-август		
	Замена счетчика ВМХ - 100 скважина №1,2	37,4	2 шт.	май-август		
	Замена насоса ЭЦВ 6 -160 -90 скважина № 4	71,0	1 шт.	апрель		
	Замена пожарного гидранта по ул.Молодежная	11,0	1 шт	апрель		
	Покос  травы на территориях водозабора и скважин № 1,2.4	9,4	3 объекта	май-август		
	Замена задвижек центрального водопровода  Д 100 мм  по
 ул. Пушкинской, скважина № 2; Д 50 мм по ул. Набережная	32.2	3 шт.	апрель		
	Водоотведение: на сумму.282 тыс. руб
	
	Очистка иловых карт	66.0	2 шт.	апрель-август	ООО «Кармановское ЖЭУ»	
	Вырубка кустарников	14,3		май, август		
	Очистка центральной КНС	16,5	1 шт.	май		
	Очистка КНС м-н «Западный», ул. Заводская	26,4		1 раз в квартал		
	Покос травы на территории объектов водоотведения	7,7		май, август		
	Очистка резервуаров отстойников	9,35	8 шт.	июнь		
	Очистка сточного канала	8,25	1 км	июль		
	Очистка аэротенка № 1, 2	12.1	2 шт²	июль-август		
	Замена задвижки на центральной  КНС	18,0	1 шт.	апрель		
	Ремонт вентиляционной вытяжки на центральной КНС	22,0	1 шт.	май		
	Очистка, промывка канализационных колодцев на центральной КНС	81,4	37 шт.	июль-август		
	II. Жилищный фонд	
	ООО «Стройизоляция»                                                               общая стоимость мероприятий 2241,1 тыс.руб. (средства предприятия)	
	Установка рассечек на вводах в тепловых пунктах домов	93,24	68 шт.	май	

ООО «Стройизоляция»	
	Промывка и опрессовка систем отопления	462,0	68 шт.	июнь-август		
	Ревизия запорной  арматуры 	18,23	358 шт.	май-август		
	Ремонт внутренних трубопроводов 	55,50	109 п. м.	май-август		
	Ревизия оборудования тепловых пунктов, поверка и установка КИП 	82,00	68 шт.	май-июль		
	Снятие рассечек на вводах систем отопления ж/домов 	83,16	68 шт.	сентябрь		
	Наладка и регулировка систем отопления и ГВС 	39,8	68 шт.	сентябрь		
	Текущий ремонт жилого фонда в т. ч.:
-ремонт дверных полотен и заполнений	20,16	14 шт.	июнь-сентябрь		
	-остекление мест общего пользования	13,70	36 м²	июль-сентябрь		
	-заделка подвальных продухов	19,4	32 шт.	сентябрь-октябрь		
	Ремонт изоляции наружных межпанельных швов	111,4	224 м.п.	май-октябрь		
	Ремонт мягких кровель	1170,2	2128 м²	июнь - сентябрь		
	Ремонт шиферных кровель 	38,80	34 м²	июнь - сентябрь		
	Ремонт козырьков балконов и входов в подъезды	31,2	4 шт.	май-август		
	Ремонт печей 	заявочно	-	июнь-август		
	Установка пружин на дверях 	2,3	5 шт.	август-сентябрь		
	ООО «Гагаринское ЖЭУ»                                                                  общая стоимость мероприятий 1085.2 тыс.руб. (средства предприятия)	
	Установка рассечек на вводах в тепловых пунктах домов	40,30	30 шт.	май	ООО «Гагарин. ЖЭУ»

	
	Промывка и опрессовка систем отопления 	230,63	30 шт.	июнь-август		
	Ревизия запорной  арматуры 	6,2	93 шт.	май-август		
	Ремонт внутренних трубопроводов 	32,15	52 п. м.	май-август		
	Ревизия оборудования тепловых пунктов, поверка и установка КИП	33,17	30 шт.	май-июль		
	Снятие рассечек на вводах систем отопления ж/домов 	33,90	30 шт.	сентябрь		
	Наладка и регулировка систем отопления и ГВС	23,00	30 шт.	сентябрь		
	Текущий ремонт жилого фонда в т. ч.:
-ремонт дверных полотен и заполнений	22,6	12 шт.	июнь-сентябрь		
	-остекление мест общего пользования	21,44	45 м²	июль-сентябрь		
	-заделка подвальных продухов	12,08	24 шт.	сентябрь-октябрь		
	Ремонт мягких кровель	682,5	1200 м²	июнь-сентябрь		
	Ремонт шиферных кровель	103,86	90 м²	июнь-сентябрь		
	Ремонт козырьков балконов и входов в подъезды	27,74	6 шт.	май-август		
	Ремонт печей 	12,4	2 шт.	июнь-август		
	Установка пружин, доводчиков на дверях	6,82	7 шт.	август-сентябрь		
	ООО «Управляющая компания»                                              общая стоимость мероприятий  5201,1 тыс.руб. (средства предприятия)	
	-Ремонт мягких кровель	305,4	420 м²	апрель-сентябрь	ООО «Управляющая компания»	
	-Ремонт шиферных кровель	150,3	90 м²	апрель-сентябрь		
	-Прочистка вентканалов	41,5	160 п. м.	по заявлениям		
	-Замена трубопроводов отопления	56,8	48 п.м.	аварийно-
восстановительные
работы		
	-Замена труб горячего водоснабжения	280,9	165 п.м.			
	-Замена труб холодного водоснабжения	220,0	175 п.м.			
	-Замена труб канализации	360,0	120 п. м.			
	-Замена запорной арматуры	106,0	90 шт.	май-октябрь		
	-Ремонт подъездного отопления 	89,1	73 п.м.	май-сенябрь		
	-Теплоизоляция инженерных сетей в тамбурах и подвалах	100,0	50 м³	май-октябрь 		
	-Ремонт, изготовление и установка оконных  и дверных заполнений	280,0	20 шт.	май-октябрь		
	-Ремонт цоколей и отмосток	476,0	200 м²	май-октябрь		
	-Ремонт аварийных балконов (по заявлениям)	186,0	4 шт.	май-октябрь		
	-Замена ветхих деревянных дверей подъездов на металлические и утепление дверей	240,0	6 шт.	май-октябрь		
	Замена тамбурных дверей	185,0	5 шт.	май-октябрь		
	Благоустройство дворовых территорий (скамейки, песочницы)	45,6	23 шт.	май-сентябрь		
	Кронирование и удаление переросших деревьев на придомовых территориях	55,2	12 шт.	весна-осень		
	Ремонт электрощитов	200,0	15 ж/ф	апрель-октябрь		
	Ямочный ремонт дворовых территорий	241,0	241	май - сентябрь		
	Прочистка лежаков канализации по подвалам	315,7	500 м³	по заявкам		
	Промывка и опрессовка систем отопления жилых домов муниципального жилого фонда	981,6	74 сист.	май-сентябрь		
	Остекление мест общего пользования (по сезону)	19,8	28 м²	май-октябрь		
	Замена светильников на энергосберегающие	237,0	21	май -сентябрь		
	Промывка квартирных приборов отопления	28,2	14 шт.	май-сентябрь		
	ООО «Жилищник»                                                                       общая стоимость мероприятий 260,6 тыс.руб. (средства предприятия)	
	Ревизия и ремонт запорной арматуры тепловых узлов систем теплопотребления	40,2	94 шт	май-август	ООО«Жилищник»
ООО «Жилищник»	
	Ревизия состояния и тепловой изоляции трубопроводов систем отопления	20,0	п. м. -600	май-август		
	Ревизия и проверка контрольно- измерительных приборов	22,4	64 шт	май-август		
	Промывка и испытания на прочность и плотность систем теплопотребления и горячего водоснабжения	178,0	16 шт	май-август		
	Утепление металлических  подъездных дверей		5 шт	июнь -сентябрь		
	Замена  подъездных  окон 		2 поддъезда	июнь-август		
	Ремонт деревянных полов в местах общего пользования		3 подъезда	июнь-август		
	Замена деревянных дверей на металлические		2 шт	июнь -июль		
	Ремонт отмостки ул.Заводская,д.3 ,г.Гагарин			июнь		
	Утепление фасадов МКД № 1 по ул. Юных космонавтов; № 8 по пер. Хвойный; № 1 а по ул.Мира в мкр. Лесном ,г.Гагарин		3 МКД	июнь - август		
	ООО «Кармановское ЖЭУ» общая стоимость мероприятий общая стоимость  мероприятий 1314,0 тыс. руб. (средства предприятия)	
	Промывка  и опрессовка системы отопления с. Карманово. м-н Западный д. № 1, 2, 3, 4, 5, ул. Мира, д. № 3.	260,0	6 шт.	май-август	ООО «Кармановское ЖЭУ»	
	Ремонт подъездных козырьков	30,0	4 шт	май-сентябрь		
	Ремонт кровли мкр. «Западный»,д. №  1,2,3	460,0	526,51 кв.м	июль-август		
	Ремонт отмостки мкр. «Западный»,д. №  1,2	60,0	45 кв.м	май		
	Замена запорной арматуры и вентилей, непригодных к дальнейшей эксплуатации,  в подвалах МКД	55,0	по мере необходимости	май-сентябрь		
	Ревизия и ремонт запорной арматуры в подвалах жилых домов мкр. Западный, ул. Мира, д. 3	22,0	по мере необходимости	май-сентябрь		
	Замена стояков ХВС, ГВС  мкр. Западный, д. №  1, 2 	100,0	4 шт.	июль		
	Ремонт теплоизоляции	18,0	140 м/п	июнь-август		
	Наладка и регулировка систем отопления и ГВС	7,0	6 шт.	сентябрь		
	Замена входных и тамбурных дверей мкр.»Западный» ,д. №  1,5	25,0	4 шт.	июнь-сентябрь		
	Ремонт оконных блоков в подъездах и подвалах	12,0	по мере необходимости	апрель-август		
	Заделка межпанельных швов мкр. Западный, д. 2, д. 3	190,0	450 м/п	июнь-сентябрь		
	Замена датчиков движения и светильников на лестничных площадках	55,0	по мере необходимости	май-сентябрь		
	Ревизия с частичной заменой электропроводки в местах общего пользования 	20,0	по мере необходимости	май-июнь		
	III. ТЕПЛОЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	
	ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»                            общая стоимость мероприятий 2451,04 тыс .руб.(средства предприятия)	
Районная котельная                                                                                                                               на сумму 1 209,04 тыс.руб.	
	Текущий ремонт внутрикотельных тепловых сетей дл. До 1 м		5 шт	апрель, май- сентябрь		
	Техническое обслуживание и ремонт КИПиА  ЦТП и котельной		93шт,
69 термометров
38 манометров	апрель -июнь		
	Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов: 
ремонт т/сети ЦТП – 4 от ТК-15 до ЦТП-16; 
ремонт т/сети ЦТП-6: от Пр4 до ТК- (ППУ ПЭ: 
ремонт т/сети ЦТП-1: от ТК-8 до ТК-9 (ППУ ПЭ 
ремонт т/сети ЦТП 6 от ТК-6 до бухгалтерии ЦРБ(ППУ ПЭ д.57); 		410м	Июнь - , июль		
	Ремонт арматуры на котельной и ЦТП		344 шт	май- июнь		
	Ремонт арматуры ТС		13шт	июнь		
	Ремонт тепловых камер ТС		6 шт	июль		
	Замена арматуры ТС		94шт	май		
	Гидравлическое испытание ТС		27,47 км	май		
	Текущий ремонт оборудования котельной		2 шт	июнь, август		
	Ремонт оборудования котлов		40 шт	июнь		
	Ремонт газового оборудования		1 шт	июнь		
	Ремонт электрооборудования котельной( трансформаторы, ВРУ)		28 шт	май		
	Ремонт оборудования ЦТП и тепловой изоляции трубопроводов (ЦТП 1-9)		9 шт	июль		
	Ремонт насосных агрегатов на ЦТП		10 шт	июль		
	Ремонт котлов  № 1 ДКВР 20,13 и № 2 ДКВР 10/13(трубн.часть, обмуровка)		2 шт	июль		
	Замена насосных агрегатов		8 шт	июль		
	Покраска оборудования, трубопроводов ТС в котельной и ЦТП		2шт/1800 м²	август		
	Благоустройство территории после земляных работ:
автодорога возле ЦТП – 1 и территория ГСК»Прогресс» в мкр «Северный»		840 м²	август-сентябрь		
	Ремонт производственных  и бытовых помещений котельной, сооружений  и ЦТП(строительная часть)		2 шт	май		
	 Котельная БМК-1 (ул. Бахтина)                                                                                                                    на сумму 541,4 тыс. руб.	
	Ремонт насосных агрегатов на ЦТП и котельной		8 шт	май-июнь		
	Гидравлическое испытание ТС		5,930 км	май		
	Замена арматуры на котельной,ТС		146 шт	май		
	Техническая диагностика газопроводов и газового оборудования		1 экспертиза	июль		
	Ремонт газового оборудования		1 шт			
	Ремонт оборудования ЦТП-13		1шт	июнь		
	Ремонт тепловых камер ТС		5 шт	июль		
	Текущий ремонт оборудования котельной		3 шт	апрель-июль		
	Ремонт электрооборудования котельной и ЦТП 		ВРУ- 4 шт
2 шт	июль-август		
	Техническое обслуживание и ремонт КИПиА  и котельной		1 шт	апрель		
	Благоустройство территории после земляных работ возле ЦТП -13		3 м²	август		
	Текущий ремонт внутрикотельных тепловых сетей дл. До 1 м		2 шт	июль		
	Покраска оборудования, трубопроводов ТС, ЦТП, котельной 		2шт/300 м²	сентябрь		
	Техническое обслуживание и ремонт КИПиА котельной		3 шт.
Манометры -4шт,
термометры – 5 шт	сентябрь		
	Котельная БМК-2 (ул. Заводская)                                                                                                                        на сумму 827,3 тыс. руб.	
	Ремонт газового оборудования		1 шт	апрель		
	Ремонт и замена арматуры ТС		100 шт 	май	

. Гагаринский. РТС 	
	Текущий ремонт оборудования котельной и ЦТП		3 шт	май		
	Гидравлическое испытание ТС		1,9 км	май		
	Ремонт электрооборудования котельной и ЦТП		ВРУ - 1шгт,
3 шт	май		
	Текущий ремонт тепловых сетей		2 шт	май-август		
	Замена и ремонт насосных агрегатов на ЦТП		4 шт	май-июль		
	Покраска оборудования, трубопроводов ТС и ЦТП		130 м²	сентябрь		
	Техническое обслуживание и ремонт КИПиА котельной		5 шт	май, август, октябрь		
	Ремонт водоподогревателей		237 шт	май		
	Ремонт арматуры на котельной		8 шт	июль		
	Техническая диагностика газопроводов и газового оборудования		1 экспертиза	июль		
	Ремонт тепловых камер ТС		2 шт	июль		
	Котельная с. Карманово                                                                                                                                      на сумму 403,85 тыс.руб.	
	Ремонт котлов (трубн. часть, обмуровка)		2 шт	май		
	Ремонт и замена арматуры ТС		127 шт	май-июль, 		
	Ремонт насосных агрегатов на котельной и ЦТП		13 шт	апрель-июль		
	Замена газовой запорной арматуры		3шт	июль		
	Гидравлическое испытание ТС		9,56км	май		
	Ремонт оборудования котельной и ЦТП		25 шт	июнь		
	Техническое обслуживание и ремонт КИПиА котельной и ЦТП		6 шт,Ю
Манометры- 7шт;
Термометры – 23шт	апрель-июль,
сентябрь		
	Замена  и ремонт арматуры на котельной		72 шт	май-июль		
	Ремонт тепловых камер ТС		1шт	июнь		
	Ремонт производственных  и бытовых помещений котельной, сооружений  и ЦТП(строительная часть)		3шт	июль-август		
	Ремонт тепловой изоляции  трубопроводов ТС и ГВС(магистраль  от ТК-2 до Пр 4,до ТК-23)		60пм	октябрь		
	Ремонт газового оборудования		1 шт	июль		
	Ремонт электрооборудования котельной и ЦТП		2 шт	июнь-июль		
	Текущий ремонт оборудования котельной и ЦТП		ВРУ-1 шт,
2 шт	апрель- июль,
октябрь		
	Покраска оборудования, трубопроводов ТС и ЦТП		2шт,290 м²	август, сентябрь		
	Благоустройство территории после земляных работ (асфальтовое покрытие, щебень и т.д.)		40 м²	август-сентябрь		
	Текущий ремонт тепловых сетей		3 шт	май-июль,
ноябрь		
	Котельная п. Лесной                                                                                                                                    на сумму 219,0 тыс.руб.	
	ремонт оборудования котлов		20 шт	июнь	 Гагарин. РТС	
	ремонт насосных агрегатов		1 шт	сентябрь		
	Гидравлическое испытание ТС		1,82км	май		
	Замена и установка обратных клапанов		2 шт	июнь		
						
	Ремонт арматуры ТС		18 шт	май, июль		
	Замена  и ремонт арматуры на котельной		5 шт	Июнь		
	Текущий ремонт оборудования котельной		1 шт	Июль		
	Покраска/побелка оборудования трубопроводов котельной		1 шт/100 м²	Сентябрь		
	Техническое обслуживание и ремонт КИПиА на котельной		2 шт
Термометры-2 шт;
Манометры-2 шт	апрель, июль		
	Ремонт электрооборудования котельной		1 шт	август		
	ремонт  тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС от ТК-3 до ТК-3а		60м	октябрь		
	Котельная ул. Пушная                                                                                                                                        на сумму 43,0тыс.руб.	
	Гидравлическое испытание ТС		0,44 км	май	Гагарин. РТС 

	
	Ремонт арматуры ТС и на котельной 		20 шт	май-июнь		
	Ремонт электрооборудования котельной		1 шт	Июнь		
	Текущий ремонт тепловых сетей		3 шт	май-
		
	ремонт насосных агрегатов		1 шт	июнь		
	Текущий ремонт оборудования котельной		9 шт	январь, июнь		
	Техническое обслуживание  и ремонт КИПиА на котельной		5 шт	апрель, октябрь		
	Покраска/побелка оборудования, трубопроводов котельной		1 шт/90 м²	 сентябрь		
	ремонт оборудования котлов		20 шт	июнь		
	БМК № 7 ул. Красноармейская г. Гагарин                                                                                                                             на сумму1365,1 тыс.руб.	
	Ремонт электрооборудования котельной и ЦТП		7 шт	апрель-май	. Гагарин. РТС
	
	Ремонт газового оборудования		1шт	апрель		
	Гидравлическое испытание ТС		4,983 км	май		
	Ремонт арматуры на котельной		20 шт	июль		
	Ремонт и замена арматуры ТС		157 шт	Май		
	Текущий ремонт оборудования котельной		3 шт	май, август		
	Ремонт насосных агрегатов на ЦТП		2 шт	июнь		
	Техническое обслуживание  и ремонт КИПиА на ЦТП и котельной		2 шт,
Манометры -4 шт,термометры – 5 шт	апрель,
июль, август
сентябрь		
	Ремонт оборудования ЦТП		1 шт	Июль		
	Текущий ремонт тепловых сетей		1 шт	сентябрь		
	Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов ЦТП -17: от ТК-2 до ТК-3,до ТК-4(ППУ ПЭ)		360 м	апрель-май		
	Ремонт тепловых камерТС		3 шт	Июль		
	Покраска оборудования, трубопроводов ТС и ЦТП		1шт/165 м2	сентябрь		
	БМК № 8 ул. Ленина, г. Гагарин                                                                                                                                         на сумму 140,8тыс.руб.	
	Текущий ремонт тепловых сетей		2 шт	май, август		
	Ремонт насосных агрегатов на ЦТП		1 шт	июль	 Гагарин. РТС 	
	Гидравлическое испытание ТС		2,01 км	Май		
	Ремонт и замена арматуры ТС		67 шт	Май		
	Текущий ремонт оборудования котельной		5 шт	май, сентябрь		
	Ремонт газового оборудования		1 шт	апрель		
	Ремонт арматуры на котельной		15 шт	июль		
	Покраска оборудования, трубопроводов ТС и ЦТП		1шт/100 м²	сентябрь		
	Ремонт оборудования ЦТП		2 шт	июль		
	ремонт электрооборудования ЦТП		3 шт
	апрель		
	Техническое обслуживание  и ремонт КИПиА на котельной		2 шт,
Манометры – 3 шт,
Термометры- 2 шт	апрель, август, октябрь		
	БМК № 9 ул. Советская г. Гагарин                                                                                                                                     на сумму 2112,95 тыс.руб.	
	Ремонт и замена арматуры ТС		158шт	май- июнь	 Гагарин. РТС 	
	Ремонт водоподогревателей		1шт	июнь		
	Ремонт и замена арматуры на котельной		27 шт	май, июль		
	Гидравлическое испытание ТС		5,62км	май		
	Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов :
от ТК-16 до ул. Советская, д.№3 ППУ ПЭ;
от ТК-45 до ж.д.№ 3 по ул.Гжатская ППУ ПЭ;
отПР1а до Прр1 ул.Мичурина,3 ППУ ПЭ		277м	 Июнь ,июль		
	Текущий ремонт оборудования котельной		6 шт 	май-июнь, июль,
октябрь		
	Ремонт бытовых помещений котельной (строительная часть)		1 шт	май		
	Ремонт газового оборудования		1 шт	апрель		
	Ремонт электрооборудования котельной		1 шт	май		
	Текущий ремонт тепловых сетей		4 шт	март, май, июль, август		
	Техническое обслуживание  и ремонт КИП и А на котельной		2 шт,
Манометры – 3 шт,
термометры – 3 шт	апрель, сентябрь,
октябрь		
	Благоустройство территории после земляных работ		80 м²	август		
	ООО «Маяк»                                                                                общая стоимость мероприятий 319,5тыс.руб.(средства предприятия)	
	Блочно-модульная котельная в д. Поличня, ул. Новая                                                                                                         на сумму 273,0тыс.руб.	
	Промывка котлов КТГ-0,16	3,0	2 шт.	июнь	ООО «Маяк»	
	Промывка и очистка пластинчатых теплообменников сетевой воды и возможная их капитальная замена по результатам промывки	4,0
150,0	2 шт.
2 шт	июнь		
	Ремонт и поверка контрольно-измерительных приборов	20,5	26 шт.	сентябрь		
	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	5,5	21 шт.	июнь		
	Ревизия и текущий ремонт системы автоматики котельной	3,0	       1 шт.	июль		
	Замена циркуляционного насоса котла № 1	65,0	1 шт	август-сентябрь		
	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов 	2,5	      5 шт.	август		
	Техническое обслуживание и наладка системы автоматики	20,0	1 шт.	сентябрь-октябрь		
	Домовая  котельная ул.Комсомольская,д.9 г.Гагарин                                                                                                               на сумму 46,5 тыс.руб.	
	Промывка котлов «Thermona Trio» и при необходимости замена теплообменников по результатам промывки	5,0	2 шт	август-сентябрь	ООО «Маяк»	
	Ремонт и поверка контрольно-измерительных приборов	10,5	16 шт	сентябрь		
	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры	5,5	14 шт	Июнь		
	Ревизия и текущий ремонт системы автоматики котельной	3,0	1шт	Июль		
	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов	2,5	1шт	Август		
	Техническое обслуживание и наладка системы автоматики	20,0	5шт	сснтябрь-октябрь		
	МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства»                        обща1штя стоимость мероприятий 1351,0 тыс.руб.                                                                                                              (средства предприятия)	
	Блочно модульная котельная МСОШ д. Акатово                                                                                                            на сумму148,0 тыс. руб.	
	Поверка контрольно-измерительных приборов	6,0	34 шт.	май-август	

МУП «УЖКХиС»	
	Протоколы эл. измерений	11,0		сентябрь		
	Проверка резервных источников питания	-		май		
	Обучение  персонала (операторы, слесари)	3,0		сентябрь		
	Проведение очередных пусконаладочных работ	90,0		апрель, октябрь		
	Текущий ремонт (промывка теплообменника, замена запорной арматуры, окраска трубопроводов, дверей, стен)	38,0		май-сентябрь		
	Блочно модульная котельная МСОШ д. Никольское                                                                                                            на сумму 291,5 тыс. руб.	
	Поверка контрольно-измерительных приборов	5,5	23 шт.	май-август	МУП «УЖКХиС»
	
	Текущий ремонт (промывка теплообменника с разборкой котлов, продувка горелок, замена запорной арматуры, окраска трубопроводов, дверей, стен)	62,0	3 котла	июль-август		
	Протоколы эл. измерений  	11,0		март		
	Обучение  персонала (операторы, слесари)	3,0		сентябрь		
	Замена котла THERM TRIO-90 	210,0	1 котел	май-сентябрь при наличии финансовых средств		
	Блочно модульная котельная МСОШ д. Токарёво                                                                                                               на сумму 56,0 тыс. руб.	
	Поверка контрольно-измерительных приборов	6,5	38 шт.	май-июнь	
МУП «УЖКХиС»
	
	Текущий ремонт (промывка теплообменника с разборкой котлов, продувка горелок, замена запорной арматуры, окраска трубопроводов, дверей, стен)	35,0	5 котлов	июль-август		
	Протоколы эл.измерений	11,0				
	Проверка резервных источников питания	-		май		
	Обучение  персонала (операторы, слесари)	3,5		сентябрь		
	Газовая котельная СДК д. Клушино                                                                                                                             на сумму 105,5 тыс. руб.	
	Поверка контрольно-измерительных приборов и газового измерительного комплекса	5,0		июль-август	

МУП «УЖКХиС»
	
	Текущий ремонт (промывка теплообменника с разборкой котлов, продувка горелок, замена запорной арматуры, окраска трубопроводов, дверей, стен)	45.0	2 котла	июль-август		
	Протоколы эл. измерений	9,0		сентябрь		
	Проверка резервных источников питания			май		
	Обучение  персонала (операторы, слесари)	1,5		сентябрь		
	замена котловых теплообменников	45,0	3 шт			
	Газовая котельная базы АБК  г. Гагарин, проезд Первомайский, д. 1                                                                              на сумму 347,5 тыс.руб.	
	Поверка контрольно-измерительных приборов	4,5		июль-август	

МУП «УЖКХиС»

	Текущий ремонт котлов с заменой компонентов котла (промывка теплообменника с разборкой котлов, продувка горелок, замена запорной арматуры, окраска трубопроводов, дверей, стен)	130,0		июнь-август		
	Протоколы эл. измерений	11,0		сентябрь		
	Проверка резервных источников питания	-		май		
	Обучение  персонала (операторы, слесари)	2.0		сентябрь		
	Прловедение очередных режимно-наладочных испытаний	200,0	4 котла	июль-сентябрь		
	Газовая котельная ул. Мелиоративная д. 11                                                                                                                               на сумму 224,5  тыс. руб.	
	Поверка контрольно-измерительных приборов	4,0		июль-август	МУП «УЖКХиС»
	
	Протоколы эл. измерений	9,0		сентябрь		
	замена котлового насоса	11,0	1 шт	апрель		
	Замена ГРПШ – РЕ 25	120,0	1 шт	сентябрь		
	Замена котла	88,5	1 шт	сентябрь		
	обучение персонала	1,0		сентябрь		
	Блочно-модульная котельная МСОШ д. Родоманово	                                                                                  на сумму 55,0 тыс. руб.	
	Поверка контрольно-измерительных приборов	8,0		июль-август		
	Ремонт и утепление теплотрассы	30,0		июнь-сентябрь		
	косметический ремонт помещения БМК,  благоустройство территории	14,0		май-сентябрь		
	обучение персонала	3,0		октябрь		
	Блочно-модульная котельная МСОШ д. Пречистое                                                                                                                    на сумму 50,0 тыс. руб.	
	поверка контрольно-измерительных приборов	11,0		июль-август		
	Ремонт системы дымоудаления	10,0	1 система	май		
	обучение персонала	2,0		октябрь		
	благоустройство территории вокруг котельной	27,0		май-август		
	газовая котельная ФОК «Восток»                                                                                                                                               на сумму 73,0 тыс. руб.	
	поверка контрольно-измерительных приборов	15,0		июль-август		
	обучение персонала	3,0		октябрь		
	модернизация системы автоматики безопасности и розжига двух котлов	40,0		март-сентябрь		
	косметический ремонт помещений котельной	15,0		май-сентябрь		
	ООО «Гагаринское ЖЭУ»                                                                   общая стоимость мероприятий     812,9 тыс. руб .(средства предприятия)                                  	
	Котельная МКД по ул. Новая 16                                                                                                                                                на сумму:812,9 тыс. руб	
	Ремонт КиП и А котлов №1 и №2					
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 40А		8			
	Демонтаж ключа или кнопка на панели 1 шт		6			
	Ключ или кнопка на панели 1шт		6			
	Демонтаж мдмкатора восьмиканальной 1 компл		4			
	Индикатор восьмиканальной 1 компл.		4			
	Устройство бесперебойного питания (УБП)		1			
	Демонтаж пульта служебной связи и контроля		1			
	Пульт служебной связи и контроля		1			
	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем		4			
	Установка насосов центробежных с электродвигателем		4			
	Ремонт задвижек диаметром 100мм		9			
	Установка вентилей, клапанов обратных трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм		2			
	Установка фильтров диаметром 80 мм		1			
	Установка термометров о праве прямых и угловых 		7			
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном		2			
	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 80мм		2
			
	Демонтаж арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 Мпа 80мм		2			
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей тех.оборудования		18м2			
	Ремонт котлов с заменой трубного пучка в теплообменниках                                              	200,0	2 котла	июль-август		
	Заменка сетевого насова	180,0	1 шт	сентябрь		
	Замена задвижек на внутрикотельных трубопроводах Ф 80	60,0	2 шт	август		
	Замена вводной задвижки Ф 50 на свс(линия водоснабжение)	15	1 шт	Июль-август		
	IV. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	
	Гагаринский РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» 	
	Кап.ремонт ВЛ 6-10 кВ		10 шт/
293,149 км	январь-апрель, сентябрь	
Гагаринский РЭС	
	Расчистка просеки на ВЛ-10 кВ		49,39 га	январь-апрель, сентябрь		
	Замена дефектного участка ВЛ 0,4 кВ		0,37 км	март-апрель		
	Замена вводов на ВЛ-0,4 кВ на изолированный по району		50 км	март-апрель		
	Замена дер.опор А-обр. на Ж/Б А-обр.ВЛ-0,4кВ		3 шт.	февраль		
	Замена дер.опор на Ж/Б опоры промеж. ВЛ-0,4кВ		5 шт.	февраль		
	Восстановление нумерации и постановка обозначений опор ВЛ-10кВ		841 опора.	апрель-сентябрь		
	Восстановление нумерации и постановка обозначений опор ВЛ-0,4кВ		700 опор.	май- август		
	Кап.ремонт ТП-10/0,4кВ		37шт./
4,317МВА	август-сентябрь		
	Капремонт силовых трансформаторов на ТП-10/0,4кВ		10 шт.	март-апрель, 
		
	V. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ.	
	МУП «ПЖРТ»                                                                           общая стоимость мероприятий 468,71 тыс. руб. ( средства предприятия)	
	Создать комиссию по оценке готовности тепловых сетей			до 01.06.2022	МУП ПЖРТ	
	Провести замеры контуров заземления, сопротивления изоляции э/сетей, испытание энергетического оборудования	30,0		до 01 .07.2022		
	Провести противоаварийные тренировки с персоналом на объектах энергосбережения			до 01 .07.2022		
	Выполнить промывку и провести испытания на прочность и плотность системы отопления и ГВС	2,0		до 01.09.2022		
	Выполнить ревизию запорной арматуры и частичную ее замену, провести испытания на прочность и плотность	1,8		до 01.09.2022		
	Проверить и при необходимости отремонтировать изоляцию трубопроводов	0,74		до 01.09.2022		
	Провести ремонт и замену трубопроводов отопления, находящихся в аварийном состоянии	1,5		до 01.09.2022		
	Провести ремонт и опрессовку котла «Китурами» с заменой топливного контура	1,07		до 10.06.2022		
	Провести промывку и опрессовку бойлерной установки	0,95		до 01.08.2022 		
	Выполнить локальный ремонт мягкой кровли	3,5		до 01.09.2022		
	Провести ремонт отмостки и цоколя здания	0,85		до 01.10.2022		
	Провести осмотр и утепление тамбуров помещений	0,5		до 01.08.2022		
	Провести замену деревянных окон на пластиковые в помешщениях общего назначения	72,0		до 01.11.2022		
	Провести профилактический ремонт парильной печи
	1,8		до 01.09.2022		
	Заготовить необходимое количество дров для топки парильных печей	352,5		до 01.11.2022 		
	МБУ «Благоустройство Гагарин»    общая стоимость мероприятий 3000,0 тыс. руб. (средства бюджета Гагаринского городского поселения)	
	Подготовка спецтехники	300,0	18 ед.		МБУ «Благоустройство Гагарин»	
	Заготовка песко-соляной смеси	2700,0	1100 тонн			
	VI. ОБЪЕКТЫ  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЫ	
	Комитет по образованию  
общая стоимость мероприятий  2849,3 тыс. руб  (средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области) 	
	Заготовка и организация хранения топлива для МБОУ «Ашковская основная школа», «Серго-Ивановская основная школа»	1097,1	Уголь - 141 т
Дрова - 25 куб.м.	апрель-август

руководители
образовательных
организаций	
	Техническое освидетельствование отопительных котлов. Наладка котлов и оборудования, поверка приборов КИП и А котельных МБОУ «Ашковская основная школа», «Серго-Ивановская основная школа», «Колокольнинская основная школа»
	0,00	9 котлов	май-август		
	Проведение работ по испытанию на прочность и плотность, промывке трубопроводов систем отопления	471,7(бюджет района)	27 объектов	май-август		
	Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом, поверка пожарных кранов и лестниц	866,6(бюджет района)	26 объектов	в соответствии с графиком		
	Проведение замеров сопротивления изоляции	413,9(бюджет района)	28 объектов			
		
	Отдел по культуре 
общая стоимость мероприятий 708,957 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области -708,957 тыс. руб, не обеспечено финансированием работы на сумму 888,96 тыс. руб.	
	Опрессовка системы отопления:
- МБУК МКДЦ «Комсомолец»;	22,0 	
451 м. (2 об.)	
июнь		
	- МБУК Кармановский КДЦ;	11,9 	130 м.	июнь		
	- МБУК «Гагаринская МЦБС»; 	15,0 	90 м.	июль		
	- МБУДО «Гагаринская ДМШ имени И. Д. Кобзона»	12,5 	158 м3.	август		
	Приобретение твердого топлива для сельских учреждений культуры:
- МБУК МКДЦ «Комсомолец» (дрова);	

230,7 	

115 м³ дров	

апрель-октябрь		
	- МБУК «Гагаринская МЦБС» (дрова)	90,3 	45 м³ дров			
	Огнезащитная обработка 
- МБУК МКДЦ «Комсомолец»	50,0 	 3 филиала	март		
	- МБУДО «Гагаринская ДМШ им. И.Д.Кобзона»	5,057 	1объект	март		
	Контроль качества огнезащитной обработки:
- МБУК МКДЦ «Комсомолец»;	3.0 	1 объект	июнь-декабрь
		
	   МБУК кармановский КДЦ»	5,0 	1 объект			
	 -МБУК «Гагаринская МЦБС»	15,0 	3 объекта			
	Замеры сопротивления электропроводки:
- МБУК МКДЦ «Комсомолец»;	150,0 	
8 филиалов	
июнь-август
		
	- МБУК «Гагаринская МЦБС»;	59,0 	9 филиалов			
	- МБУДО «Гагаринская ДМШ им.И.Д. Кобзона»;	12,5	1 объект.			
	- МБУДО «Гагаринская ДХШ»	10,0 	1 объект.			
	- МБУК Кармановский КДЦ	17,0	1 объект.			
	Необходимые мероприятия, требующие дополнительного финансирования:	888,96)				
	Опрессовка истемы отопления гаражей Родомановского СДК	20,0				
	Опрессовка и промывка системы отопления Клушинского СДК	25,0				
	Замена дверных блоков в народном театре	40.0				
	Ремонт электропроводки СДК Самуйлово25,0	25,0				
	Замена газового котла СДК Родоманово	60,0				
	Устройство канализации в Никольском СДК	168,96				
	Поверка теплового счетчика МБУК Кармановский КДЦ
	50,0				
	Монтаж пожарной сигнализации в Никольском СДК	500,0				
	Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи 
 общая стоимость мероприятий 107,156тыс. руб., в т.ч. средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области,. – 104,156  тыс. руб., внебюджетные средства организаций 3,0 тыс. руб, не обеспечены  финансированием работы на сумму 5462,251тыс. руб..
	
	МБУ ФОК «Восток»
на сумму 40,156 тыс. руб.,  в т.ч. средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области,.–40,156 тыс.руб	
	Водоснабжение и водоотведение	
	Очистка уличной канализации (дренажей)		600 м	май	МБУ ФОК «Восток»	
	Прочистка внутренней канализации		160 м	июнь		
	Проверка запорной арматуры (замена кранов, задвижек)		1 шт	июнь		
	Промывка фильтров на трубопроводах ХВС и ГВС		2 шт	июнь		
	Ревизия внутренних сетей водопровода и канализации, осмотр, проверка технического состояния, подтяжка болтовых креплений, очистка, смазка, устранение мелких дефектов (смена прокладок в водопроводных кранах (по необходимости), уплотнение сгонов, проверка креплений санитарно-технических приборов, прочистка сифонов			июнь		
	Проверка на водоотдачу наружных и внутренних пожарных гидрантов (за счет бюджетных средств)	8,4	4 шт	июнь	ВДПО, МБУ ФОК «Восток»	
	Электроснабжение	
	Замена дренажного насоса КНС. 
Проверка работы автоматики включения дренажных насосов (резервный фонд)	31,756	1 шт	май	
МБУ ФОК «Восток»
	
	Теплоснабжение	
	Ремонт, регулировка и испытание системы отопления			июль	МУП 
«Управление ЖКХ и С»	
	Ревизия циркуляционных насосов			июль		
	Ревизия запорной и регулирующей арматуры, трубопроводов системы отопления и ГВС (осмотр, проверка технического состояния, подтяжка болтовых креплений, очистка, устранение мелких дефектов, подкраска, восстановление теплоизоляции)			июль		
	Промывка радиаторов и в целом системы отопления			июль		
	Регулировка и наладка системы отопления			июль		
	Проверка тепловых систем в помещениях			июль		
	Перевод работы котельной в летний режим			май		
	МБУ «ГСШП» 
на сумму 20,0тыс.руб., в т.ч..  средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 20,0 тыс.руб., не обеспечены  финансированием работы на сумму 5462,251тыс. руб.	
	Ревизия циркуляционных насосов, запорной арматуры	без оплаты		август	раб. по обслуживанию	
	Ревизия аппарата подготовки гипохлорита (система дезинфекции воды)	без оплаты		август	дезинфекторы	
	Опресовка тепловых сетей	20,0		июнь	по договору	
	Ревизия подающих вентиляторов и замена автоматов подключения вентиляторов	Без оплаты		август	раб. по обслуживанию	
	Ревизия фильтрующего материала в емкости  и промывка фильтров 	без оплаты		август	раб. по обслуживанию	
	Ремонт и замена смесителей в душевых кабинах	без оплаты		август	раб. по обслуживанию	
	Необходимые мероприятия, требующие дополнительного финансирования:	5462,251				
	Ремонт вентиляционного короба на спортивную ванну	без оплаты		август	раб. по обслуживанию	
	Замена унитазов в туалетах	15,0	3 шт	август	раб. по обслуживанию	
	Профилактические работы в детской и спортивной ваннах(чистка обходных дорожек,ванн бассейнов от накипи кислотой)	без оплаты	2 шт	август	раб. по обслуживанию	
	Ремонт мягкой кровли плоской крыши частичный ремонт фасада бассейна	5447,251 		сентябрь	По договору	
	МБУ «ГСШ»
на сумму 47,0тыс.руб., в т.ч..  средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  –44,0тыс.руб.,	
	Локальный ремонт кровель в местах вероятных протечек	7,0		май	своими силами	
	Промывка и испытание на прочность и плотность систем отопления и горячего водоснабжения	27,0		июнь	теплоснабжающая организация	
	Осмотр и проверка канализационных сетей			июль	своими силами	
	Осмотр и проверка электропроводки			июль		
	Осмотр и проверка водопроводных сетей			август		
	Осмотр и проверка утепления помещений			август		
	Замена, предохранителей, изоляторов 			сентябрь		
	Обеспечение объекта инструментом для зимней уборки территорий ( внебюджетные средства)	3,0		октябрь		
	Ревизия и ремонт вентилей, задвижек на системах ГВС, ХВС, отопления			октябрь		
	Проверка работоспособности теплосчетчика			июль		
	Замеры сопротивления контура земли по объектам	10,0			По договору ООО «Спецэлектромонтаж»	
	Итого общая стоимость мероприятий 	34789,263				
	в т.ч средства  бюджета Гагаринского городского поселения	 3 000,0				
	в т.ч.средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	 3662,413				
	в т.ч. собственные средства предприятий и организаций	28126,85				
	Не обеспечены финансированием работы	6351,211